문서번호	시설과-796
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관	시설과장	관리부장
협 조
	조경과장
	주무관

2016년 서울대공원 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제 점검·정비 계획

2016. 2.

서 울 대 공 원

(시 설 과)

2016년 서울대공원 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제점검․정비 계획

2016년도 우기를 대비하여 공원내 각종 수방시설과 공사장 및 축대, 옹벽, 급경사지 등 수해취약지역에 대한 일제점검을 실시하고 우기 전까지 정비를 완료하여 풍수해를 예방하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 하천관리과-1167(‘16.1.25) 『2016년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약 지역 일제점검 시행』

Ⅱ		점검대상

□ 하천 및 수방시설물

◦ 소하천 : 4개소(금붕어광장연못, 조절저수지, 자연캠프장, 서울랜드)

◦ 제  방 : 2개소(금붕어광장연못제방, 조절저수지제방)

◦ 하수암거 : 4개소(반도지암거,해양관암거,저수지암거,큰물새장암거)

◦ 하수도 : 45.7km

◦ 우․오수맨홀 : 498개소

◦ 빗물받이 : 537개소km

◦ 오수처리장 : 1개소

□ 풍수해 취약시설 및 지역

◦ 공사장

▷ 건축시설물 유지보수공사, 전기시설물 유지보수공사, 서울랜드 고압케이블 및 수배전반 교체공사, 서울대공원 조절저수지 시설물 정비공사  ⇒ 시설과

◦ 사면시설  : 공원내 절개지, 산사태․낙석 우려지역, 축대, 옹벽등 ⇒ 조경과

◦ 지하시설  : 동물원 및 호수순환 공동구 등 ⇒ 시설과

◦ 유수 장애시설

▷ 하천 및 하수관거내 퇴적물 등 유수장애 시설 ⇒ 시설과

▷ 산림내 숲가꾸기 부산물 등 ⇒ 조경과

Ⅲ		추진계획

□ 점검 및 정비 기간 : 2016. 2. 18 ~ 2016. 4. 26

점검계획 수립 및 대상파악 제출 (2.12까지 제출)		1차 점검 시 행 (2.18~3.21)		지적사항 보완조치 (3.22~3.31)		조치결과 제출 (4.4까지)
[총괄부서]		[담당부서]		[담당부서]		[총괄부서]
2차 집중점검시행 (1차점검시 미 조치사항 위주) (4.5~4.15)		지적사항 정비완료 (4.16~4.25)		조치결과 제출 (4.26까지)
[담당부서]		[담당부서]		[총괄부서]

※ 총괄부서 : 시설과

※ 담당부서 : 시설과, 조경과

□ 단계별 점검 및 정비(세부)

【1차 점검 및 정비】

◦점검책임자 : 담당과장

◦기  간 : 2016. 2. 18 ~ 3. 21까지

▷ 시설물 및 공사장 담당부서장 주관, 전문가 등과 대상파악 및 점검․정비

▷ 경미한 사항은 현장에서 즉시 정비조치

【2차 점검 및 정비】

◦점검책임자 : 관리부장

◦기  간 : 2016. 4. 5 ~ 4. 15까지

▷ 관리부장, 담당 부서장, 전문가 등 합동점검

▷ 2016. 4.25까지 1․2차 점검시 지적사항 전체 정비완료

▷ 우기전 정비가 곤란할 경우 별도 정비계획 수립 시행

Ⅳ		행정사항

□ 점검대상, 지적사항 및 조치결과 제출

◦ 총괄부서(시설과)에서 자료수합 작성 및 제출

- 점검계획 수립 후 방침서 및 대상현황 제출 : 2016. 2.12(금)

☞ 1차 지적 및 조치결과는 4.4(월)까지 총괄부서에서 하천관리과로 제출
☞ 2차 지적사항 및 조치결과는 4.25(월)까지 하천관리과로 제출
◦ 점검결과 중대한 결함사항 조치

- 구조적 균열, 붕괴, 전도 등의 징후가 발견 될 경우 응급조치 및 대책마련

☞ 필요시 재난관리기금 등을 활용하여 우기전까지 완료될 수 있도록 조치

첨 부 : 1. 점검대상 현황 1부.

2. 수방시설 및 수해취약시설 일제점검 및 정비결과 제출서식 1부.  끝.