문서번호	시설관리과-398
결재일자	2016.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

2016년 시설물 유지관리사업 추진계획

2016. 1.

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 시설물 유지관리사업 추진계획

2016년 상수도 시설물 유지관리사업의 원활한 추진을 위하여 사업소별 계획을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 시설 현황

(단위 : 개)

구 분	배 수 지			가압장	밸 브
	계	지역	1~2차		계	제 수	퇴 수	공 기
수 량	102	32	70	205	206,103	189,424	8,494	8,185

□ 예산편성 현황

연번	사 업 명		예산액 (백만원)			비 고 (‘15년 대비)
			’15년	’16년	증·감
계			39,949	43,473	증 3,524	증 8.8%
1	노후밸브 정비 (본부 포괄)		15,000	17,000	증 2,000	노후밸브 교체 280개소 증
2	상수도관 전식방지공사 (본부 포괄)		1,500	3,000	증 1,500	전식방지 관로 12㎞ 증
3	가압장, 배수지 등 시 설 물 유지관리	소계	12,018	12,637	증 619
		본부 포괄	5,705	6,183	증 478	증액 주요사업 - 안전진단 677백만원 - 전식방지 용역 200백만원(신규)
		사업소	6,313	6,454	증 141	- 가압장, 배수지 기전 및 토목시설 유지관리비
4	배수지 물탱크 청소 (사업소 예산)		2,990	2,968	▲ 22
5	가압장, 배수지 노후 시설 개량(사업소 예산)		6,000	5,500	▲ 500	- 노후 기전설비 개량
6	공동구 유지관리 부담금(사업소 예산)		2,441	2,368	▲ 73	- 공동구 관리비 반영 (도로시설과)

Ⅱ		2016년 사업계획 검토결과

□ 분야별 사업내용 요약

연번	구 분		2016년 예산 (백만원)	사업물량 (개소)	비 고
	사업명	세부내용
합계			43,473		본 부 : 26,183 사업소 : 17,290
1	노후밸브 정비 (본부 포괄)	소 계	17,000	4,180개소
		노후밸브 교체	15,200	2,280개소	사업소 배정
		대형밸브 점검·정비	1,000	1,900개소	시설안전부 배정
		감 리 비	800	-	시설안전부 배정
2	상수도관 전식방지 (본부 포괄)	소 계	3,000	27㎞	5개사업소 배정
		시설비 및 감리비	3,000	27㎞
3	가압장, 배수지 등 시설물 유지관리 (본부 포괄)	소 계	6,183	73개소
		정밀안전진단 등	1,516	71개소	시설안전부,사업소 배정
		배수지 내부방식	4,460	2개소	2개사업소 배정
		상수도관 방식 용역	200	1식	시설안전부 배정
		시책사업비	7	1식
	가압장, 배수지 등 시설물 유지관리 (사업소 예산)	소 계	6,454	8개 사업소
		환경정비(토목)	2,509	8개 사업소
		기전설비 유지보수	2,314	8개 사업소
		재염소시설 유지보수	125	5개 사업소
		유량계 유지보수	464	8개 사업소
		일반 재료비	189	8개 사업소
		시설장비유지용역	853	8개 사업소
4	배수지 물탱크 청소 (사업소 예산)	소 계	2,968	101개소
		배수지 청소용역	2,968	101개소
5	가압장, 배수지 노후 시설 개량 (사업소 예산)	소 계	5,500	61건
		노후 기전설비 개량	5,500	61건
6	공동구 유지 관리 부담금 (사업소 예산)	소 계	2,368	29.6㎞
		서울시설공단 관리 위탁비	2,368	29.6㎞

1		분야별 검토결과

□ 노후 밸브 정비

❍ 노후 밸브 교체시 정비기준 준수 시행

① 고장밸브 최우선 교체 시행

② 1994년 이전에 설치된 회주철 재질의 밸브

③ 설치연도가 오래된 순서(작업 난이도 및 효율성을 고려하여 소블록 단위별 계획수립 추진)

- 단수 범위 축소가 필요한 경우, 중간 밸브 설치 및 부단수 교체공법 채택 등 검토

※단 부단수 교체공법 제품이 특허 등 특정제품에 해당될 경우, 사전 절차 이행

- 노후 밸브의 기능을 검토하여 기능상 필요가 없을 경우 철거

❍ 재개발, 재건축 지역 및 배관정비 예정 구간의 노후밸브 교체 금지

□ 상수도관 전식방지공사

❍ 전식방지공사 시행을 위한 유관기관(도로관리청, 철도공사 등) 사전 협의 등 철저

❍ 보링공사 시 소음에 따른 민원발생에 대비하여 사전 공사안내 철저

□ 가압장, 배수지 등 시설물 유지관리

❍ 정밀안전진단 및 정밀점검 용역 관련

- 상반기 배수지 청소일정에 맞추어 진단 시행이 가능하도록 용역발주 조속 추진

- 안전진단 용역 관련 법규, 절차 및 사후 조치 철저

▸ 안전진단 용역 준공 2개월 전 기술심사담당관의 건설기술심의위원회 심의 요청

▸ 안전진단 용역 결과 시설물정보종합시스템 입력(한국시설안전공단 FMS)

▸ 정기점검 및 자체 정밀점검 수행은 초급기술자 이상 자격 유지 및 법정 안전점검교육 이수(70시간)

❍ 배수지 내부 방수․방식공사 관련

- ‘15년 사업이 ‘16년으로 이월된 사업은 조기 착수 추진 (중부, 서부, 동부)

- ‘16년 사업은 개선된 평가기준으로 공법·자재 선정 (서부 홍은, 북부 공릉)

‣ 배수지, 정수지 부위별 계열선정 : 내부 검토회의에서 선정(본부)

‣ 기술심의(공법선정)위원회 : 발주부서 개최

□ 배수지 물탱크 청소

❍ 환경부 제정 “상수도시설물 유지관리지침”의 청소주기(6개월) 준수

❍ 배수지 내부 방수․방식공사 추진일정을 고려하여 세부 청소계획 수립 및 본부 관련 부서 협의 시행

※ 배수지 내부 방수․방식공사와 일정이 중복될 경우, 청소 중지

□ 가압장, 배수지 노후 시설 개량

○ 전기료 및 온실가스 절감효과가 큰 “가압장 구내배관 손실수두 개선 사업”은 사업효과 극대화를 위해 조기 발주 및 상반기 준공 추진

- 남부수도 : 노량진가압장 외 3개소 기전설비 개량(체크밸브 교체)

○ 노후로 효율이 저하되어 에너지 손실이 많은 대형 펌프를 최적규격의 신규펌프로 교체하여 전기료 및 온실가스 절감 도모

- 남부수도 : 방배가압장 모터펌프 개량 (430Hp×1대, 215Hp×1대)

- 서부수도 : 북악터널가압장 모터펌프 개량 (355Hp×2대)

○ 펌프 효율 향상을 위한 개량사업은 “모터펌프 적정 용량검토” 및 협의 완료 후 시행

○ 사업 추진 중 안전사고 예방 철저

□ 기타사항

❍ 사업 추진시 특허, 신기술 등 특정제품 사용이 필요한 경우 반드시 사전 절차를 이행하고 제품 구매 [특정제품 심사위원회, 행정1부시장 방침 제559호(’09. 11. 12.)]

❍ 사업소별, 분야별 집행율 관리 요망

- 차년도 사고이월이 발생하지 않도록 공정율 관리에 만전을 기하고

- 예산 불용이 발생하지 않도록 사업관리 철저

2		포괄 예산 배정계획

□ 노후 밸브 정비

(단위 : 백만원, 개소)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	비고 (본부)
배정액 (백만원)		17,000	2,300	1,540	2,130	1,140	2,230	2,130	2,260	1,470	1,800
밸브실 정 비	소요예산	5,020	760	500	700	390	740	700	750	480
노 후 밸 브 정 비	소요예산	11,980	1,540	1,040	1,430	750	1,490	1,430	1,510	990	1,800
	정비 대상 (개소)	2,280	345	230	320	170	335	320	340	220	감리비 및 대형 밸브점검

□ 상수도관 전식방지공사

(단위 : 백만원, 개소)

구 분		계	서부	동부	북부	남부	강남
배정액 (백만원)		3,000	592	516	688	688	516
소요 예산	시 설 비	2,700	532	461	623	623	461
	감 리 비	300	60	55	65	65	55
정비 대상		17개소 27㎞ (700~1,350㎜)	5㎞ 3개소	5㎞ 3개소	7㎞ 4개소	5㎞ 4개소	5㎞ 3개소

□ 가압장, 배수지 등 시설물 유지관리

(단위 : 백만원, 개소)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	본부
배정액 (백만원)		5,976	35	549	28	4,126	70	122	128	14	904
정밀안전 진단 및 점검용역	소요예산	1,516	35	149	28	66	70	122	128	14	904
	정밀안전진단 (개소)	148	1	6	-	-	-	2	1	-	138㎞ (관로)
	정밀점검 (개소)	61	4	5	4	11	13	15	7	2	-
배수지 내 부 방수․방식	소요예산	4,460	-	400	-	4,060	-	-	-	-	-
	정비 대상 (개소)	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-

※ 본부 포괄 예산 6,183백만원 중 시책업무추진비(7백만원), 상수도관 방식용역비(200백만원) 미포함

Ⅲ		행정사항

□ 2016년 유지관리사업 종합 추진계획 통보

❍ 본부 포괄 예산 배정 등

□ 원활한 사업 추진 및 경제 활성화 도모를 위해 조기 발주 시행

□ 지속적인 사업관리 추진

❍ 업무 담당별 사업소 추진실적 수합 등 사업관리 추진

❍ 분기별 예산 집행실적 및 사업실적 점검 시행

붙임 : 1. 2015년 사업별 추진실적 분석결과 1부.

2. 2016년 정밀안전진단 및 정밀점검 대상 1부.

3. 2016년 시설물 유지관리 사업 예산 총괄 1부. 끝.