문서번호	자연생태과-1902
결재일자	2016.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장	푸른도시국장

2016년 하천생태복원 및 녹화사업 추진계획

2016. 1

푸른도시국

(자연생태과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	관련자치구
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□	보도자료
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 하천생태복원 및 녹화사업 추진계획

도심 하천변 훼손된 공간과 틈새 공간에 생물 서식환경 조성 및 녹화로 하천 생태와 경관을 개선하여 생태적 웰빙공간 조성

Ⅰ		사업개요

위    치 : 안양천(양천․금천), 홍제천(서대문), 도림천(영등포),

탄천(강남), 고덕천(강동)

중랑천(중랑천 녹색브랜드화 사업(6개구)은 별도 방침 수립)

사업규모 : 66,040㎡(중랑천 제외)

사업내용 : 식생기반 조성 및 제방사면 녹화 등

사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 10.

총사업비 : 5,015백만원(중랑천 2,865백만원 포함)

연차별 추진 현황

구 분	계	2006~2013	2014	2015	2016
하천생태복원 사 업	총96개소 1,962,918㎡	66개소 1,092,628㎡	16개소 377,350㎡	14개소 263,600㎡	14개소 229,340㎡
예산액(백만원)	53,324	39,486	4,669	4,154	5,015

※ 중랑천을 포함한 실적이며,세부내역 별첨

Ⅱ		추진방향

제방의 산책로를 활용한 웰빙 공간 조성 및 식생 여건이 미약한 하천변에 갈대, 억새 등을 식재하여 하천변 경관 개선

하천변 녹지를 생태적인 공간으로 재조성하여 생물과 인간이 함께 살아가는 공간 조성

Ⅲ		세부 추진계획

사업 대상지 현황

자치구별	사 업 개 요	규모 (㎡)	사 업 비 (단위 : 백만원)
			계	시설비	시 설 부대비
계	6개 하천(14개소)	229,340	5,015	5,010	5
양천구	･ 위치 : 안양천(목동교~양평교) ･ 내용 : 사면안정화 및 식생기반 조성 수목, 다년초화류 식재 등	26,000	550	550
금천구	･ 위치 : 안양천(안양철교~금천교) ･ 내용 : 식생기반조성 및 다년생 초화식재	8,040	595	595
영등포구	･ 위치 : 도림천(대림동 640-2 일대) ･ 내용 : 식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	3,000	200	200
서대문구	･ 위치 : 홍제천(홍제3교~백련교) ･ 내용 : 유해식물제거 및 수목, 초화류 식재	9,000	200	200
강남구	･ 위치 : 탄천(율현동 93번지 일대) ･ 내용 : 식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	10,000	300	300
강동구	･ 위치 : 고덕천(강명초~삼성엔지니어링) ･ 내용 : 수목 및 초화류 식재	10,000	300	300
중랑천 (6개구)	･ 위치 : 성동, 광진, 동대문, 중랑, 도봉, 노원 ･ 내용 : 중랑천 녹색브랜드화 추진	163,300	2,865	2,865
자연생태과	･ 시설부대비		5		5

추진일정 및 방법

사업추진 계획 수립․통보(자연생태과⇨자치구): ’16. 1. 30.

※ 사업추진시 2∼3월, 6∼7월 사업대상지 현황사진 촬영 실시

용역 타당성심사(자치구⇨기술심사담당관): ’16. 1. 30.~2. 20.

설계 용역 시행(자치구)                   : ’16. 2. ~  5. 30.

- 유수소통, 치수 등에 방해가 되지 않도록 하천법 제25조『하천  기본계획』을 준수하여 사업을 추진하고, 필요시 공사착공전 하천관리  위원회(시) 심의, 하천점용 협의 등의 제반절차 이행

설계심의(자치구⇨자연생태과)              : ’16. 4. ~  5.

- 설계심의는 설계 공정 70% 정도 진행 시 요청

※ 설계심의는 대상지 현황등에 따라 현장 실시 가능

계약심사(자치구⇨계약심사과)	: ’16. 4. ~ 5.

- 계약심사 : 공사금액 3억(조경) 이상인 경우에는 시 계약심사과,

공사금액 3억(조경) 미만은 기관 자체 일상감사 실시

공사시행(자치구)	: ’16. 6. ~ 10.

공사 착․준공보고 : 발주는 6월초 이전, 준공은 최소 10월말 완료

- 사업완료 후 사업비 집행액 세부내역(지출원인행위부 등), 준공    내역서, 공사현장 사진 등을 첨부하여 제출

Ⅳ		세부 추진 방법(추진상의 유의사항)

설계단계부터 관련 전문가를 참여시키고, 사업 대상 하천 특유의 자생 생물종 복원 중심의 하천사업 추진

하천이나 제방의 본래 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 녹화사업을 추진

설계과정에 주민, 유관기관, 해당지역 시․구의원의 의견을 수렴하여 민원발생 등으로 인해 사업이 지연되는 사례가 없도록 조치

설계용역시 설계변경 등 주요사항은 우리시와 사전 협의

하천의 경관적 통일성 및 연속성을 고려하여 시설물의 디자인 및 색채 등은『공원시설 색채디자인 가이드라인』준수

- 시설물의 재료는 자연친화적(목재, 흙, 자연석재) 소재 사용

- 번쩍거리는 광택 스테인레스나 철재 재료 사용 자제

- 시설물의 색채 선정시 자연과의 조화성을 고려하고 색상의 통일성 유지

- 현란한 원색 사용은 금하고 자연경관의 배경색채로 선택

기타 하천생태복원 사업 추진에 따른 세부사항 등은 아래의 규정 등을 참조하여 시행

- 『하천에서 나무심기 및 관리에 관한 기준(국토교통부 ’07.5.29)』

- 『생태하천 복원사업 추진지침(환경부, 2012)』

- 『서울특별시 전문시방서(조경편, 2009년)』

사업추진 계획 수립․통보    : 2016. 1. 30.限

따로붙임  1. 세부 추진현황 1부.

2. 공원시설 색채디자인 가이드라인 1부(별송).

3. 사업착공 및 준공보고 서식 1부.  끝.