2016회계연도 국고보조금 이월승인 요청서

보조사업 개요

회계·기금	복권기금			중앙관서명		보건복지부
보조사업 유형	자치단체자본보조
보조사업명	아동복지시설 기능보강
사업내용	* 아동양육시설 / 아동숙사 증개축
사업기간	2016년 4월 ~ 12월		사업비 부담 비율		국비 50%, 지방비 50%
보조사업자	기관·단체명	사회복지법인 남산원
	주 소 (연락처)	서울 중구 소파로 2길 31(예장동) / 02)752-9836

2. 보조사업 추진 현황(2016. 11월 말 기준)

❏ 보조금 집행 현황

					(단위: 천원)
시설명	국비 수령액	집행액	집행 잔액	불용 예상액	이월* 요청액
남산원	755,260	115,714	639,546	639,546	639,546

* 이월 : 예산을 당해 회계연도내에 집행하지 않고 다음 연도에 지출하는 것

❏ 현재까지 사업추진 상황

❍ 남산원 제 16-1430(2016. 5. 3.)호와 관련하여 사업기간 2016년 4월 ~ 12월 준공  예정이었으나 남산 문화재 보존지역으로 시굴조사 기간 약2개월 소요되었고,  조달청 나라장터 경쟁 입찰을 하여 건축 계약이 10월 5일 시행되어 사업이  늦어져 이월 대상 사업으로 승인 요청함

❏ 집행상 애로사항(문제점)

❍ 남산원은 학교법인 리라와 숭의학원이 근접하고 있어서 콘크리트 타설을   평일에는 학습에 방해가 되어 매주 토요일에만 가능한바 공정에 많은 차질이 생겨 예정공정표를 수정하여 받았음.

❍ 또한, 시국집회 관련으로 공사차량이 시내로 진입하기가 어려워 공기 지연사유 발생

3. 이월 요청 사항

❏ 이월예산 집행 및 사업 종료시한 : 2017년 4월 10일

❏ 이월 사유

❍ 문화재보존지역으로 시굴조사 기간이 2개월 정도 진행되어 건축허가가 지연되어 착공 지연되었음.

❍ 조달청 나라장터 경쟁 입찰을 하여 건축 계약이 10월 5일 시행됨.