국고보조금 교부신청서
(1)신청자	주 소	서울특별시 중구 청계천로 8
	성 명	서울특별시 도시기반시설본부장 고인석
(2) 보조금의 사용		○ 목적 : 신림선 경전철 건설
		○ 내용 : 신림선 경전철 건설사업비
(3) 보 조 금 신청금액		9,280,000천원			(4)입금계좌번호			1006-701-291354 (우리은행)
(5) 소요경비 및 재원조달 내역		(단위:백만원)
			재원조달(수 입)				소요경비(지 출)
			○ 국고보조금			9,280	○ 공사비		24,720
			○ 시 비			16,794	○ 감리비		1,304
							○ 시설부대비		50
			계			26,074	계		26,074
(6) 신청금액 사용계획		○ 신림선 경전철 건설비 : 26,074,000천원
보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 제16조의 규정에 의거 상기와 같이 국고보조금을 교부신청 합니다. 2016년 1월 일 서 울 특 별 시 장 국토교통부장관 귀하

2016 국고보조 사업계획

□ 사업 추진현황

(단위:백만원)

사업명	구 간	연장(㎞)	총사업비	‘15까지 투 자	2016년 소요액	현단계
신림선 경전철 건설	여의도 ~ 신림역 ~ 서울대	7.8	831,764 (93,072)	25,038 (0)	26,074 (9,280)	설계중

※ (  )는 국고보조금

□ 자금 수급계획

(단위:백만원)

구 분		예산액	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
신림선 경전철 건설	계	26,074	1,794	14,000	5,140	5,140
	○ 국고보조금	9,280	-	-	4,640	4,640
	○ 시 비	16,794	1,794	14,000	500	500

□ 사업추진 계획 : '16년 목표 공정률 6% 달성

ㅇ (공통) 실시설계 추진 및 실시계획 승인

ㅇ (공통) 토지 등의 취득 및 보상

ㅇ (토목) 본선 및 정거장 가시설, 토공사 및 부대시설 시공