국고보조금 교부신청서
(1)신청자	주 소	서울특별시 중구 청계천로 8
	성 명	서울특별시 도시기반시설본부장 고인석
(2) 보조금의 사용		○ 목적 : 우이~신설 경전철 건설
		○ 내용 : 우이~신설 경전철 건설사업비
(3) 보 조 금 신청금액		4,800,000천원			(4)입금계좌번호			1006-701-291354 (우리은행)
(5) 소요경비 및 재원조달 내역		(단위:백만원)
			재원조달(수 입)				소요경비(지 출)
			○ 국고보조금			4,800	○ 공사비		60,145
			○ 시 비			60,031	○ 감리비		4,399
							○ 시설부대비		287
			계			64,831	계		64,831
(6) 신청금액 사용계획		○ 우이~신설 지하 경전철 건설비 : 64,831,000천원
보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 제16조의 규정에 의거 상기와 같이 국고보조금을 교부신청 합니다. 2016년 1월 일 서 울 특 별 시 장 국토교통부장관 귀하

2016 국고보조 사업계획

□ 사업 추진현황

(단위:백만원)

사업명	구 간	연장(㎞)	총사업비	‘15까지 투 자	2016년 소요액	현단계
우이~신설 경전철 건설	우이동~신설동	11.4	911,473 (96,712)	686,641 (91,912)	64,831 (4,800)	공사중

※ (  )는 국고보조금, < >

□ 자금 수급계획

(단위:백만원)

구 분		예산액	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
우이~신설 경전철 건설	계	64,831	16,688	16,448	15,008	16,687
	○ 국고보조금	4,800	1,680	1,440	-	1,680
	○ 시 비	60,031	15,008	15,008	15,008	15,007

□ 사업추진 계획 : '16년 목표 공정률 100% 달성('15년말 공정률 80.59%)

ㅇ (토목) 출입구, 환기구, 포장복구 등 부대시설 시공

ㅇ (건축) 정거장 기능실 및 승강장 벽체 마감 등

ㅇ (기계) 정거장 안전문, 본선 송풍기 및 소방설비 공사 등

ㅇ (궤도) 도상 면정리 및 레일연마

ㅇ (전기, 신호, 통신 등 설비공종) 각 공종별 공사 완료

ㅇ (차량 및 검수설비) 차량 36대 반입완료 및 검수설비