국고보조금 교부신청서
(1)신청자	주 소	서울특별시 중구 청계천로 8
	성 명	서울특별시 도시기반시설본부장 고인석
(2) 보조금의 사용		○ 목적 : 서울 지하철 9호선 3단계 건설
		○ 내용 : 서울 지하철 9호선 3단계 건설사업비
(3) 보 조 금 신청금액		97,200,000천원			(4)입금계좌번호			1006-701-291354 (우리은행)
(5) 소요경비 및 재원조달 내역		(단위:백만원)
			재원조달(수 입)				소요경비(지 출)
			○ 국고보조금			97,200	○ 공사비		215,954
			○ 시 비			124,298	○ 감리비		5,294
							○ 시설부대비		250
			계			221,498	계		221,498
(6) 신청금액 사용계획		○ 서울 지하철 9호선 3단계 건설비 : 221,498,000천원
보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 제16조의 규정에 의거 상기와 같이 국고보조금을 교부신청 합니다. 2016년 1월 일 서 울 특 별 시 장 국토교통부장관 귀하

2016 국고보조 사업계획

□ 사업 추진현황

(단위:백만원)

사업명	구 간	연장(㎞)	총사업비	‘15까지 투 자	2016년 소요액	현단계
서울지하철 9호선 3단계	잠실 종합운동장 ~ 둔촌동 보훈병원	9.18	1,309,532 (523,813)	732,061 (343,177)	221,498 (97,200)	공사중

※ (  )는 국고보조금

□ 자금 수급계획

(단위:백만원)

구 분		예산액	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
서울지하철 9호선 3단계	계	221,498	55,375	55,375	55,375	55,373
	○ 국고보조금	97,200	24,300	24,300	24,300	24,300
	○ 시 비	124,298	31,075	31,075	31,075	31,073

□ 사업추진 계획 : '16년 목표 공정률 77.5% 달성('15년말 공정률 62.9%)

ㅇ (토목) 본선 및 정거장 본체 구조물 공사 및 부대시설 시공

ㅇ (건축) 정거장 기능실 조적, 미장방수 및 타일 시공 등

ㅇ (기계) 정거장 공조덕트 설치, 공조실 장비 설치 및 소방설비 공사 등

ㅇ (궤도) 콘크리트 궤도 및 분기기 부설

ㅇ (전기, 신호, 통신 등 설비공종) 각 공종별 기자재 구매 및 공사 본격 시행

ㅇ (차량 및 검수설비) 88량에(9호선 64량, 직결차량 24량) 대한 제작 및 검수