정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전총괄본부 도로계획과	②담당자 (연락처)	윤갑진 (2133-8088)
③정책사업명	국회대로 지하차도 및 상부 공원화
④선정기준	100억 원 이상 대규모 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2013년∼2023년
⑥주요내용	○ 목 적 : 제물포터널 건설과 연계하여 국회대로(옛 제물포길)를 지하화하고 상부 도로를 축소하여 공원 및 녹지, 자전거도로 등 친환경공간을 조성함으로써 지역간 단절 해소 및 주민 삶의 질 향상에 기여 ○ 위 치 : 양천구 신월IC ~ 영등포구 국회의사당 교차로 - 1단계 구간 : 신월IC ~ 경인2지하차도, 연장 1.6㎞ - 2단계 구간 : 경인2지하차도 ~ 국회의사당 교차로, 연장 6.0㎞ ○ 규 모 : 연장 7.6㎞, 폭 40~55m (친환경공간 약 11만㎡) ○ 총사업비 : 2,696억원 ○ 추진현황 - '12.07.19 : 친환경공간 조성 T/F 구성 및 운영계획 수립 - '12.11.20 : 국회대로 친환경공간 조성방안 검토보고 - '13.03. ~ '13.10. : 시민, 대학생 아이디어 공모 - '13.05. ~ '15.02. : 타당성조사 및 기본계획 - '16.05. : 1단계 구간 설계용역 발주준비 ○ 추진계획 - '16. ~ '17. : 1단계 구간 설계 - '17. ~ '19. : 1단계 구간 공사 - '18. ~ '19. : 2단계 구간 설계 - '20. ~ '23. : 2단계 구간 공사