- 지역교통안전환경개선사업 관련 -

추진현황 조사서(서울시)

1		2014년 재이월사업 추진현황

□ 총괄표

(단위 : 개소, 백만원)

지자체	내역사업명	사업량 (개소)	이월 사업비 현황 (‘16.1.1 기준)			집행 현황 (‘16.3.15 기준)			추 진 상 황 (‘16.3.15 기준)
			계	국비	지방비	계	국비	지방비	공사 중지	추 진 중	완료
서울시	해 당 없 음

□ 2014년 회전교차로 설치사업 재이월 내역

시군	사업명	사업량 (개소)	이월 사업비 현황			집행 현황 (‘16.3.15 기준)			추 진 현 황 (‘16.3.15 기준)
			계	국비	지방비	계	국비	지방비	공정율	이월사유	향후계획
서울시	해 당 없 음

□ 2014년 안전한 보행환경 조성사업 재이월 내역

시군	사업명	사업량 (개소)	이월 사업비 현황			집행 현황 (‘16.3.15 기준)			추 진 현 황 (‘16.3.15 기준)
			계	국비	지방비	계	국비	지방비	공정율	이월사유	향후계획
서울시	해 당 없 음

2		2015년 이월사업 추진현황

□ 총괄표

(단위 : 개소, 백만원)

지자체	내역사업명	사업량 (개소)	이월 사업비 현황 (‘16.1.1 기준)			집행 현황 (‘16.3.15 기준)			추 진 상 황 (‘16.3.15 기준)
			계	국비	지방비	계	국비	지방비	실시 설계	미착공	착공	추진중	공사 중지	완료
계		6	290	145	145	0	0	0				○
서울시	교통사고 잦은 곳	5	244	122	122	0	0	0				○
서울시	회전교차로	1	46	23	23	0	0	0				○

□ 2015년 교통사고 잦은 곳 개선사업 이월 내역

시군	사업명	사업량 (개소)	이월 사업비 현황			집행현황			추 진 현 황 (‘16.3.15 기준)
			계	국비	지방비	계	국비	지방비	공정율	이월사유	향후계획
계		5	244	122	122	0	0	0	63%	교통안전시설심의 등 행정절차 지연 동절기 공사 중단	‘16. 1 : 예산재배정 ‘16. 3 : 공사착공 ‘16. 6 : 공사 및 예산집행 완료 예정
서울시	강남역 교차로	1	216	108	108	0	0	0
	구로전화국 교차로	1	4	2	2	0	0	0
	망우사거리	1	4	2	2	0	0	0
	우성아파트앞 사거리	1	2	1	1	0	0	0
	양재역 교차로	1	18	9	9	0	0	0

□ 2015년 회전교차로 설치사업 이월 내역

시군	사업명	사업량 (개소)	이월 사업비 현황			집행현황			추 진 현 황
			계	국비	지방비	계	국비	지방비	공정율	이월사유	향후계획
계		1	46	23	23	0	0	0	83%	- 동절기 공사 중단	- ’16. 3 : 재착공 - ’16 .6 : 공사 및 예산집행 완료 예정
서울시	영파여고뒤	1	46	23	23	0	0	0

3		2016년 신규사업 추진현황

□ 총괄표

(단위 : 개소, 백만원)

지자체	내역사업명	사업량 (개소)	사업비 현황 (‘16.1.1 기준)			집행 현황 (‘16.3.15 기준)			추 진 상 황 (‘16.3.15 기준)
			계	국비	지방비	계	국비	지방비	실시 설계	미착공	착공	추진중	공사 중지	완료
계		7	760	380	380	0	0	0	1		6
서울시	교통사고 잦은 곳	6	480	240	240	0	0	0			6
서울시	회전교차로	1	280	140	140	0	0	0	1

2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업 추진상황(서울시)

시도	개소	예산액			집행현황 (‘16.3.15 기준)			추진현황(시군구)
		계	국비	지방비	계	국비	지방비	실시 설계중	미착공	착공	공사중	완료
계	6	480	240	240	0	0	0	0	0	6	0	0
서울시	6	480	240	240	0	0	0			6

2016년 회전교차로 설치사업 추진상황(서울시)

시도	개소	예산액			집행현황 (‘16.3.15 기준)			추진현황(시군구)
		계	국비	지방비	계	국비	지방비	실시 설계중	미착공	착공	공사중	완료
계	1	280	140	140	0	0	0	1	0	0	0	0
서울시	1	280	140	140	0	0	0	1

2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업 추진현황(서울시)

시도	시군구	시설명	사 업 비(백만원)			집행액(백만원)			사업추진현황
			계	국비	집행액	계	국비	집행액	계	설계중	미착공	착공	공사중	준공
소계	6	6개소	480	240	240	0	0	0				6
서울	영등포구	여의교오거리	70	35	35	0	0	0				1
서울	강남	뱅뱅교차로	116	58	58	0	0	0				1
서울	강남	학동교차로	124	62	62	0	0	0				1
서울	강구	등촌동교차로	30	15	15	0	0	0				1
서울	서초	삼호가든사거리	110	55	55	0	0	0				1
서울	중랑	사울시체육회 앞	30	15	15	0	0	0				1

2016년 회전교차로 설치사업 추진현황(서울시)

시도	시군구	시설명	사 업 비(백만원)			집행액(백만원)			사업추진현황(개소)
			계	국비	집행액	계	국비	집행액	계	설계중	미착공	착공	공사중	준공
합계	1		280	140	140	0	0	0	0	1
서울	마포	증산빗물펌프장 앞	280	140	140	0	0	0	1	1

4		2015년 하반기 지적사항 조치결과

□ 총괄표

- 완   료   :  1 개소(회전교차)

(단위 : 건)

지자체	합 계			안전한 보행환경			어린이보호구역			교통사고 잦은곳
										사고 잦은 곳			회전교차로
	미조치	추진중	완료	미조치	추진중	완료	미조치	추진중	완료	미조치	추진중	완료	미조치	추진중	완료
합 계	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
서울			1												1

‘15년 지역교통안전환경개선사업 하반기 지적사항 조치결과

□ 지적사항 조치결과(서울)

시군	구분	사업명	지적 및 조치계획	조치결과			비고
				미조치	추진중	완료
서울 송파	회전 교차로	영파여고 뒤	(지적사항) 우회전 전용차로 진행방향 노면표시 부적절 (처리결과) 우회전 전용 노면표시 도색			○