16년 7월 서울약령시 한방산업진흥센터 건립사업 추진실적

	< 건립 공사 개요 >
○ (사업목적) 서울약령시에 한의약박물관·한방의료체험시설 등을 건립하여 한방의료․관광의 중심지로 육성 ○ (사업위치) 서울 동대문구 제기동 1082번지 외 24필지 2,789.5㎡ ○ (연 면 적) 9,730.5㎡ 지하 3층 ~ 지상 3층 ○ (소요예산) 46,525백만원(국비 70억원, 서울시 234.6억원, 동대문구 160.6억원) ○ (사업기간) 2012. 1. ～ 2016. 12. ○ (시설구성) 한의약박물관, 보제원, 약선홍보관, 한방안테나샵, 주차장(199면)

□ ’16. 7월 추진 실적

○ 2016. 7.  지상 3층 바닥공사 (공정율 51%)

□ 향후추진일정

○ 2016. 9  박물관 전시용역업체 선정

○ 2016. 9  3층 한옥공사 시행

○ 2016. 12 공사 준공

※ 2016. 8월 중 준공기한 연장(2017.4월 말)검토 예정임

	< 그간 추진일정 >
○ ‘11. 7.~ ‘13. 9. 건축예정부지 확보 ○ ’13. 5. 서울약령시 한방산업진흥센터 건립 변경 계획 수립 ○ ’13.10. (안행부) 제1차 지방재정투자심사* 결과 ⇒ 재검토** * 시군구가 100억원 이상 신규사업을 할 경우 안행부 주관 지방재정투자심사를 거쳐야 함(지방재정투·융자사업심사규칙) ** (내용) ’14년 이후 계획된 국비 미지원(44억원)에 따른 시․구비 추가 부담분은 가용재원 범위에서 사업계획 조정 ○ ’13.11. (서울시) 제1차 지방재정투자심사 결과를 반영하여 복지부에 국고보조금(50억원) 수시배정 요청 ○ ’13.12. (복지부) 기재부에서 수시배정이 해제되어 서울시로 예산(50억원) 교부 ○ ’14. 1. (안행부) 지방재정투자심사 의뢰 ○ ’14. 3. (안행부) 제2차 지방재정투자심사 결과 ⇒ 조건부* 추진 * (내용) 한의약박물관 등 한방산업진흥센터 조성규모는 축소하되, 공영주차장은 향후 수요를 감안하여 적정규모로 확대 ○ ’14. 3. 서울약령시 한방산업진흥센터 건립관련 자문위원회 개최 ○ ’14. 4. 자문위원회 개최 결과 및 투자심사 조건부 추진사항 반영한 건립 방침 수립 * 당초대비 면적 170㎡ 축소 ○ ’14. 5. 서울시 자문위원회 개최 ○ ’14. 5. 사업부지 보상 및 소유권이전 완료 ○ ’14. 6. 설계공모 공고 ○ ’14. 7. 설계공모 당선작 선정 및 계약체결 ○ ’14. 8. 기술자문 실무위원회 개최(건축기술분야 전문가 및 실무자 회의) ○ ’14. 8. 교통영향분석․개선대책 용역 계약체결 ○ ’14. 9. 설계 경제성(VE) 검토 시행 ○ ’14. 10. 서울시 건설기술심의소위위원회(기본․실시설계 심의) 상정 - 조건부 채택 ○ ’14. 11. 동대문구 건축․교통(통합심의)위원회 상정 - 조건부 동의 ○ ’14. 11. 공사 발주계획 수립 ○ ’14. 11. 설계용역 준공 ○ ’14. 12. 특정제품선정 심사위원회(경량철골조 한옥) 개최 ○ ’14. 12. 사업계획 변경승인 통보(보건복지부→시→구)

	< 그간 추진일정 >
○ ’14..12. ‘15년도 국고보조금(20억) 확정내시 통보(보건복지부→시→구) ○ ’14..12. 동대문구 계약심의위원회 개최(건축공사 발주방법 등 심의) ○ ’14.12. 관급자재 및 전기, 소방공사 계약 체결 ○ ’14.12. 건축(한옥․토목․조경)공사 조달 발주 ○ ‘15.02. 동대문구 계약심의위원회 개최(건설사업관리 발주 방법 등 심의) ○ ‘15.02. 건설사업관리(감리)공사 조달 발주 요청 ○ ‘15.03 건축(토목․한옥)공사 계약 체결 ○ ‘15.03 공사 착공 ○ ‘15.03 기계, 통신 (도급)공사 조달 발주 요청 ○ ‘15.04. 공사관련 주민설명회 개최 ○ ‘15.04. 건설사업관리(감리) 계약체결, (기존 건물)지하 구조물 철거 ○ ‘15.05. 통신공사, 기계설비공사 계약체결 ○ ‘15.07. 토목공사 - CIP천공 및 타설, S.M.I 그라우팅 공사 완료 ○ ‘15.08~12 토목공사 - 터파기 공사 시행 ○ ‘16.04 한방산업진흥센터 운영활성화 컨설팅 용역 시행(서울시) ○ ‘16.05. 지상1층 공사 ○ ‘16.07. 지상3층 공사(공정율 51%)

□ 현장사진