도시경관개선사업 추진현황

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	사 업 개 요	예산 집행현황(시/구)		사 업 내 용	추 진 현 황
			예산액	집행내역
1	중구 신당동 경관사업	- 위 치: 신당동 302-4일원 - 규 모: 연장 565m(6,240㎡)	1,350 (550/800)	560 (270/290)	- 교통체계개선(일방향) 보행로 및 골목길정비 등	공사 진행중 ´16. 8월: 1단계공사 준공예정 ´16. 9월: 2단계공사 발주
2	종로구 숭인동 경관사업	- 위 치: 종로 63가~다길 - 규 모: L=500m, W=4~5m	1,000 (500/500)	856 (428/428)	보행로 및 골몰길 정비 야간환경 개선 등	공사 진행중 ´16. 8월 준공예정
3	광진구 자양동 경관사업	- 위 치: 능동로 1길 - 규 모: 연장 700m(1,128㎡)	1,000 (500/500)	868 (434/434)	청담대교 하부 환경개선 문화·여가·스포츠공간조성	- 공사 진행중 ´16.11월 준공예정
4	강동구 암사·천호동 경관사업	- 위 치: 암사·천호동 일대 - 규 모: 8~9개소	682 (341/341)	82 (41/41)	골목 및 통학로 개선 안심 보행길 조성 등	설계용역중(´16.9월 준공) ´16.10월: 공사 발주예정
5	종로구 명륜동 경관사업	- 위 치: 명륜길2~명륜길99-2 - 규 모: L=800m, B=4~7m	998 (499/499)	98 (49/49)	보행환경 개선, 녹지조성 CCTV 및 보안등 설치 등	설계용역중(´16.8월 준공) ´16. 9월: 공사 발주예정
6	금천구 가산동 경관사업	- 위 치: 가산동 32번지 일대 - 규 모: 면적 55,000㎡	674 (337/337)	74 (37/37)	고가하부 야간조명 개선 주민편의시설 설치 등	설계용역중(´16.9월 준공) ´16.10월: 공사 발주예정
7	성북구 장위동 경관사업	- 위 치: 장위동 231번지 일대 - 규 모: 면적 48,000㎡	994 (497/497)	94 (47/47)	가로 환경개선 CCTV 및 보안등 설치 등	설계용역중(´16.11월 준공) 2017년: 공사 발주예정
8	서대문구 홍은동 경관사업	- 위 치: 홍은중앙로 5~7길 주변 - 규 모: 연장 500m(39,190㎡)	100 (50/50)	100 (50/50)	주민 편의시설 설치 가로정비 및 환경개선 등	설계용역중(´16.9월 준공) 2017년: 공사 발주예정
9	성동구 성수동 수제화거리경관사업	- 위 치: 성수역~뚝도시장 - 규 모: L=600m(편측),B=3m	520 (500/20)	40 (20/20)	보·차도 정비 조형물 및 녹지설치 등	설계용역 입찰(8/25) 2017년: 공사 발주예정
10	성동구 성수동 상원길 경관사업	- 위 치: 상원길 82~상원1길12 - 규 모: L=600m(편측),B=3m	620 (600/20)	40 (20/20)	보·차도 정비 보행편의시설 설치 등	설계용역 입찰(8/25) 2017년: 공사 발주예정
11	중랑구 망우동 경관사업	- 위 치: 상봉듀오트리스~용마산로 - 규 모: L=1,330m(양측),B=14m	1,000 (500/500)	78 (39/39)	보·차도 정비 가로시설물 정비 등	설계용역 입찰(8/02) 계약준비중 2017년: 공사 발주예정