2017년 지역중심대표보행거리 조성 개요

시 전역으로 ‘걷는 도시, 서울’을 확대하기 위해 금년부터 추진하고 있는 ‘지역중심대표보행거리 조성’ 사업의 2017년도 계획을 안내하고 추진코자 함.

□ 추진경위

○ ’15. 9. : 「지역중심 대표보행거리 조성」계획 수립

○ ’15.12. : 사업대상지 선정

- 자치구 공모로 3개 사업지 선정(한양대 주변, 석촌호수길, 성북로)

- 외부위원에 의한 공개 평가

○ ’16. 1 ~ 12월 : 설계, 주민설명회, 관계기관 협의 등

※ 참고) 2016년도 지역중심보행전용거리 조성사업 진행사항(3,400백만원)

① 성동구 한양대주변 : 착공(’16.12월), 준공(’17.6월)

② 송파구 석촌호수길 : 설계완료(’16.12월), 착공(’16.3월), 준공(’17.6월)

③ 성북구 성북로 : 설계 중(’16.12월), 착공(’16.3월), 준공(’17.6월)

○ 2016. 12. : 2017년 지역중심대표보행거리 예산편성

□ 추진방향

○ 사업내용 : 도로다이어트, 보도확대, 휴일 보행전용거리 운영, 쉼터조성, 안전시설 확충 등 다양한 개선방안을 적용하되 실행가능성(주민·경찰 동의)이 담보될 것

○ 대상지 규모 : 사업비 범위에서 최대한 시행효과 발휘를 위한 적정 구간 선정

※ 2016년 최대 600m → 2017년 300 ~ 600m로 조정

○ 대상지 선정 : 자치구 신청 안에 대해 평가위원회 구성 등 객관적 평가

(자체 자문단 구성·지원, 필요시 현장설명 기회 제공, 결과 공개)

□ 주요 추진계획

○ 기  간 : 2017. 1 ~ 10.

○ 대상지 : 1개소  ※ 2016년 대상사업은 별도 지속 추진

○ 선정방법 : 자치구 신청(안)에 대해 평가위원회 구성‧결정

○ 대상지 선정기준(안)

구 분	항목	검토사항	비고
계획	대표성	· 상권, 대중교통, 역사‧문화시설 등이 발달하고 보행량이 상시 많아 지역을 대표하기 충분한 거리인가
	필요성	· 보행량 대비 보도공간이 부족하고 규모 대비 휴식공간이 크게 부족한가 · 차량과의 상충위험이 있어 개선이 시급한가
	효과성	· 개선방안들이 현장에서 주민보행편의 증진에 어느 정도 기여 하는가	효율성 포함
	연계성	· 주변 거리와 조화를 이루도록 계획 되었나
실행	주민소통	· 예상되는 주민민원 해소방안 제시
	유관기관 협조	· 경찰 등 사업추진을 위한 유관기관 협력을 사전에 담보할 수 있는지
	구체성	· 개선방안이 충분히 구체화 되었는가

○ 사업내용 : 차선축소, 보도확대, 휴일 보행전용거리 조성, 쉼터조성, 보행편의 및 안전시설 확충, 보도개선 등

< 개선방안 예시 >

□ 사업비 : 1,000백만원

○ 설계비, 감리비 포함한 금액으로 사업추진 시 부족한 재원은 자치구에서 자체 확보

□ 추진체계

○ 서울시 : 총괄, 사업지 선정, 설계, 사업비 재배정 등

○ 자치구 : 사업신청, 설계지원, 주민의견수렴(주민설명회 등), 경찰규제협의, 사업추진위원회(주민자치위원회 중심 구성) 운영 등

□ 추진일정

○ ’17. 1. 31.: 대상지 신청(자치구 → 시) ※ 붙임양식 참조

○ ’17. 2월 : 대상지 선정

○ ’17. 3 ~ 5월 : 기본설계 및 주민의견 수렴

○ ’17. 6월 : 경찰규제 심의 등 유관기관 협의

○ ’17. 7 ~ 8월 : 실시설계

○ ’17. 9 ~ 10월 : 착공 및 준공

붙임. 1. 신청양식 1부. 끝.

불임. 자치구 신청양식

2017년 지역중심대표보행거리 신청 안(자치구명)

□ 대상지

※ 교통현황(보행량, 소통상황, 최근 5년 간 교통사고 현황 등),

도면 포함

□ 신청사유

※ 가급적 사진, 인스타그램 등을 활용하여 현 실태와 개선효과, 실현가능성 등을 구체적으로 언급

□ 주요 사업내용(안)

□ 추진 상 예상되는 문제점 및 조치방안

※ 실행가능성 및 자치구의 노력 등 포함

□ 기   타

○ 경찰 협의, 주민의견 수렴 등 선 조치 사항

○ 기타 본 사업 추진을 위한 자치구 차원의 전략 등

작 성 자	과장 : ☎ 팀장 : ☎ 담당 : ☎