주간 진척보고서
문서번호	WR171016	작성자	박성원	작성일	2017/10/13	버 전	1.0

프로젝트명	2017년 항공사진 DB구축 용역
프로젝트책임자	박 성 원	진척율	DB구축	사업관리	전체
		계획	14.75/90.0	5.04/10.0	19.79/100.0
		실적	5.90/90.0	5.04/10.0	10.94/100.0

주요 내용	1. 2017년 항공사진 1차 촬영본 입수(738매) 2. 항공사진 자료분석(파일 이상 유무 및 주기 확인)
업무구분	금 주 실 적 (2017.10.09 ~ 2017.10.13)	차 주 계 획 (2017.10.16 ~ 2017.10.20)
사업관리	1. 사업관리 - 주간업무 보고 작성 - 월간보고(9월) 작성 - DB구축 진행 상황 체크	1. 사업관리 - 주간업무 보고 작성 - DB구축 진행 상황 체크
D B 구 축	자료인수 - 입수일자 : 2017년 10월 10일 - 매수 : 738매(10Cm 항공사진) 자료분석 및 확인 - 사진 주기 확인 - 파일 이상 유무 확인 : 39코스 25~ 27번 & 28~30번 사진에 대한 오류 사항 전달 (동일한 사진으로 주기 변경 요청)	1. 자료분석 및 확인 - 사진 주기 확인 - 파일 이상 유무(포맷 및 파일 에러등) 2. 파일명 표준화 작업 3. 성과 총괄표 및 성과 상세내역 작성
이슈사항