주간 진척보고서
문서번호	WR171023	작성자	박성원	작성일	2017/10/20	버 전	1.0

프로젝트명	2017년 항공사진 DB구축 용역
프로젝트책임자	박 성 원	진척율	DB구축	사업관리	전체
		계획	14.75/90.0	5.35/10.0	20.1/100.0
		실적	9.49/90.0	5.35/10.0	14.84/100.0

주요 내용	1. 사진 주기 이상 파일 확인 및 전달 - 44매 재 취합 2. 기무사 보안 작업
업무구분	금 주 실 적 (2017.10.16 ~ 2017.10.20)	차 주 계 획 (2017.10.23 ~ 2017.10.27)
사업관리	1. 사업관리 - 주간업무 보고 작성 - DB구축 진행 상황 체크	1. 사업관리 - 주간업무 보고 작성 - DB구축 진행 상황 체크
D B 구 축	1. 자료분석 및 확인 - 사진 주기 확인 - 파일 이상 유무(포맷 및 파일 에러등) 2. 사진 주기 이상 파일 취합 - 취합일 : 2017.10.16.(월) - 파일매수 : 44매 - 1차 취합 최종 파일 매수 : 735매 3. 기무사 보안 작업 - 보안매수 : 231/735 (약31.4%) - 진행현황 : 65매 처리(약 28.1% 처리 완료) 4. 사진 주기 이상 파일 확인(방위표시 오류) - 41, 43코스 확인 및 오류 사항 전달	1. 기무사 보안 작업 2. 사진 주기 확인 및 보안처리 마크 오류 확인
이슈사항