2017년 간선배관공사 추진현황

연번	시행 부서	공 사 명	사업소 공사계획			배정 사유	진행상황	비 고 (취소 및 공사비 과부족 사유)
			구경 (㎜)	연장 (m)	배정예산 (백만원)
		합 계		3,950	1,880
13	북부	강북구 우이동 255 ~ 산69번지간(미급수지역 도선사) 배수관 부설공사	50~100	1900	1,200	우이동 산69번지의 미급수지역인 도선사 및 주변 건물들의 안정적인 상수도공급을 위한 배수관 부설	진행중(10월말 완료예정)	- 예산부족 : 복구비 230백만원
14	북부	강북구 수유동 291-162 ~ 291-158번지간 간선배관 부설공사	80	90	40	강북구 수유동 291-162 ~ 291-158 구간 최근 건축 증가 및 향후 신축 예정으로 인한 급수수요 증가로 소출수 민원이 발생에 따른 배수관 구경 확대	공사완료
15	북부	미아동외4개동상수도공사 (수유동540-21~540-1구간간선배관)	80	60	15	강북구 강북구 수유동 540-21~540-1 구간 최근 건축 증가 및 향후 신축 예정으로 인한 급수수요 증가로 소출수 민원이 발생에 따른 배수관 구경 확대	취 소	- 도로 굴착 통제로 공사 취소 - 구간변경 : 솔샘로60길13-17~솔샘로64 나길48(송천동), 100㎜ × 100m - 예산부족 : 복구비 30백만원
16	북부	미아동외4개동상수도공사 (미아동734-300~734-251구간간선배관)	80	100	35	강북구 미아동 734-300~734-251 구간 최근 건축 증가 및 향후 신축 예정으로 인한 급수수요 증가로 소출수 민원이 발생에 따른 배수관 구경 확대	진행중(8월 완료 예정)
17	북부	미아동외4개동상수도공사 (미아동324-7~324-46구간간선배관)	80	60	25	강북구 미아동 324-7~324-46 구간 최근 건축 증가 및 향후 신축 예정으로 인한 급수수요 증가로 소출수 민원이 발생에 따른 배수관 구경 확대	진행중(9월 완료 예정)
18	북부	노원구 관내 미급수지역(정암사) 급수공사	25~80	800	450	정암사(노원구중계동산101-28)계곡수고갈시급수불편에따른급수관부설	공사완료
19	북부	노원구 관내 미급수지역(도선사) 급수공사	50	390	50	노원구 상계동 산153-1에 소재한 도선사는 현재 수돗물 공급이 되지 않는 미급수 지역으로, 여름철 가뭄시 빗물 담수량 부족으로 급수지원요청 민원이 지속적으로 발생하고 있음	공사완료
20	북부	도봉구 방학동 540일대 미급수지역 급수공사	80	550	65	-방악동 540번지 알대는 수돗물이 공급되지 않는미급수 지역으로 여름철 가뭄시 빗물 담수량 부족으로 급수지원요청민원이 지속적으로 발생하고 있음.	진행중 (개발제한구역으로토지사용승낙서 받고 있는 중)