문서번호	건축기획과-15357
결재일자	2017.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색건축팀장	건축기획과장
협조
	주무관

2017년 공공건축물 녹색건축 조성사업 추진

2017. 7.

2017년 공공건축물 녹색건축 조성사업 추진

기존 용역을 통해 입증된 실증내용을 기반으로 공공건축물을 에너지절감형으로 리모델링하여 공공기관 및 민간건물의 녹색건축 조성을 활성화하고 건물에너지 절감 및 온실가스 감축에 기여고자 함

Ⅰ		추진근거

녹색건축 조성지원법 제24조(녹색건축물 조성 시범사업 실시)

에너지이용 합리화법 제8조(국가·자방자치단체 등의 에너지이용 효율화조치 등)

서울시 녹색건축 조성 지원 조례 제8조의2(공공건축물의 녹색건축 인증)

Ⅱ		추진배경

공공부문에서 선도적으로 추진하여 민간건축물로 확산 유도

- 특히, 자치구와 협력하여 지역주민들의 이용이 많은 공공건축물을 대상으로 직접 체감할 수 있는 지역밀착형 사업으로 추진하여 홍보효과 및 지역사회로의 녹색건축 확산 도모

건축물 에너지 사용량 및 탄소 배출량 저감 목표 달성

녹색건축 품질확보를 위한 설계 및 시공 기술 축적

Ⅲ		사업개요

대 상 지 : 동대문구, 강남구

선정방법 : 자치구 공모를 거쳐 신청한 자치구 중에서 예산 규모를 고려하여 직접 시행하고자 하는 자치구를 우선 선정

사업내용 : 노후 공공건축물에 대한 에너지효율화

- 단열, 기밀, 창호, 신재생에너지, 쿨루프, LED 등 녹색건축 요소 반영

- 노후 설비(배관, 전기) 교체, 건축물 환경개선 등 부대공사

- 사업 후 시공사례, 에너지 절감효과, 이용자 만족도 등 홍보

사업기간 : ‘17. 7월 ~ 12월(6개월)

사 업 비 : 100백만원(자치구당 50백만원)

추진방법 : 사업대상 자치구에 예산 재배정하여 추진

- (시)사업계획 통보 ⇒ (구)세부 추진계획 수립 및 사업시행 후 결과보고

※ 금년 사업신청하였으나 선정이 안된 자치구에 대해서는 ‘18년 사업대상에 우선 검토하여 적극 참여에 대한 인센티브 제공 및 사업의 연속성 유지

Ⅳ		소요예산

소요예산 : 100백만원(자치구당 50백만원)

- 예산과목

☞ 건축기획과, 아름답고 매력있는 도시건축조성 지원, 건축물 공공성 강화, 녹색건축 품질확보를 위한 시공·감리 강화, 시설비(100-401-01)

Ⅴ		추진일정

‘17. 7 : 사업계획 통보 및 예산배정(시), 자체 추진계획 수립(자치구)

- 대상 자치구와 협의하여 예산범위내 우선 사업대상 선정하여 예산 배정

‘17.  8~11 : 공사발주 및 시행(자치구)

‘17. 12 : 공사완료 보고(자치구 → 시).  끝.