서울시 재해위험개선지구 정비사업 계획변경 요청

서울시 2017년도 재해위험개선지구 정비사업(한강로, 화곡1) 간에 국고보조금을 상호조정 요청

□ 변경요청 내용

○ (변경사유) 효율적으로 국고보조금을 집행하기 위하여 서울시 재해위험개선지구 정비사업(한강로, 화곡1) 간에 국고보조금을 상호조정하여 공사 추진

○ (변경내용)

- 용산구 한강로지구, 2017년 공사비 증액(500백만원)

- 강서구 화곡1지구, 2017년 공사비 감액(500백만원)

□ 변경 요청안

〈′16년 사업계획 변경 요청안 〉

(단위 : 백만원)

지자체	지구명	총 사업비		‘16년 까지	‘17년도 사업비(백만원)							잔여 사업비 (국비)
		당초	변경		당 초			변 경			증감 (국비)
					계	국 비	지방비	계	국 비	지방비
용산구	한강로 (계속)	48,109	48,109	28,568	9,070	4,535	4,535	10,070	5,035	5,035	증1,000 (500)	9,471 (4,736)
강서구	화곡1 (계속)	47,622	47,622	38,800	4,000	2,000	2,000	3,000	1,500	1,500	감1,000 (500)	5,822 (2,911)

□ 지방비 확보 및 연내 집행 대책

○ (지방비 확보) 한강로지구 2017년 지방비 7,527백만원 편성

확보완료

○ (연내집행) 2017년 12월 말까지 한강로지구 추가 국비 500백만원 전액 집행 가능

(단위 : 백만원-국비기준)

구분	예산액 (국비)	연내 집행액(계획)													‘18년 이월액
		소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
추가금액	500	500						200			200			100	0