송․배급수관 정비사업 현황

[ 중부수도사업소 ]

1. 송배수관 정비사업

사 업 명	공 사 규 모		사업비 (백만원)	공사기간	담당부서
	구경(㎜)	연장(m)
계	700~900	3,670	8,098
한남테니스장~동국대입구역 송배수관정비공사	700	1,700	3,400	‘17.4 ~ ‘17.11	급수운영과
이촌동407(이촌동)~301-171 송배수관정비공사	600	800	1,300	‘17.4 ~ ‘17.11	〃
남산가압장~용산2가동주민센터 송배수관정비공사	900	600	1,700	‘17.4 ~ ‘17.11	〃
소월길 송배수관 부설공사 (비굴착)	700	70	398	‘16.08.08 ~ ’17.02.03	〃 (사고이월)
숭인치안센터 ~ 미아사거리 송배수관 정비공사	900	500	1,300	‘17.4 ~ ‘17.11	시설관리과

2. 배급수관 정비사업

사 업 명	공 사 규 모		사업비 (백만원)	공사기간	비 고
	구경(㎜)	연장(m)
계	80~300	10,400	8,204
신당동387-2 외 12개소 배급수관 정비공사	80~300	1,655	1,289	‘17.3 ~ ’17.11	급수운영과
한남동618-5 외 4개소 배급수관 정비공사	80~300	1,710	1,330	‘17.3 ~ ’17.11	〃
와룡동119-1~122 외 9개소 배급수관 정비공사	150~200	1,245	1,062	‘17.3 ~ ’17.11	시설관리과
평창동153-3~150-12 외 3개소 배급수관 정비공사	80~300	1,485	1,156	‘17.3 ~ ’17.11	〃
하월곡동64-13~27-118 외 3개소 배급수관 정비공사	200~300	1,355	1,055	‘17.3 ~ ’17.11	〃
삼선동2가213-3 외 4개소 배급수관 정비공사	200~300	1,490	1,160	‘17.3 ~ ’17.11	〃
장위동237-135~74-6 외 3개소 배급수관 정비공사	200~300	1,460	1,152	‘17.3 ~ ’17.11	〃

❍ 추진일정

- 2017. 1 ~ 2월 : 도면심사(1.25.) 및 설계

- 2017.  2월 : 본청 계약심사 의뢰 및 발주

- 2017.  3월 ~ 4월 : 교통처리계획 수립 및 공사착공

- 2017. 11월 : 공사준공 예정