수질TMS사업 추진현황 집행계획 (강북아리수정수)

1. 사업 개요

○ ’18.1. 수질오염공정시험법기준 변경으로 수질기준에 맞는 계측기 구매설치

수질 TMS측정기기 및 부대시설 제조 구매설치

2. 예산 현황

○ 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 예산액			2017년도 집행액(8.31일 기준)
	이월예산 (A)	17년도 예산(B)	예산현액 (C=A+B)	이월액 (D)	17년도 예산(E)	집행액 (F=D+E)	집행률 (F/C)
계
기금		172			172	75.1	43.7%
지방비

※ 예산현액 : 당해연도 예산액 + 전년도 이월액

3. 사업추진 현황(일정별로 구체적으로 기재)

○ ‘17. 08. 31 설계완료

○ ‘17. 09. 10 계약심사 완료 및 공개입찰 실시

○ ‘17. 09. 22 계약완료

○ ‘17. 11. 05 설치완료(54백만원 집행예정)

4. 예산집행 부진사유 및 대책

○ 환경분야 시험•검사 등에 관한 법률에 의하여 강북아리수정수센터        수질측정기검사일정(’17.11.1. ~11.3)에 맞추어 수질TMS계측기

준공 일정을 조정 함

※ TMS계측기는 검사기관에 최초 검사후 사용하여야 함

5. 향후 추진계획

○ ‘17. 09. 05. 배출수처리시설 탈수기동 샤터교체 (16백만원 집행예정)

○ ‘17. 09. 20. 배출수처리시설 탈수기 부품교체 (3백만원 집행예정)

○ ‘17. 09. 28. 배출수처리시설 운영관리용역비 (10백만원 집행예정)

○ ‘17. 11. 05. 수질TMS계측기 준공(54백만원 집행예정)

○ ‘17. 12. 20. 슬러지처리비용(13.9백만원 집행예정)

6. '17년도말 이월·불용 예상액

○ 이월 예상액(단위:천원) : 없음

○ 불용 예상액(단위:천원) : 없음