문서번호	시설관리과-459
결재일자	2017.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

2017년 시설물 유지관리사업 추진계획

2017. 1.

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 시설물 유지관리사업 추진계획

2017년 상수도 시설물 유지관리사업의 원활한 추진을 위하여 사업소별 예산배정 계획을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 시설 현황

(단위 : 개소)

구 분	배 수 지			가압장	밸 브
	계	지역	1~2차		계	제 수	퇴 수	공 기
수 량	100	31	69	207	208,340	191,179	8,702	8,459

* 광암정수지 제외

□ 예산편성 현황

연번	사 업 명		예산액 (백만원)			비 고 (‘16년 대비)
			’16년	’17년	증·감
계			43,473	52,713	증 9,240	증 21%
1	노후밸브 정비 (본부 포괄)		17,000	25,900	증 8,900	노후밸브 교체 920개소 증
2	상수도관 전식방지공사 (본부 포괄)		3,000	3,000	-	-
3	가압장, 배수지 등 시 설 물 유지관리	소계	12,637	14,609	증 1,972
		본부 포괄	6,183	8,073	증 1,890	증액 주요사업 - 방수방식 1,708백만원 - 맨홀 정밀점검 800백만원(신규)
		사업소	6,454	6,536	증 82	- 가압장, 배수지 기전 및 토목시설 유지관리비
4	배수지 물탱크 청소 (사업소 예산)		2,968	2,928	감 40	- 6개월 주기 청소
5	가압장, 배수지 노후 시설 개량(사업소 예산)		5,500	3,580	감 1,920	- 노후 기전설비 개량
6	공동구 유지관리 부담금(사업소 예산)		2,368	2,696	증 328	- 공동구 1개소 증가 관리비 반영(도로시설과)

Ⅱ		사업추진 중점사항

□ 노후밸브 정비

❍ 노후밸브 교체시 정비기준 준수

① 고장밸브 최우선 교체

② 1994년 이전에 설치된 회주철 재질의 밸브

③ 설치연도가 오래된 순서(작업 난이도 및 효율성을 고려하여 소블록 단위별 계획수립 추진)

- 단수 범위 축소가 필요한 경우, 중간 밸브 설치 및 부단수 교체공법 채택 등 검토

※단 부단수 교체공법 제품이 특허 등 특정제품에 해당될 경우, 사전 절차 이행

- 노후 밸브의 기능을 검토하여 기능상 필요가 없을 경우 철거

❍ 재개발, 재건축 지역 및 배관정비 예정 구간의 노후밸브 교체 금지

□ 상수도관 전식방지공사

❍ 전식방지공사 시행을 위한 유관기관(도로관리청, 철도공사 등) 사전 협의 이행 등

❍ 보링공사 시 소음에 따른 민원발생에 대비하여 사전 공사안내

□ 가압장, 배수지 등 시설물 유지관리

❍ 정밀안전진단 및 정밀점검 용역 관련

- 상반기 배수지 청소일정에 맞추어 진단 시행이 가능하도록 용역 조기 발주

- 안전진단 용역 관련 법규, 절차 및 사후 조치 철저

▸ 안전진단 용역 준공 2개월 전 기술심사담당관의 건설기술심의위원회 심의 요청

▸ 안전진단 용역 결과 시설물정보종합시스템 입력(한국시설안전공단 FMS)

▸ 정기점검 및 자체 정밀점검 수행은 초급기술자 이상 자격 유지 및 법정 안전점검교육 이수(70시간)

❍ 배수지 내부 방수․방식공사 관련

- 개정된(2017. 1. 11.) 평가기준으로 공법·자재 선정 (중부 보광, 북부 공릉)

‣ 배수지 부위별 계열선정 : 본부 내부 검토회의 개최

‣ 기술심의(공법선정)위원회 : 발주부서 기술심의위원회 개최

□ 배수지 물탱크 청소

❍ 환경부 제정 “상수도시설물 유지관리지침”의 청소주기(6개월) 준수

❍ 배수지 내부 방수․방식공사 추진일정을 고려하여 세부 청소계획 수립 및 본부 관련 부서 협의

※ 배수지 내부 방수․방식공사와 일정이 중복될 경우, 청소 중지

□ 가압장, 배수지 노후시설 개량

○ 노후로 효율이 저하되어 에너지 손실이 많은 대형 펌프를 최적규격의 신규펌프로 교체하여 전기료 및 온실가스 절감 도모

- 서부수도 : 북악터널가압장 모터펌프 개량 (정속펌프 355Hp×2대)

○ 감시제어반 및 통합감시센터 모니터링 시스템 개량으로 운영 신뢰도 향상

○ 펌프 효율 향상을 위한 개량사업은 “모터펌프 적정 용량검토” 및 협의 완료 후 시행

○ 사업 추진 중 안전사고 예방 철저

□ 기타사항

❍ 사업 추진시 특허, 신기술 등 특정제품 사용이 필요한 경우 반드시 사전 절차를 이행하고 제품 구매[특정제품 심사위원회, 행정1부시장 방침 제559호(’09. 11. 12.)]

❍ 사업소별, 분야별 예산 집행율 관리 요망

- 사고이월이 발생하지 않도록 공정율 관리

- 예산 불용이 발생하지 않도록 철저한 사업관리

Ⅲ		포괄예산 배정계획

□ 노후 밸브 정비

(단위 : 백만원, 개소)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	비고 (본부)
배정액 (백만원)		25,900	3,950	2,465	3,590	940	3,590	2,865	3,950	1,850	2,700
노후밸브 교체	소요예산	23,200	3,950	2,465	3,590	940	3,590	2,865	3,950	1,850
	정비 대상 (개소)	3,200	545	340	495	130	495	395	545	255
본부사업	소요예산	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700

※ 본부사업 : 대형밸브 점검·정비(1,000백만원),  시설물 감리비(800백만원),  본부 예비비(900백만원)

□ 상수도관 전식방지공사

(단위 : 백만원, 개소)

구 분		계	서부	동부	북부	강서	강남
배정액 (백만원)		3,000	510	700	700	700	390
소요 예산	시 설 비	2,700	460	630	630	630	350
	감 리 비	300	50	70	70	70	40
정비 대상		27㎞	4㎞	7㎞	7㎞	7㎞	2㎞

□ 가압장, 배수지 등 시설물 유지관리

(단위 : 백만원, 개소)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	본부
배 정 액		8,066	2,096	141	84	4,778	4	265	56	524	118
안전진단 정밀점검 (배수지· 가압장)	소요예산	1,098	291	141	84	15	4	265	56	124	118
	정밀안전진단 (개소)	25	12	1	-	-	-	9	-	3	-
	정밀점검 (개소)	84	29	24	8	5	1	8	7	3	107㎞ (관로)
배수지 방수․방식	소요예산	6,168	1,805			4,363		-	-	-	-
	정비 대상 (개소)	2	1			1		-	-	-	-
맨홀 정밀점검	소요예산	800				400				400
	대상 (개소)	25,000				12,500				12,500

※ 시책업무추진비(7백만원) 미포함

Ⅳ		행정사항

□ 2017년 시설물 유지관리사업 추진계획 통보

❍ 본부 포괄 예산 배정 등

□ 원활한 사업 추진 및 경제 활성화 도모를 위해 조기 발주 시행

□ 지속적인 사업관리 추진

❍ 업무 담당별 사업소 추진실적 수합 등 사업관리 추진

❍ 분기별 예산 집행실적 및 사업실적 점검 시행

붙임 : 1. 2016년 사업별 추진실적 분석결과 1부.

2. 2017년 분야별 사업현황 1부.

3. 2017년 정밀안전진단 및 정밀점검 대상 1부.

4. 2017년 시설물 유지관리 사업 예산 총괄 1부. 끝.