문서번호	누수방지과-890
결재일자	2017.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
협 조

2017년 유수장애 상수도관 정비계획

2017. 1.

상수도사업본부

(누수방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2017년 유수장애 상수도관 정비계획

하수관에 저촉되는 상수도관을 이설하여 하수 흐름을 원활히 하고 상수도관의 부식 및 누수방지로 깨끗한 아리수 공급에 기여하고자 함

Ⅰ		관련 근거

❍ 하수도법 제24조, 제80조 제4항 제4호

❍ 하수도법 제19조 제5항, 제75조 제2호

Ⅱ		2016년 추진실적

❍ 유수장애 정비 실적

(단위: 개소)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
당초 대상		236	7	22	-	-	14	193	-	-
실적	당초	235	6	22	-	-	14	193	-	-
	추가	46	1	1	9	9	10	7	2	7
	소계	281	7	23	9	9	24	200	2	7
미 정 비		1	1	-	-	-	-	-	-	-

※ 중부사업소 미정비(1개소) 대상은 2017년도 계획에 포함하여 정비

❍ 예산집행 실적

(단위: 천원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	자재
예 산 액	371,500	81,500	41,000	43,000	60,900	50,000	44,000	5,200	20,000	25,900
집 행 액	356,075	75,918	40,156	42,375	60,326	43,068	43,501	5,128	19,723	25,880
집 행 율 (%)	95.8	93.2	97.9	98.5	99.1	86.1	98.9	98.6	98.6	99.9

Ⅲ		2017년 추진계획

정비 대상

❍ 사업소별 정비 대상

(단위: 개소)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계		41	4	7	-	-	6	16	8	-
정비 대상	사업소 원인자	41	4	7	-	-	6	16	8	-
	구청 원인자

정비 기간 : 연중 실시

○ 정비대상에 대하여 자치구 및 유관기관 등과 합동 조사를 실시하여 사업소 자체계획 수립 후 5월말(우기 도래 전)까지 정비 완료(예산 조기집행)

○ 자치구에서 하수도 탐사 등으로 추가 발견되는 정비대상은 예산 한도 내에서 당해 연도에 정비하고 예산 부족 시 2018년에 정비

정비 예산 : 400,700천원

○ 사업소별 정비 예산

(단위: 천원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
예산액	400,700	81,500	30,000	80,000	30,000	50,000	79,200	30,000	20,000

Ⅳ		정비내용 및 방법

○ 하수도 내부에 부설된 유수장애 상수도관 이설

○ 하수도내 불용관은 분기점에서 철거 및 폐쇄

○ 이설공간이 협소한 경우에는 별도 관망형성 등 정비방안 수립하여 절단

○ 자치구에서 통보된 유수장애 상수도관은 현장조사 후 확인하여 정비

○ 귀책사유가 하수도인 경우 원인자 부담금 징수 후 상수도관 이설 및 정비

Ⅴ		행정 사항

○ 사업소에서는 3월 이후 당월 추진 실적을 익월 10일(매월)까지 본부 보고

- 정비완료 후 해당 자치구에 통보하고 대장 및 관리카드를 정리하여 제출

- 자치구에서 추가 통보되는 대상이 있을 경우 월보에 포함하여 제출

붙임 : 1. 2017년 유수장애 상수도관 정비대상 1부.

2. 추진실적 보고(양식) 1부. 끝.