서울특별시중구체육진흥기금 변경심의(안)

Ⅰ. 목   적

서울특별시중구체육진흥기금설치및운용조례에 따라 기금의 용도 및 활용 목적의 타당성 여부 등을 검토 ․ 심의하여 기금운용관리의 효율성을 제고하고자 함

Ⅰ. 제안이유

장충초 운동장 우레탄 트랙 교체공사 중 우레탄이 아스콘과 흡착되어 제거되지 않는 문제 발생으로 공사가 중단되어 공사비용 부족분을 추가편성하여 지원하고, 하반기 체육시설 정비 및 확충수요가 적을 것으로 예상되므로 감액편성 하고자 함

Ⅱ. 심의안건(총괄표)

연번	사 업 명	변경예산(천원)	추진부서
총 계		0	교육체육과
1	장충초 운동장 우레탄 트랙 교체공사 지원	10,000
2	생활체육시설 장비 등 정비 및 확충	△10,000

Ⅲ. 심의안건 설명서

1. 중구체육진흥기금 운용계획 변경

운용변경 사유

❍ 장충초 운동장 우레탄 트랙 교체공사 지원-10,000천원

❍ 자산취득비 감액-△10,000천원

운용현황

(단위:천원)

2016년도말 Ⓐ	2017년 조성계획			2017년도말 (Ⓐ+Ⓑ-Ⓒ)
	수입Ⓑ	지 출Ⓒ	증 감(Ⓑ-Ⓐ)
104,861	103,000	152,100	△49,100	55,761

변경내용

※ 중구체육진흥기금 운용계획 변경 세부내용

(단위 : 천원)

구 분		2017년 편성액	2017년 변경액	증감	산출내역
세부사업	편성목	207,861	207,861	0
학교체육 육성·지원	자치단체등 이 전	20,000	30,000	10,000	□관내 학교 운동부 지원 = 20,000,000원*1 □장충초 운동장 우레탄 트랙 교체 지원 = 10,000,000원*1
생활체육 활성화지원	일반운영비	12,100	12,100	0	□기금관리위원회 참석수당 = 2,100,000원*1 □생활체육운동장 소금 등 소모품 구매 = 10,000,000원*1
	민간이전	40,000	40,000	0	□시민체육대회 지원 = 20,000,000원*1 □중구체육회 활성화 지원 = 20,000,000원*1
생활체육 기반조성	자산취득비	30,000	20,000	△10,000	□생활체육시설 장비 등 정비 및 확충 = 20,000,000원*1
	민간자본이전	30,000	30,000	0	□중구체육회 공용차량 교체 지원 = 30,000,000원*1
엘리트체육 육성·지원	일반보상금	20,000	20,000	0	□ 여자레슬링부 훈련비 등 지원 = 20,000,000원*1
보전지출	예치금	55,761	55,761	0	□ 예치금=55,761,000원*1

2. 장충초 운동장 우레탄 트랙 교체 지원

우레탄 트랙 교체 추진경위

❍ 2016. 3. : 교육부 우레탄 트랙 유해성 전수조사 실시

❍ 2016. 6. : 중금속 검출(시험결과 Pb 109mg/kg, 기준치 Pb 90mg/kg)

❍ 2016. 9. : 교육부 특별교부금 39,010천원 배정

❍ 2017. 4. ~ 8. : 트랙 교체공사 설계용역 및 철거 공사 시행

❍ 2017. 8. : 우레탄이 아스콘과 흡착되어 제거되지 않는 문제 발생으로 공사 중지

현황 및 문제점

❍ 우레탄이 아스콘과 흡착되어 완벽히 제거되지 않아 중금속 등이 검출 될 우려가 있으며, 강하게 제거시 아스콘이 탈락되어 바닥 기초가 손상

❍ 아스콘 철거·설치 공사 및 폐기물 처리비용 42,511천원 부족

(단위 : 천원)

설계변경 전			설계변경 후		부족액
시공방법	소요예산		시공방법	소요예산
기존 아스콘 기초위 새 우레탄 시공	72,627	특별교부금 39,010	기존 아스콘 철거 후 새 아스콘을 시공한 뒤 친환경 우레탄 시공	115,138	42,511
		학교회계 33,617

❍ 안전사고 위험 노출 및 유소년 축구대회(‘17.9.16.) 운영 차질

향후 지원계획

❍  구 지원예산(9월 지원예정) : 총 30,000천원

- 교육경비보조금(학교환경개선분야) 20,000천원

- 생활체육기금(생활체육기반조성) 10,000천원

☞ 부족분 12,511천원 학교회계 자체충당

3. 생활체육기반조성 자산취득비 변경

감액사유

❍ 하반기 체육시설 확충 및 정비 수요가 적을 것으로 예상됨에 따라          10,000천원 감액