교통사고 잦은곳 개선사업 이월 사유서

(서울특별시, 교통운영과, 과장 강진동, 담당 손태빈 ☎:02-2133-2446)

□ 총괄표

(단위 : 개소, 백만원)

구 분	집행현황			불용액	이월액	이월사유 (개략)	추 진 상 황				비고 (사업 년도)
	국비	집행액	집행율				설계중	발주중 (착수 예정일)	공사중	준공 예정일
계
서울특별시 사고잦은곳개선사업	370	241	65.1%	49	80	유관부서 협의		○ (18.3월)		(´18.5월)

□ 이월사유

ㅇ 서울특별시

- 유관부서(경찰청 및 구청) 협의 기간 소요 및 동절기 굴착통제

□ 지금까지 추진경위

ㅇ (서울특별시)

- ´17. 10월, 사업구간 선정 및 실시설계 추진

- ´17. 12월, 유관기관 협의 완료(경찰청, 구청)

- ´18. 01월, 사고이월예산 사업부서 재배정 완료

□ 앞으로 추진(집행)계획

ㅇ (서울특별시)

일 정	추진내용	국비 집행 계획 (백만원)			비 고
		총액	집행액(누계)	집행율(%)
´18. 3월	공사착공	370	241	65.1
´18. 5월	공사완료	370	321	86.8