2017년 추가 소요예산 현황

█ 공사명 : 서울시 어린이병원 삼성 발달센터 증축공사(설비분야)

공사 구분	추가금액(원)	증가 사유	비고
기계설비	100,000,000	① TAB 기술검토사항 반영 디퓨져 크기 및 수량 변경, 냉온수펌프 용량조정 등(50,000,000) ② 기타 공조배관공사 누락 및 추가 비용 반영(20,000,000) ③ 설계심의 사후평가 기술심사담당관 지적사항 반영 대강당 공기순환기 추가 설치 등(30,000,000)	실정보고 예정
전기설비	50,000,000	① 건축 실 변경으로 인한 전등설비, 전열설비, 소방설비 설계변경 ② 수변전설비 및 전력간선설비, 전력제어, 동력설비공사 설계변경	실정보고
통신설비	50,000,000	① 화장실 및 주차장 비상벨설비 반영 설계변경	실정보고
합 계	200,000,000