우(134-060) 서울시 강동구 둔촌동 227-7번지 / TEL : (02)488-7192~3 / FAX : (02)488-7194 담당 : 박 노 춘
문서번호		: 지감922- 17- 109호		선결			지시
시행일자		: 2017. 3. 14.
				접수	일 자 시 간	. . :	결 재 ∙ 공 람
수 신		: 서울특별시 도시기반시설본부장
경 유		:
					번 호
				처 리 과
참 조		:
				담 당 자
제 목		: 922공구 2017년 3월 3주차 휴일작업계획 승인요청

1. 대우922 제17- 087호(‘17.3.14)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 지하철 922공구 건설공사중 시공사로부터 2017년 3월(3주차) 휴일작업계획에 대한 승인요청이 있어 입찰안내서 제3장 계약조건 3-3 지하철9호선3단계 일괄공사 계약특수조건 제47조(휴일 및 야간작업)에 의거 붙임과 같이 보고하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙   임 : 1. 검토의견서 1부.

2. 첨부1 <작업장별 건설사업관리기술자 및 현장책임자 배치현황>1부.

3. 시공사 공문 사본 1부.  끝.

서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사

책임건설사업관리기술자  신   정   묵  (인)

검 토 의 견 서

■제  목 : 휴일 작업계획(2017년 3월 3주차) 검토

■검토목적

서울지하철 9호선3단계922공구 건설공사 중 계획공정 달성 및 원활한 공정 추진을 위하여 시공사에서 제출된 휴일작업 계획에 대한 근무계획을 수립하여 공정관리에 철저를 기하고자 함.

■공사현황

∘ 공사구간 : Sta.38K330～39K800(올림픽공원역 인접 한국체대입구～강동구둔촌동산29번지)

∘ 공사규모 : - 총연장 1,470m

- 정거장(개착)1개소 : 165m  - 본선터널(NATM) : 1,238m

- 본선 집수정(개착) : 10.4m - 본선환기구(개착)2개소 :  56.5(26+30.5)m

∘ 공사기간 및 계약금액

구 분	공사기간	공사금액(원)	비 고
전체공사	2010.09.16. ～ 2018.12.31.	132,933,000,000
1차 공사	2010.09.16. ~ 2012.02.29.	9,530,000,000
2차 공사	2012.03.07. ~ 2013.02.28.	9,194,000,000
3차 공사	2013.02.07. ~ 2014.01.31.	26,235,000,000
4차 공사	2014.02.03. ~ 2015.01.31.	28,286,688,000
5차 공사	2014.12.17. ~ 2015.02.25.	2,482,312,000
6차 공사	2015.03.13. ~ 2015.12.17.	18,530,000,000	설계변경(감)2,544 환기구
7차 공사	2016.3.17. ~ 2016.12.31.	13,440,000,000
8차 공사	2017.1.1. ~ 2017.12.31.	17,000,000,000	누계 : 124,698,000,000 (잔액 : 8,235,000,000)

∘ 공정율 : 전체공사 - 계획 81.6% , 실적 82.7%

∘ 시공사 : (주)대우건설 외 4개사

■검토내용

1)관련근거

- 공사계약 일반조건 제19조(휴일 및 야간작업) ①항 공사감독관의 감독하에 공사를 시행

- 입찰안내서 제3장 계약조건 3-3 지하철9호선 3단계 일괄공사 계약 특수조건 제47조

(휴일 및 야간작업) ②항 휴일 및 야간 작업 시행에 따른 감리(용역비는 계약상대자가 부담)

- 도시기반시설본부장 방침 제89호(토목부-3059, 2010.03.08.)

- 도시기반시설본부 업무연락전 휴일작업 현장관리 개선방안통보(공무부 SMIH-13-10770, 2013.11.20)

2) 휴일작업 시행사유

- 본선,정거장 구조물 작업의 효율성 및 연속성 확보

- 계획 공정율 달성 및 원활한 공정추진

휴일 작업 계획

(’17.3.18~’17.3.19)

1. 사업명 : 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			상주기술자	시공사
3월18일(토)	937정거장	937정거장구조물작업	박노춘	정한영,김정훈
		937정거장 부대시설 출입구#2작업		이규호,김남곤
3월19일(일)	937정거장	휴무

3. 휴일작업 근무자 명단

2017.3.18.(토)				2017.3.19.(일)
구 분	직 무	성 명	비고	구 분	직 무	성 명	비고
건설사업 관리기술자	상주 기술자	박노춘		건설사업 관리기술자	상주 기술자	-
시공사	공사팀	정한영,임원빈 김남곤		시공사	공사팀
	품질팀	김정훈,김영균			품질팀
	안전팀	이규호,박해원			안전팀	이규호
	공무팀 관리팀				공무팀 관리팀

4. 평일 및 휴일작업에 따른 건설사업관리(상주)기술자 근무현황

공구	평 일	현 장 감리원수	휴 일	현 장 감리원수
	주요 작업내용		주요 작업내용
922	1구역 [본선집수정]	2명	- 1구역 〔본선집수정〕 : - 2구역 〔본선환기구,정거장〕 : . 937정거장 구조물 작업 . 937정거장 출입구#2구조물작업	1명
	2구역 [본선환기구, 937정거장] - 937정거장 구조물작업 - 937정거장 출입구#2 구조물작업

■검토의견

937정거장,본선환기구,본선집수정,정거장부대시설,지장물복구공(구조물) 작업의 효율성과 원활한 공정 추진을 위하여 시공사의 휴일작업 시행으로 인한 공사 관리의 공백이 발생치 않도록 상주 건설사업관리기술자의 휴일근무를 시행하여 공사 관리코자하며, 휴일작업으로 인하여 발생되는 추가비용은 입찰 안내서 제3장 계약조건3-3 지하철9호선3단계 일괄공사 계약특수조건 제47조(휴일 및 야간작업)에 따라 원인자(시공사)가 부담하는 조건으로 시행코자 함.

지하철 9호선 3단계 922공구건설공사

책임건설사업관리기술자 신  정  묵  (인)

첨부1 <작업장별 감리원 및 현장책임자 배치현황>

- 평일과 같은 수준, 평일보다 적은 경우 건설사업관리기술자 배치 (922공구)

구 분		1구역			2구역		비고
연 장		318m	10m	425m	222m	481m
공사내용 (공정률)		굴착 L=318 (굴착 100%) 인버트 318m완료 라이닝318m완료	굴착완료(굴착100%) 본체완료 pit구조물공사중	굴착 L=425 (굴착 100%) 인버트 425m 완료 라이닝 425m 완료	굴착 211m본체완료 (굴착 95%) 상부con’c222m완료 #2출입구 구조물공사중	굴착 481m 완료 (굴착 100%) 인 버 트 481m 완료 라이닝 481m 완료
평 일	작업장
	상주 기술자	2명
평일과 같 은 휴 일 작 업	작업장
	상주 기술자	1명

범례

작업구간