서울시 도로시설물 C등급 이하 현황

(2016. 12. 31일 기준)

연번	안전 등급	시설명	종별	준공 년도	보수ㆍ보강 현황	진단ㆍ점검 현황	등급상향 계획	관리부서 (주관부서)
1	C급	원효대교북단교	법정외	‘81	- ‘16년 보수공사 실시	-‘16년 정밀안전진단(등급하향 B→C)	-‘17년 실시설계 실시중 -‘18년 보수공사 실시(예산반영예정) 후 정밀점검에서 재평가	시설공단 (도로시설과)
2	C급	서빙고고가차도(구)	1종	‘84	- ‘16년 보수공사 실시	-‘15년 정밀안전진단(등급하향 B→C)	-‘17년 정밀점검에서 재평가	시설공단 (도로시설과)
3	C급	양화대교 북단램프 F-1	법정외	‘97	- ‘17년 보수공사 실시(예정)	-‘16년 정밀점검(관리누락, C판정)	-‘17년 보수공사 실시 후 정밀점검에서 재평가	시설공단 (도로시설과)
4	C급	양화대교 북단램프 F-2	법정외	‘97	- ‘17년 보수공사 실시(예정)	-‘16년 정밀점검(관리누락, C판정)	-‘17년 보수공사 실시 후 정밀점검에서 재평가	시설공단 (도로시설과)
5	C급	성산대교 북단램프 C-1	법정외	‘97	- ‘17년 보수공사 실시(예정)	-‘16년 정밀점검(관리누락, C판정)	-‘17년 보수공사 실시 후 정밀점검에서 재평가	시설공단 (도로시설과)
6	C급	성산대교 북단램프 C-2	법정외	‘97	- ‘17년 보수공사 실시(예정)	-‘16년 정밀점검(관리누락, C판정)	-‘17년 보수공사 실시 후 정밀점검에서 재평가	시설공단 (도로시설과)
7	C급	중랑상단IC	2종	‘91	-‘16년 보수공사 실시	-‘15년 정밀점검(등급하향 B→C)	-‘17년 정밀점검 후 재평가	시설공단 (도로시설과)
8	C급	중랑하단IC	2종	‘91	-‘16년 보수공사 실시	-‘15년 정밀점검(등급하향 B→C)	-‘17년 정밀점검 후 재평가	시설공단 (도로시설과)
9	C급	성산대교	1종	‘80	-성산대교 성능개선공사 예정 (‘17년~’23년)	-‘16년 정밀안전진단 완료	-성능개선사업 완료(‘23년 예정) 이후 재평가	교량안전과
10	D급	서울역고가	1종	'70	-서울역 7017프로젝트 추진 (바닥판 철거공사 시행중)	-‘15년 정밀점검 완료	-	교량안전과
11	C급	탄천2교	2종	‘86	-‘17년 보수공사 예정	-‘16년 정밀점검(등급하향 B→C)	-‘18년 정밀점검 후 재평가	동부 (시설)
12	C급	도림고가	2종	'74	-'16년 보수공사 완료	-'16년 정밀안전진단 기술심의 예정 (진단용역 ‘17년 준공 예정)	-‘16년 정밀안전진단 결과에 따라 재평가	남부 (시설)
13	C급	도림천복개-4	1종	‘88	-'16년 보수공사 완료	- '16년 정밀점검 완료	-‘18년 정밀점검 후 재평가	남부 (시설)
14	C급	북악스카이웨이 1교	법정외	'70	-철거 및 전면교체 공사 실시	-준공시 초기점검 실시	-준공후 재평가 반영(‘18년)	북부 (시설)
15	C급	장안교(구교)	2종	‘78	-철거 및 전면교체 공사 시행중 (‘14.12 ~ ’17.08)	-준공시 초기점검 실시	-준공후 재평가 반영(‘17년)	성동 (시설)
16	C급	목동교	2종	‘68	-‘16년 일상유지보수 완료 -‘17년 일상유지보수 예정	-’16년 정밀점검 완료	-‘18년 정밀점검 시행 후 재평가	강서 (시설)
17	C급	안양교	2종	‘77	-철거 및 전면교체 공사 시행중 (‘15.10 ~ ’19.9)	-준공시 초기점검 실시	-준공후 재평가 반영(‘20년)	강서 (시설)
18	C급	오류철도고가차도	법정외	‘86	-‘16년 일상유지보수 완료 -‘17년 일상유지보수 예정	-‘16년 정밀점검 완료	-’18년 정밀점검 시행 후 재평가	강서 (시설)
19	C급	도림천복개(좌안)	1종	‘88	-‘16년 일상유지보수 완료 -‘17년 일상 및 단위공사 예정	-‘14년 정밀안전진단 완료 ※ 안전성평가 : C급 -’16년 정밀점검 완료	-‘19년 정밀안전진단 시 재평가	강서 (시설)
20	C급	가리봉철도고가	2종	‘77	-‘16년 일상유지보수 완료 -‘17년 일상 및 단위공사 예정	-‘15년 정밀점검 완료(전체구간) -‘16년 정밀점검 완료(철도구간)	-’17년 정밀점검 시행 후 재평가	강서 (시설)

※ C, D등급 시설물 증․감 :‘14년 21개소 ⇒‘15년 16개소(감 5개소) ⇒ ‛16년 13개소(감 3개소) ⇒ ‛17년 20개소(증 7개소)

- 미평가 시설물 등급평가 및 보수공사 후 점검시기 미도래, 점검용역 준공연기 등에 따른 평가등급 미반영