사장 요청사항 관리카드

관리번호	95번		지시일자	2015-08-10
총괄부서	승무지원처		수명장소	대회의실, ‘운전차량회의’ 시
추진부서	승무지원처		협조부서	기획조정실
지시제목	모의운전연습기의 조속한 도입 추진
지시내용	모의운전연습기는 기관사의 운전역량을 강화하고 비상대응 능력을 향상하는데 효과가 있습니다. 관련 부서에서는 사업시기의 단축을 통해 모의운전연습기를 조속히 도입토록 노력해 주시기 바랍니다．
추진기간	시작일	2015-08-18	종료일	2017-11-30

추진계획	○ 사업비 : 약 18~20억원(방침서 내 견적서 첨부) ○ 추진기간 : 2015.6.01. ~ 2017.11.30. ○ 세부추진계획(월별) - 2015.06 : 국내 유관기관(철도 및 항공분야) 견학 - 2015.07 : 기관사 모의운전연습기 국내사업처 도입 요청, 사업조정위원회 안건 상정 - 2015.08 : 모의운전연습기 도입 방침 수립 - 2015.09 : 투자심사의뢰 ※ 투자심사 이후 예산 반영 결과에 따라 추진 진행 - 2016.02 : TF 구성 및 회의 - 2016.03 : 모의운전연습기 사양서 작성 - 2016.06. : 원가조사용역 - 2016.07. : 서울시 계약심사 - 2016.09. : 세부시행계획 사장방침 수립 및 발주의뢰서 작성 - 2017.02. : 입찰공고 - 2017.04. : 제안서 평가 - 2017.04. : 계약체결 - 2017.11. : 사업완료
추진실적	○ 2015.06.01 : 한국철도공사 등 6개 유관기관 출장 계획수립 (승무지원처-976) - 서울메트로, 인천교통공사, 한국철도공사, 대전도시철도공사, 인천국제공항공사, 오산(공군)비행장 ○ 2015.06.01 : 서울메트로, 인천교통공사 견학 (승무지원처-997, 승무지원처-978) ○ 2015.06.02 : 한국철도공사 인재개발원 견학 (승무지원처-995) ○ 2015.06.03 : 대전광역시도시철도공사 견학 (승무지원처-994) ○ 2015.06.18 : 인천국제공항공사 항공훈련센터 견학 (승무지원처-1041, 승무지원처-1115) ○ 2015.07.14 : 기관사 모의운전연습기 국내사업처에 도입 요청(승무지원처-1371) - 5호선 하남선 신규전동차 반입시 모의운전연습기 도입요청 및 견적서 송부 ○ 2015.07.22 : 국내사업처 기관사 운전연습기 관련 자료 보완요청으로 보완자료 송부(승무지원처-1430) - 기관사 모의운전연습기 도입 필요성에 관한 자료 ○ 2015.07.28 : 사업조정위원회 개최시 기관사 모의운전연습기 도입 안건상정 (기획처-3226) - 모의운전연습기 도입 목적과 활용방향, 비용대비 효과, 도입시기 등 검토할 필요성이 있음 ○ 2015.08.21 : 운전연습기(시뮬레이터) 도입(안) 수립(사장방침-590호) ○ 2015.08.27 : 투자사업 심사분석의뢰서 제출(승무지원처-1681) ○ 2015.08.28 : 2016년도 예산편성 요구서 제출시 운전연습기 도입 예산 편성 요구 (승무지원처-1685) ○ 2015.10.01 : 투자사업 심사분석결과 "적격" 판정(예산처-4510) ○ 2016.02.12 : 모의운전연습기 도입 TF 구성 (방침-35) ○ 2016.03월 : 사양서 작성 ○ 2016.04.20.: 원가조사 용역 발주 의뢰(승무지원처-859) ○ 2016.05.09.: 원가조사 용역 발주 완료 및 입찰 종료 (계약처-4524, 승무지원처-1099, 승무지원처-1100) ○ 2016.06.07.: 원가조사 준공계 접수(승무지원처-1205) ○ 2016.06.28.~07.07.: 서울시 계약심사 완료 (계약심사과-11535) ○ 2016.09.22.: 기관사 모의운전연습기 제조, 구매 시행(사장방침-105, 승무지원처-2173) ○ 2016.09.30.: 계약의뢰서 작성 및 송부(승무지원처-2234) ○ 2016.12.15.: 기관사 모의운전연습기 설치 장소 확보 방안(승무지원처-2968) ○ 2017.02.17.~03.28. : 입찰공고(조달청) ○ 2017.03.27. : 입찰제안서 평가계획 수립(승무지원처-680) ○ 2017.04.03.~04.04. : 입찰제안서 평가(계량, 비계량)

추진현황	◯ 완료 ◉ 추진중 (추진율 40%)
추진담당자	운영본부 승무지원처 김미영 (내선번호 : 2314)

○ 추진계획 변경사항 보고 양식

종료예정일 (수정 전)	2017-10-31
당초 추진계획	○ 사업비 : 약 18~20억원(방침서 내 견적서 첨부) ○ 추진기간 : 2015.6.01. ~ 2017.10.31. ○ 세부추진계획(월별) - 2015.06 : 국내 유관기관(철도 및 항공분야) 견학 - 2015.07 : 기관사 모의운전연습기 국내사업처 도입 요청, 사업조정위원회 안건 상정 - 2015.08 : 모의운전연습기 도입 방침 수립 - 2015.09 : 투자심사의뢰 ※ 투자심사 이후 예산 반영 결과에 따라 추진 진행 - 2016.02 : TF 구성 및 회의 - 2016.03 : 모의운전연습기 사양서 작성 - 2016.06. : 원가조사용역 - 2016.07. : 서울시 계약심사 - 2016.09. : 세부시행계획 사장방침 수립 및 발주의뢰서 작성 - 2017.01. : 입찰공고 - 2017.02. : 계약체결 - 2017.10. : 사업완료
⇩
종료예정일 (수정 후)	2017-11-30
변경 추진계획	○ 사업비 : 약 18~20억원(방침서 내 견적서 첨부) ○ 추진기간 : 2015.6.01. ~ 2017.11.30. ○ 세부추진계획(월별) - 2015.06 : 국내 유관기관(철도 및 항공분야) 견학 - 2015.07 : 기관사 모의운전연습기 국내사업처 도입 요청, 사업조정위원회 안건 상정 - 2015.08 : 모의운전연습기 도입 방침 수립 - 2015.09 : 투자심사의뢰 ※ 투자심사 이후 예산 반영 결과에 따라 추진 진행 - 2016.02 : TF 구성 및 회의 - 2016.03 : 모의운전연습기 사양서 작성 - 2016.06. : 원가조사용역 - 2016.07. : 서울시 계약심사 - 2016.09. : 세부시행계획 사장방침 수립 및 발주의뢰서 작성 - 2017.02. : 입찰공고 - 2017.04. : 제안서 평가 - 2017.04. : 계약체결 - 2017.11. : 사업완료
변경의견	○ 예산 지연 편성으로 사업기간 연장

관리번호	4번		지시일자	2016-10-06
총괄부서	승무지원처		수명장소	대회의실, ‘확대간부회의’ 시
추진부서	승무지원처		협조부서	기획조정실
지시제목	지진 매뉴얼 및 관련 규정 정비
지시내용	지진 대응 매뉴얼과 기관사 업무내규 등 관련 규정 등이 일치하도록 수정·보완 해주시기 바랍니다.
추진기간	시작일	2016-10-24	종료일	2017-05-31

추진계획	□ 운전취급규정 개정(서울메트로와 통합규정에 반영) ○ 세부 추진계획 - 2016. 11. 30.: 통합규정 최종안 작성 - 2016. 12. 15.: 승인 신청(국토부) - 2016. 12. 19.~2017. 02. 27.: 승인 검사(국토부) ※ 통합사규 확정 시 반영예정 □ 지진대응 매뉴얼 보완 ○ 2016.12월: 통합매뉴얼 작성 ※ 통합매뉴얼 확정 시 반영예정
추진실적	○ 2016.12.27.: 운전취급규정 개정안 통합사규 공단 송부 - 제355조(지진경보 발령 때 기준), 제357조(기관사의 조치) ○ 2017.02.24.: 양공사 합동 사규심의위원회 통과 ○ 2017.03.21.~03.24.: 교통안전공단 철도안전관리체계 현장검사 시행

추진현황	◯ 완료 ◉ 추진중 (추진율 50%)
추진담당자	운영본부 승무지원처 김미영 (내선번호 : 2314)

○ 추진계획 변경사항 보고 양식

종료예정일 (수정 전)	2017-04-30
당초 추진계획	□ 운전취급규정 개정(서울메트로와 통합규정에 반영) ○ 세부 추진계획 - 2016. 11. 30.: 통합규정 최종안 작성 - 2016. 12. 15.: 승인 신청(국토부) - 2016. 12. 19.~2017. 02. 27.: 승인 검사(국토부) - 2017. 02. 28.: 승인(시행) □ 지진대응 매뉴얼 보완 ○ 2016.12월: 통합매뉴얼 작성
⇩
종료예정일 (수정 후)	2017-05-31
변경 추진계획	□ 운전취급규정 개정(서울메트로와 통합규정에 반영) ○ 세부 추진계획 - 2016. 11. 30.: 통합규정 최종안 작성 - 2016. 12. 15.: 승인 신청(국토부) - 2016. 12. 19.~2017. 02. 27.: 승인 검사(국토부) ※ 통합사규 확정 시 반영예정 □ 지진대응 매뉴얼 보완 ○ 2016.12월: 통합매뉴얼 작성 ※ 통합매뉴얼 확정 시 반영예정
변경의견	통합사규 및 매뉴얼 확정, 시행 시 반영