가락동 도매시장 시설현대화사업 추진상황 보고

(2017. 8. 31. 현재)

□ ’17. 8. 31 현재 예산집행 실적

(단위 : 백만원)

구분		예산액 (A)	배정액	집행액 (B)		미집행
					B/A,%	잔액	이월액	불용액
합계		5,613	4,052	34	0.6	4,018	-	-
국비	소계	3,929	2,836	24	0.6	2,812	-	-
	보조	1,684	1,216	10	0.6	1,206	-	-
	융자	2,245	1,620	14	0.6	1,606	-	-
지방비		1,684	1,216	10	0.6	1,206	-	-

□  ’17. 8. 31 현재까지 추진상황(누계)

੦ 시설현대화사업 도매권역(2단계) 채소2동 후적지 정비

- 제1주차건물, 가공처리장 철거공사 : 공정률 100%

- 직판시장 철거공사 : 공정률 50%

੦ 시설현대화사업 도매권역(2단계) 채소2동 설계용역 추진 중

- 용역기간 : ′2017.3.20~′2018.1.20(3.20계약체결)

- 진도율 : 30%(계획설계 완료)

੦ 시설현대화사업 도매권역(2단계) 채소2동 교통영향평가 개선대책 수립용역

- 용역기간 : ′2017.3.17~′2018.1.17(3.17계약체결)

- 진도율 : 60%(교통분야 개선대책 검토 완료, 9월 심의 요청 예정)

੦ 시설현대화사업 도매단계 1공구(채소2동) 환경영향평가(변경협의)용역

- 용역기간 : ´17.04.18~´18.01.12(4.18계약체결)

- 진도율 : 40%(환경영향평가 협의자료 작성 중, 9월 변경협의 요청 예정)

□ 추진과정에서 나타난 문제점

੦ 도매권역 선도사업인 채소2동(2단계) 설계 2개월 지연 예상

- 채소2동 법인 및 중도매인 배치 협의 지연에 따른 설계기간 순연

□ 문제점 해소대책

੦ 지속적인 협의 및 이해 설득을 통해 잠정 합의안 도출(´17. 7월)

- 현재 점포 배치에 대한 세부사항 의견 수렴 중으로 향후 일정에 차질 없도록 설계기간 최대한 단축