2017년 가락시장 시설현대화사업 사업계획

지자체	소속	과	담 당		연락처
			직	성명
서울특별시 (농수산식품공사)	현대화사업단	건설계획팀	3급(부장) 3급(부장)	장성욱 염동희	(02) 3435-0551 3435-0554

1. 2017년 주요업무 사업계획

○ 도매권역 1공구(채소2동) 설계용역 : 100%

- 용역기간 : '17년 3월 ~ '18년 1월

- 용역내용 : 채소2동 계획․중간․실시설계 및 추가과업

○ 도매권역 1공구(채소2동) 건설사업관리용역 : 100%

- 용역기간 : '17년 3월 ~ '18년 1월

- 용역내용 : 설계감리 및 설계경제성검토(VE)

○ 도매권역 1공구(채소2동) 신축을 위한 후적지 정비 : 100%

- 철거공사 :제1주차건물, 가공처리장, 직판시장

2. 2017년 분기별 업무계획

구분		주요공사	목표공정률	세부공사 내역	비고
도매단계	1/4	Ο 채소2동 설계용역 Ο 채소2동 건설사업관리용역 Ο 후적지 철거공사	설계 0% 감리 0% 철거 40%	Ο 설계용역 계약체결 Ο 건설사업관리용역 계약체결(4차수) Ο 제1주차건물 철거 : 95%
	2/4	Ο 채소2동 설계용역 Ο 채소2동 건설사업관리용역 Ο 후적지 철거공사	설계 30% 감리 30% 철거 70%	Ο 기본설계 Ο 기본설계 감리 Ο 제1주차건물, 가공처리장 철거 : 100%
	3/4	Ο 채소2동 설계용역 Ο 채소2동 건설사업관리용역 Ο 후적지 철거공사	설계 70% 감리 70% 철거 100%	Ο 중간설계 Ο 중간설계 감리 및 설계경제성 검토 Ο 직판시장 철거 : 100%
	4/4	Ο 채소2동 설계용역 Ο 채소2동 건설사업관리용역 Ο 후적지 철거공사	설계 100% 감리 100% 철거 100%	Ο 실시설계 Ο 실시설계 감리 및 설계경제성 검토 Ο 채소2동 신축부지 확보 완료