- 설치대상 이동식배연기 납품 지연에 따른 -

미분무장치 설치 대상 이동식배연기 변경 계획

최근 2년 이내 도입되는 이동식배연기를 대상으로 장착을 추진하였던 미분무장치가 2017년도 납품이 예정되어 있는 송배풍기 43대의 장기 납품지연으로 연내 도입이 불투명하여 미분무장치 설치 대상을 변경하고자 함.   ※ 장착대상 : 86대(`16년 43대, `17년 43대)

□ 관련근거

ㅇ 재무과-32944(2017.7.3.)호「물품 계약체결 통보(송배풍기 등 13종 구매)」

ㅇ 안전지원과-20587(2017.9.27.)호「이동식배연기 결합 미분무장치

제작·장착 구매 계획 알림」

ㅇ 소방행정과-25295(2017.9.26.)호「계약체결 통보(이동식배연기 결

합용 미분무장치 제작·장착 구매)」

□ 계약내역

ㅇ 송배풍기 등 13종 구매

계약업체	계약금액	계약일자	납품기한	비고
㈜일광 (대표:조영숙)	금187,916,470원	2017.6.28.	2017.8.27.	現 납품지연 103일로 연내 계약이행 불투명

ㅇ 이동식배연기 결합 미분무장치 제작·장착 구매

계약업체	계약금액	계약일자	납품기한	비고
㈜나인테코 (대표:서정배)	금174,240,000원	2017.9.25.	2017.12.28.	송배풍기 납품지연으로 납기연장 50일

□ 설치대상 변경 내용

변 경 전	변 경 후
• 2016년 43대 : 10월중 나인테코 순회 설치 완료 • 2017년 43대 : 납품지연으로 설치 중단(보류)	• 2015년 이전 이동식송배풍기중 가장 최근 순서로 제작된 43대 선정하여 ㈜나인테코 소방서별 순회 미분무장치 장착 작업 실시

붙임 : 미분무장치 설치대상 이동식배연기 변경 내역 1부.  끝.

< 붙 임 >

미분무장치 설치대상 이동식배연기 변경 내역

□ 변경전 미분무장치 장착 대상

구분	계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동
계	86	3	5	4	4	2	5	4	3	4	4	5	4	3	3	7	3	2	3	4	4	4	2	1	3
`16년	43	2	1	2	3	1	5	4	2	3	1	1	3	3	2	3	2	1	2	-	2	-	-	-	-
`17년	43	1	4	2	1	1	-	-	1	1	3	4	1	-	1	4	1	1	1	4	2	4	2	1	3

※ 당초 `17년 납품될 신형 송배풍기에 설치하려 했으나 송배풍기 계약업체인 ㈜일광의 장기납품지연으로 연내 송배풍기 납품이 불투명하여 각 소방서가 기 보유중에 있는 송배풍기중 미분무장치가 설치되지 않은 장비를 대상으로 장착시키고자 함

□ 변경후 미분무장치 장착 대상(배정현황)

구분	계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동
계	86	7	2	2	3	4	5	4	3	4	2	3	4	4	5	7	3	2	5	2	3	2	4	3	3
`16년	43	2	1	2	3	1	5	4	2	3	1	1	3	3	2	3	2	1	2	-	2	-	-	-	-
`15년 이전	43	5	1	0	0	3	0	0	1	1	1	2	1	1	3	4	1	1	3	2	1	2	4	3	3

※ 2016년도 도입된 이동식배연기 43대에 대해서는 ㈜나인테코에서 소방서별 순회 납품(설치)이 완료된 상태임

붙임 : 소방서별 설치대상 안전센터 목록 1부.  끝.