문서번호	전시과-1907
결재일자	2017.5.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	전시과장	학예연구부장	서울역사박물관장
협 조	경영지원부장
	총무과장
	시설과장
	교육대외협력과장
	조사연구과장
	유물관리과장
	보존과학과장

2017~2018년 기획전시실

전시환경 개선공사 추진계획

2017. 5.

서울역사박물관

(전시과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	전시환경 진단 용역 시행
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017~2018년 기획전시실

전시환경 개선공사 추진계획

전시환경 진단용역(2016년) 시행 결과에 따라 개관이후 지속적인 사용으로 노후화된 기획전시실의 공간 및 전시시설을 업그레이드하고, 안정적이고 편안한 관람환경을 조성하기 위해 전시환경 개선공사를 시행하고자 함

Ⅰ		개요

❍ 사 업 명 : 서울역사박물관 기획전시실 전시환경 개선공사

❍ 사업내용 : 기획전시실 A·B실 바닥, 벽체, 천정, 조명 개선

❍ 사업기간 : 2017~2018년

❍ 사업예산 : 1,342백만원(2개년 연속사업)

(2017년 : 402백만원, 2018년 : 940백만원)

Ⅱ		전시환경 진단용역 결과

❍ 용역기간 : 2016.7.6. ~11.22

❍ 용역기관 : (사)한국문화공간건축학회(대표 임채진)

❍ 용역 주요결과

- 동선 및 조닝 : A·B실 연결출입문을 활용하여 다양한 전시공간의                         조합과 동선 구축, B실 창고공간 확보

- 바닥 : 러버타일 등 고기능성 소재로 교체

- 벽체 : 노후된 벽체교체, 상단 픽처레일 제거, 행잉 프레임 설치

- 천정 : 자연광 유입 차단, 심플하면서 조도조절이 가능한 조명 설치

- 조명 : 전면 LED로 교체, 전시장 전체가 제어가능한 조명환경 구축

- 진열장 : 다양한 연출환경, 오프닝시스템, 제어장치 등 기술도입

Ⅲ		추진방향

□ 2개년 연속사업으로 추진

❍ 기획전시실 전시일정을 고려하여 2개년 연속사업으로 순차적 시행

□ 실시설계는 협상에 의한 계약으로 추진

❍ 전문성과 기술성, 창의성 확보 필요

- 박물관 및 전시에 대한 이해와 시설의 전문성·기술성·창의성 등이 요구됨

- 구체적인 제안서 및 도면 등을 통해 설계업체를 협상·선정함으로써

가격경쟁 보다 설계의 질적인 내용을 우선시하여 평가할 필요가 있음

❍ 진단용역 결과를 반영하되 적절한 실시설계를 위해 전문가 자문회의 개최

□ 시설 운영 주체인 시설과와 협업

❍ 시설 운영 주체이고 기획전시실 B실 소방·배관공사(9~10월 예정)와          적절한 설계·공사의 감독을 위하여 협업

Ⅳ		세부계획

□ 실시설계

❍ 용 역 명 : 서울역사박물관 기획전시실 전시환경 개선공사 실시설계용역

❍ 용역내용 : 기본설계를 바탕으로 실시설계 시행

- 단계별 관련 전문가 자문회의 실시(2회)

※ 친환경 자재 사용, 흡음제 사용 등 검토

❍ 용역금액 : 45백만원

❍ 계약방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

❍ 대상업체 :「건축사법」에 의한 건축사사무소로 등록한 업체 또는 산업디자인 전문회사(환경 디자인 또는 종합디자인)로 신고를 필한 업체

□ 개선공사

❍ 공 사 명 : 서울역사박물관 기획전시실 전시환경 개선공사

❍ 공사내용 : 바닥, 벽체, 천정, 조명 등 시설공사

❍ 공사금액 : 1,295백만원

❍ 공사기간 : 2017~2018년

- 기획전시실 B실 : 2개월 소요, 기획전시실 A실 : 3개월 소요

❍ 계약방법 : 일반경쟁입찰

❍ 대상업체 :「건설산업기본법 시행령」에 의한 전문건설업종 중      실내건축공사업 면허 보유 업체

※ 전기 분야는「전기공사업법」에 따라 분리발주

Ⅴ		예산집행 계획

□ 소요 예산 : 1,342백만원

❍ 연차별 소요예산

- 2017년 : 402백만원(설계+B실 공사)

- 2018년 : 940백만원(A실 공사)

□ 집행계획

구 분	예 산 액 (백만원)	통계목	집행방법
○ 실시설계	45	시설비	일반경쟁입찰 (협상에 의한 계약)
○ 개선공사	1,295	시설비	일반경쟁입찰
○ 제안서평가위원회 및 자문회의 수당	2	사무관리비	일반지출
총 계	1,342

❍ 예산과목

- 역사와 문화의 복합공간 창조, 박물관 활성화, 박물관 기획전,

사무관리비·시설비

Ⅵ		협조사항

❍ 총무과 : 예산 및 행정지원

❍ 시설과 : 공사 시설전문분야별 감독

Ⅶ		향후계획

❍ 2017. 5월  실시설계용역 타당성 심사 의뢰(기술심사담당관)

❍ 2017. 6월  실시설계용역 제안서 평가 및 협상, 계약

❍ 2017. 7월  실시설계 시행

❍ 2017. 8월  계약심사 의뢰(재무과), 공사 발주 및 공고(재무과)

❍ 2017. 9월  공사 업체 선정 및 계약

❍ 2017.9 ~ 10.  개선공사 시행(기획전시실 B실)

❍ 2018.3 ~ 5.  개선공사 시행(기획전시실 A실)

붙임 : 기획전시실 전시환경진단보고서 요약 1부.  끝.