등록번호

토목과-958

★주무관

토목팀장

토목과장

안전건설교통국장

부구청장

등록일자

2018.1.23.

결재일자

2018.1.23.

공개구분

대시민공개

협  조

도로조명팀장

도로관리팀장

보도관리팀장

재무과장 직무대리

도로굴착팀장

계약팀장

2018년도 도로건설공사 조기발주 시행계획

서 대 문 구

토목과

2018년도 도로건설공사 조기발주 시행계획

2018년도 구정업무보고 및 서대문구의회 승인후 본예산에 편성된 도로분야 건설공사에 대하여 조기발주를 시행함으로써 예산집행의 효율성 제고와 지역경제 활성화에 기여하고자 함

Ⅰ

공사대상

□ 총  27건 : 7,609,948천원

(단위:천원)

구 분	공 사		용 역		비 고
	건수	금액	건수	금액
계	23	7,348,758	4	261,190	주민참여예산포함

Ⅱ

추진방향

□ 대상사업 1/4분기 조기발주 시행(1,2월중 85% 이상)

□ 계약공사는 3월중 선금 집행 추진

□ 발주공사는『경쟁계약』및『전자공개 수의계약』원칙으로 추진

□ 주민참여감독관제 적극시행

□ 주민생활과 직결되는 주민참여예산 공사분야 우선시행

Ⅲ

추진개요

□ 조기발주 및 집행 대상 : 일반회계(시비포함), 굴착기금공사

□ 조기발주 추진계획

구분	2018.1월 발주	2018.2월 발주	2018.3월 발주	2018.4월 이후	비고
건수(누계비율)	15(55%)	8(85%)	1(88%)	3(100%)	2017년도 공사발주(4건포함)

❍ 홍제1동 315-30~167-24간 도로개설공사는 보상완료후 발주(1건)

❍ 도로열선 설치공사는 하반기 시행(2건)

□ 공사비 집행계획

(단위:천원)

구분	2018. 3월 집행 (선금)	2018. 6월 집행 (기성금)	2018. 12월 집행 (준공금)	비고
금액(누계비율)	2,282,984(30%)	4,565,968(60%)	6,848,953(90%)	낙찰차액10%

Ⅳ

세부 추진방안

□ 조기발주 및 공사비집행을 위한 개선제도 활용

❍ 일반입찰을 원칙으로 하되 부득이한 경우 수의계약 활용

❍ 선금 지급요건 완화 및 지급범위 확대

- 계약기간 60일 미만도 선금 지급(공정 등을 감안하여 지급검토)

□ 공사시행을 위한 사전절차 이행 등 준비 철저

❍ 2018년도 확정예산 배정(e-호조)

❍ 도로굴착 통제기간 이후 즉시 사업에 착공할 수 있도록 사전준비 철저

□ 집행계획에 따른 체계적 실적관리

❍ 조기집행 대상공사 세분화 및 담당제 관리

- 공사별 담당자 지정, 사업진행 상황 및 자금집행률 관리

- 부진사유 파악 및 향후 대책 마련

Ⅴ

행정사항

□ 세부사업별 e-호조 입력

❍ e-호조 입력작업(세부사업별 담당자명, 내선번호 기재)

첨부 : 2018년도 토목과 발주계획사업 현황 1부. 끝.