주간 진도보고서
문서번호	WR180723	작성자	마성진	작성일	2018/07/23	버 전	1.0

프로젝트명		2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 용역
프로젝트 책임자	마성진		공정	사업관리	DB구축	보안처리	정확도개선	S/W개발	전체
			계획	0.78/16.59	0.00/14.79	0.01/20.23	0.02/44.89	0.00/3.49	0.81/100
			실적	0.78/16.59	0.00/14.79	0.01/20.23	0.02/44.89	0.00/3.49	0.81/100

주요 내용	1. 과거년도 항공사진 기무사 보안처리 2. 정확도 개선 항공사진 영상 분석
업무구분	금 주 실 적 (2018.07.16 ~ 2018.07.20)	차 주 계 획 (2018.07.23 ~ 2018.07.27)
사업관리	6주차 주간보고 2. 항공사진 DB 정확도 개선(작업범위 변경) - 변경 요청승인서, 변경관리대장 작성 및 제출	7주차 주간보고 1982년 1차분 시스템 반영 TEST 일정 협의
D B 구 축
보안처리	과거년도 항공사진 기무사 보안처리 - 75회차(2006년1차) : 33% 완료 - 77회차(2007년) : 66% 완료 - 83회차(2013년) : 22% 완료	1. 과거년도 항공사진 기무사 보안처리 - 75회차(2006년1차) : 7월 31일 완료 예정 - 77회차(2007년) : 7월 27일 완료 예정 - 83회차(2013년) : 8월 9일 완료 예정 2. 기무사 보안처리 완료본 내부 검수 - 육안검수 진행
정확도개선	변경과업 범위 항공사진 영상 인수 (`72년 1차, `81년 2차, `82년 1차, `88년 2차, `89년 1차) 2.. 1982년 1차 항공사진 영상 분석 및 확인	사진기준점 측량을 활용한 정확도 개선 - 1982년 1차 작업 착수
S/W 개 발
이슈사항	정확도 개선 사업 1982년 1차 41코스 26번 사진 오류 (재스캔 필요) - 첨부 1.