주간 진도보고서
문서번호	WR180827	작성자	마성진	작성일	2018/08/27	버 전	1.0

프로젝트명		2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 용역
프로젝트 책임자	마성진		공정	사업관리	DB구축	보안처리	정확도개선	S/W개발	전체
			계획	7.06/16.59	0.70/14.79	6.39/20.23	10.44/44.89	2.74/3.49	27.34/100
			실적	7.06/16.59	0.70/14.79	6.39/20.23	10.44/44.89	2.74/3.49	27.34/100

주요 내용	1. 2018년도 촬영 항공사진 영상 자료분석 2. 정확도 개선 사진기준점측량(’81년 2차 진행중) 3. 항공사진 발전방향 연구 4. 항공사진 서비스 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 제작
업무구분	이 번 주 실 적 (2018.08.20 ~ 2018.08.24.)	다 음 주 계 획 (2018.08.27 ~ 2018.08.31.)
사업관리	1. 항공사진 발전방향 연구 착수 협의 - 연구보고서 목차(안) 구성 협의 2. 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 시스템 반영 일정 협의 - TEST 영상 제작 직후 반영 3. 디지털 국토 엑스포 홍보지원 - 판넬, 리플렛 제작	1. 항공사진 발전방향 연구 착수 협의 - 관련 내용별 현황 분석 2. 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 시스템 반영 일정 협의 3. 디지털 국토 엑스포 홍보지원 4. 일자리 사업 착수 준비
D B 구 축	1. 2018년도 촬영 항공사진 확인 - 파일이상 유무 및 파일 매수 확인 : 총 1929매	1. 2018년 항공사진 촬영 영상 자료분석
위장처리	과거년도 항공사진 기무사 보안처리 - 전체 일정: 검수포함 10월 12일 완료 예정 76회차(2006년2차) : 62.5% 진행중 80회차(2010년) : 69.2% 진행중 82회차(2012년) : 60% 진행중 - 기무사 보안처리 완료본 내부 검수 및 보완 78회차(2008년), 83회차(2013년)	1.과거년도 항공사진 기무사 보안처리 - 76회차(2006년2차) : 8월 31일 완료 예정 - 80회차(2010년) : 8월 31일 완료 예정 - 82회차(2012년) : 9월 3일 완료 예정 2. 기무사 보안처리 완료본 내부 검수 - 육안검수 진행
정확도개선	1. 1981년 2차 사진기준점측량 90%진행 2. 1982년 1차 - 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 제작	1. 1981년 2차 사진기준점측량 완료 2. 1982년 1차 - 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 확인 및 인계 3. 1988년 2차 항공사진 영상 분석 및 확인
S/W 개 발	1. 항공사진 업무용서비스 문자알림 - 알림수신 설정 (완료) - 항공사진 신청시 신청자 문자발송 (완료)	1. 항공사진 업무용서비스 문자알림 기능 개발 항공사진 신청 시 담당자 문자발송 항공사진 처리완료 시 문자 발송 2. 테스트 진행
이슈사항