문서번호	도로관리과-884
결재일자	2018.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로조명팀장	도로관리과장
협조

2018년 가로등 무선원격 감시제어시스템 구축계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.1.

안전총괄본부

(도로관리과)

2018년 가로등 무선원격 감시제어시스템 구축계획

`18년 가로등 전선로 누전(漏電), 부점등(不點燈) 발생 등 이상 여부를 실시간 감시․제어하기 위한 시스템을 구축함으로써 도로조명시설 안전관리 강화와 안전한 도로 이용 환경을 조성코자 함.

□ 추진근거

○ `01년 07월 발생한 가로등 감전사고에 대한 대책(부시장 방침 `02.2.10.)

○ 가로등 무선원격 감시제어시스템 구축계획(본부장 방침 `17.8.11.)

□ 사업현황

○ 위  치 : 7개 자치구(중구, 성북, 서대문, 구로, 영등포, 동작, 관악)

○ 규  모 : 시도상 분전함 433개소

○ 사업비 : 950,000천원

- 분전함 감시기 : 770,000천원 (433개소 × 1,800천원)

- 관제서버 구축비(7개소) : 170,000천원

- 기타 1식 : 10,000천원

□ 그간 추진실적 및 향후계획

○ 추진실적

-  설치기간 및 사업비 : 2004 ~ 2015 / 105억원

-  설치현황

구 분	시스템 현황 (개소)			비 고 (설치비율)
	계	설치	미설치
계	7,226	2,879	4,347	40%
시 도	4,666	2,528	2,138
구 도	2,560	351	2,209

※ 100% 구축 자치구(시·구도) : 노원구, 양천구, 강남구

○ 향후계획

- 시도상 연도별 설치계획

구 분	계	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년	21년	비 고
분전함(면)	2,138	105	433	470	530	600	‘21년 시 통합 모니터링 시스템 구축 포함
사업비(억)	56	2.5	9.5	12	13	19

※ `17년 구축 시도 100% 완료 : 도봉구 (시도 105면 / 사업비 250백만원)

□ 추진절차

설 계 (자치구)		예산(재)배정 (도로관리과)		공사시행 및 준공 (자치구)

※ 상반기 조기 사업추진을 통한 집행유도, 상반기 발주율 100% 달성

□ 중점 추진사항

○ 가로등 점․소등 및 모니터링

- 남산 가로등 관제센터 송출 신호를 받아 가로등 점․소등 우선 원칙으로 시스템 구축

- 향후 시청(남산통제소)에서 구청별 가로등 가동 현황을 통합 모니터링 할 수있도록 확장성 고려

○ 가로등 원격 감시․제어

-  가로등 분전함 원격감시 원칙 (가로등주 개별 감시 지양)

-  이상 발생시(부점등, 누전, 정전 등) 고장감시 및 SMS 문자메세지 통보

-  각종 고장내역 및 처리결과를 서버에 저장 및 보고 내용 인쇄물 출력 가능

-  선로의 고장 및 누전 확인

○ 향후 스마트 조명제어(디밍)과 연동 할수 있도록 통신 연결 확장성 보유

□ 예산 재배정 및 집행 계획

(단위 : 백만원)
예산액 (사업내역별)		계	1분기			2분기			3분기			4분기
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	배정	950			950
	집행						200	370	100	100	100	80
가로등 무선원격 감시제어시스템 구축	배정	950			950
	집행	950					200	370	100	100	100	80

※ 상반기(6월)까지 60%(570백만원) 예산 조기 집행

□ 추진일정

○ 가로등 분전함 현장 확인 및 설계 : `18.2. ~ `18.3.

○ 조달청 계약의뢰 및 계약 : `18.3. ~ `18.4.

○ 공사시행 (계약 선급금 지급) : `18.5. ~ `18.9.

○ 시스템 시운전 및 준공 : `18.10. ~ `18.11.

붙임 : `18년 가로등 무선원격 감시제어시스템 예산배정 내역 1부.  끝.