문서번호	교통운영과-316
결재일자	2018.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
협조

「2018년 교통안전시설(노면표시 등) 설치공사」

건설사업관리(감리) 용역 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 01.

도시교통본부

(교통운영과)

「2018년 교통안전시설(노면표시 등) 설치공사」

건설사업관리(감리) 용역 추진계획

2018년도 시행하는 교통안전시설(노면표시 등) 유지관리공사의 원활한 사업추진과 교통환경 개선에 만전을 기하고자 아래와 같이 건설사업관리(감리) 용역 추진계획을 보고함.

추진근거

교통안전시설(노면표시, 표지병, 안전표지)설치 유지관리

- 도로교통법 제3조(신호기 등의 설치 및 관리)

- 도로교통법 제4조(교통안전시설의 종류 등)

교통안전시설 설치․관리 협약에 의한 교통안전시설 설치 유지관리

사업개요

사 업 명 : 2018년 교통안전시설(노면표시 등) 설치공사 건설사업

관리(감리) 용역(6개 권역)

- 동부권역, 서부권역, 남부권역, 북부권역, 성동권역, 강서권역

사업범위 : 서울특별시 전역(도로사업소 6개, 자치구 25개, 공단 1개)

사업내용 : 2018년 도로사업소 및 자치구에서 발주되는 교통안전시설 (노면표시, 도로표지병, 안전표지) 유지관리공사 건설사업관리

사업예산 : 총 792,175천원

- 노면표시 : 777,222천원

- 안전표지 :   14,953천원

투입인원 : 총 12명(권역별 2명 × 6개 권역)

사업기간 : 착수일로부터 2018.12. 21(금)까지

사업 추진계획

교통안전시설 유지관리공사의 부실시공을 예방하기 위하여 서울시를 6개 도로사업소 권역으로 나누어 건설사업관리(감리) 용역을 발주하여 감리업무를 강화하고자 함.

권역별 사업범위 및 개략 용역 설계비

- 계략 용역 설계비 : 790,374천원

권역별	사업소	자 치 구	개략 설계비
동부권역	동부도로	강남구, 송파구, 강동구	131,729,000원
서부권역	서부도로	은평구, 서대문구, 중구, 용산구, 마포구	131,729,000원
남부권역	남부도로	동작구, 금천구, 관악구, 서초구	131,729,000원
북부권역	북부도로	도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 종로구	131,729,000원
성동권역	성동도로	중랑구, 동대문구, 성동구, 광진구	131,729,000원
강서권역	강서도로	강서구, 양천구, 영등포구, 구로구	131,729,000원

계약방법 : 공개(제한) 경쟁입찰

- 관련법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조, 같은법 시행령 제13조, 제20조 및 같은법 시행규칙 제25조

- 사    유 : 교통안전시설 유지관리공사는 교통의 안전과 소통에 필요한정보를 제공하는 특수공사로서, 건설사업관리 업무에 참여하는 기술자의 기동성이 요구되므로 신속한 대응조치 능력을 갖춘 업체를 선정하여 사업목적을 달성 하고자 함

입찰 참가자격

- 건설기술진흥법 제26조 및 같은법 시행령 제44조 ①항2호의 규정의 의한 건설사업관리 분야로 등록을 필하고 과업을 수행 할 수 있는 교통기술자를 보유한 업체

- 제한기준 : 영업소재지가 서울특별시인 업체

예산과목(교통사업특별회계)

- 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물관리, 노면표시도색및제거, 시설비및부대비, 감리비(202-401-02)

- 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물관리, 교통안전표지설치및유지보수, 시설비및부대비, 감리비(202-401-02)

향후일정

2018. 01. : 기술용역 타당성심사 요청

2018. 02. : 감리용역 발주

2018. 03. : 감리용역 계약 및 착수

2018. 03. ~ 12. : 건설사업관리(감리) 용역 과업수행

붙 임 : 용역 발주 설계 내역서(6개 권역) 각 1부.  끝.