문서번호	배수과-10423
결재일자	2017.12.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	배수과장		급수부장		상수도사업본부부본부장
협 조
	주무관

단수없는 안정적 급수공급을 위한 ’18년 무단수 급수체계 구축사업 추진계획

2017. 12.

상수도사업본부(급수부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

단수없는 안정적 급수공급을 위한

’18년 무단수 급수체계 구축사업 추진계획

누수, 수질사고 등 돌발 사고 대비 블록시스템 구축, 정수장간 공급체계 구축 및 주요관로 이중화를 통하여 단수없는 안정적인 급수 공급체계 구축

Ⅰ. 추진개요

□ 관련근거

○ ’15.5.11 : 2030 서울특별시 수도정비기본계획 승인(환경부)

- 상수관망 최적화, 무단수 공급체계 구축, 지능형 상수관망 체계 도입

○ ’16.12.24 : “무단수 급수체계 구축 타당성 조사용역” 완료

	용역 검토 결과
- 경제성 분석결과 직접편익 및 사회적펵익 고려시 B/C=1.2로 사업실시 경제성이 있으며 ’18～’30년까지 총 2,664억원 투자필요

○ ’17.5.18 : 무단수 급수체계 구축 사업 추진 계획 수립

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 무단수 급수체계 구축 사업

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2030년(13년간)

○ 규    모 : 중블록 정비 145개 블록, 관망정비 130.8km, 복선화 및 비상관로 연결(By-pass) 39km, 전동밸브 144개소

○ 총사업비 : 2,664억원

계	1단계						2단계	3단계
	소계	’18	’19	’20	’21	’22	’23~’27	’28~’30
2,664	915	110	130	150	225	300	1,365	384

Ⅱ. 2018년 사업계획

□ 2018년 추진계획

○ 정비목표 : 중블록 정비 14블록

- 순환배관 부설 5.2㎞, 비상관로(By-pass) 연결 0.1㎞, 유량계 12개소, 전동밸브 4개소

○ 사 업 비 : 11,000백만원

○ 사업기간 : ’18. 1 ~ ’18. 12.

○ 사업개요

구 분		정비블록	사업개요	사업비(백만원)
계		14개 블록	26개소, 5.3㎞	11,000
중블록 정비	순환배관 부설	5개 블록	5개소, 5.2㎞	6,900
	유량계설치	5개 블록	12개소	1,310
비상관로 연결(By-pass)		4개 블록	5개소, 0.1㎞	1,430
전동밸브 설치		-	4개소	500
감리비 등 감리비 352백만원, 시설부대비 10백만원, 예비비 500백만원		-	-	860

○ 사업소별 사업 현황

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	본부
중블록	14	1	2	2	2	3	2	2
예산액 (백만원)	10,500	1,930	600	320	1,125	4,370	643	650	862

※ 전동밸브 4개소, 5억원은 사업소별 별도 편성

□ 세부추진 내용

○ 중블록 정비 계획 : 14개 블록

- 순환배관 부설 D=300~700mm, L=5.2㎞ (5개소)

※ 힐튼호텔~남대문경찰서(남산2블록) D=700㎜, L=0.8㎞ 등

- 유량계 설치 12개소(300 ~1350㎜)

계	300㎜	500㎜	600㎜	700㎜	800㎜	900㎜	1000㎜	1200㎜	1350㎜
12	1	3	1	2	1	1	1	1	1

○ 비상관로 연결

- By-pass 연결 : 5개소, L=0.1㎞

개소	600㎜	700㎜	1000㎜	1200㎜	1650㎜
5	1	1	1	1	1

○ 전동밸브 설치 (지능형 관망시스템 구축 사업)

- 설치개소 : 4개소 (사업비 : 5억원)

- 선정기준

‣ 600mm이상 20년 이상된 노후 밸브

‣ 자주 사용하는 제수밸브

‣ 배전반 설치 및 전기시설 설치가 용이한 장소

□ 추진방법

○ 사업소별 사업 시행 물량 선정

- 무단수 급수체계 구축사업 타당성 조사용역 시설계획도면 참조

○ 사업대상의 적정성, 사업의 연계성 등 본부 심사

○ 사업소에서 설계, 발주, 공사 시행 (서울시설공단 감독)

○ 본부에서 예산, 공정관리, 교육 등 사업관리 시행하고, 사업소에서 구축된 중블록 관리

□ 추진일정

○ 현장조사 및 설계 : 2018. 1월 ~ 2월

※ 교통계획서 작성 및 시공도면 검토 : 1월말

○ 계약심사 및 발주 : 2018. 2월 ~ 3월

○ 계약 및 착공 : 2018. 3월 ~ 4월

Ⅲ. 향후 계획

○ 2018년도 사업소별 세부추진계획 수립 시행

- 해당 중블록이 무단수 급수체계가 구축될 수 있도록 유량계 설치 등 조치

○ 완료된 중블록에 대해서는 상수도 GIS시스템에 입력 관리

붙임 : ’18년 중블록별 무단수 급수체계 세부 계획 1부.  끝.