‘18년 인도 10계명 시설물별 추진계획

	목 차
1. ‘18년 「인도10계명」추진계획(총괄) 1 2. 부서별 추진계획서 2

안전총괄본부

(보도환경개선과)

2018년 인도 10계명 추진계획(총괄)

연번	부서별	대상 시설물		2018년 정비 계획			비 고 (수립여부)
				정비 계획 (개소수)		소요예산 (백만원)
1	버스정책과	버스 승차대 정비		19			25구청
				3			사대문안
		버스 표지판 정비		19			25구청
				3			사대문안
2	택시물류과	택시승차대 물청소
		택시승차대 보수 및 정비
3	보행자전거과	자전거 거치대
4	교통운영과	볼라도(부적합)					사대문안
5	보도환경개선과	사설안내표지판	무허가철거
		영업시설	수시정비
6	도로관리과	분전함	등주일체형				사대문안
7	조경과	가로수	뿌리융기				사대문안
			보호판파손				사대문안
			공분정비				사대문안
			유효보도폭미확보				사대문안
			띠녹지 경계턱				사대문안
8	재난대응과	소화전	이설				사대문안
9	서울지방 우정청	우체통	철거				사대문안
10	케이티링커스	공중전화부스	철거				사대문안
11	한전서울지역본부	한전지상기기	이전,철거				사대문안
			미관개선				사대문안
	한전남서울지역본부		이전철거
			미관개선
12	서울교통공사	지하철환기구	턱 낮춤 등				사대문안

1	가로변정류소 이용환경 개선사업

< 버스정책과 >

가로변 무장애 정류소 확대 설치로 교통약자 이동권 확보 및 대중교통 이용 시민의 편의를 도모하고자 함.

□ 사업 개요

○ 사업명 : 가로변정류소 이용환경 개선사업

○ 사업기간 : ’15. 1월 ~ ’18. 6월

○ 사업예산 : 5,840백만원 (’18년 880백만원)

○ 사업대상 : 서울시 가로변 시내버스정류소 116개소

- 디자인승차대 : 7개소 / 무장애정류소 : 109개소

○ 연차별 설치계획                                    (단위 : 개소)

구 분	합계	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년
디자인 승차대	7 (7억원)	-	2 (2억원)	5 (5억원)	-	-
무장애 정류소	109 (51.4억원)	-	17 (7.4억원)	40 (20억원)	30 (15억원)	22 (9억원)

□ 추진 경과

○ ’14. 12. : 가로변정류소 개선사업 민자유치사업 완료

- 승차대 2,285개소, 버스표지판 3,427개소 등 편의시설 설치

○ ’15.01 : 가로변 정류소 이용환경 개선사업 방침

- 매력적인 정류소 구축사업 : 디자인 55개소, 무장애 127개소

○ ‘15.11~’16.4 : ’15년 가로변 정류소 개선공사 완료

- 디자인 승차대 2개소, 버스 승차대 및 표지판 17개소 설치

○ ‘16.3~’17.10 : 16년 가로변 정류소 개선공사 완료

- 디자인 승차대 5개소, 버스 승차대 및 표지판 40개소 설치

○ ‘17.9~’18.6 : 17년 가로변 정류소 개선공사 추진(사고이월)

- 버스 승차대 30개소 설치공사 추진 중 (2018년 22개소 설계중)

작 성 자	버스정책과장 :김정윤☎2133-2260 정류소관리팀장 : 이희신☎2291 담당 : 이오수☎2296

□ 2017년 정비 계획 및 실적

○ 정비 계획 및 실적                             (2017.12.31. 기준)

구 분		정비 계획		정비 실적		비고
시설명	정비내용	수 량	편성예산 (백만원)	수 량	집행예산 (백만원)
	소 계	60	1,500	90	2,500
버스정류소	승차대	25	1,167	37	2,015	사대문밖
		5	233	8	350	사대문안
	표지판	25	84	37	111	사대문밖
		5	16	8	24	사대문안

○ 주요정비 전후 전경

정비 전		정비 후

□ 정비 계획(2017~2019)

○ 정비 계획

정비 대상		정비 계획 (2017년도)		정비 계획 (2018년도)		정비 계획 (2019년도)		비고
시설물	정비내용	수 량	편성예산 (백만원)	수 량	편성예산 (백만원)	수 량	편성예산 (백만원)
버스 정류소	소 계	60	1,500	44	880	-	-
	승차대	30	1,400	22	807	-	-
	표지판	30	100	22	73	-	-

□ 현안 사항

○ 2017년 실적 부진사유

- 가로변 정류소 개선공사 구간이 서울전역에 분포되어 행정절차 및 공정관리에 어려움이 있음, 조기 공사추진 개시로 적극 추진

□ 향후 계획

○ ’17년 목표 수량(승차대 개선 30개소, 표지판 정비 30개소) 정비: ‘17년도 공사를 위한 계약체결을 완료하고 ’18.6까지 준공예정

○ ’18년 목표(승차대 개선 22개소, 표지판 정비 22개소) 정비 : ’18. 12월까지 공사를 완료할 예정