전통사찰 보수 정비 사업 집행 실적

(서울특별시)

2018. 6. 25 기준

(단위 : 백만원)

사업 연도	사찰명 (ㅇㅇ시)	사업 내용	국비 수령액	집행액	집행률 (%)	추진경과 및 향후일정	부진 사유 (집행부진 해소대책 포함)	비 고
2018	도선사 (강북구)	대웅전 단청보수	160	160	100	- 2018. 7월중 완료보고 및 수리보고서 제출 예정	- 정상추진 중
2018	법성사 (강서구)	심검당 보수	140	-	-	- 추진경과 : 설계 중 - 향후일정 : 설계완료 후 착공 예정	- 설계 지연으로 공사 지연 - 3분기내 설계완료 및 착공 예정
2018	약사사 (강서구)	석축 보수	70	-	-	- 추진경과 : 설계 준공(6월) - 향후일정 : 문화재 현상변경 심의 후 착공(8월) 예정	- 설계 지연 및 문화재 현상변경 심의로 인한 공사 지연 - 3분기내 착공 예정
2018	학도암 (노원구)	대웅전 및 삼성각 단청보수	176	-	-	- 설계진행중(‘18.7~8) - 관계부서(기관) 협의(‘18.8) - 공사(‘18.9~11)	- 준공에 맞춰 적기 집행
2018	천축사 (도봉구)	축대 보수	98	49	50	- 착공 : 2018.6.1. - 준공 : 2018.9.1.(예정)	- 정상추진 중
2018	연화사 (동대문구)	극락전 정비	170	-	-	- 사업계획 변경신청 중	- 사찰측 사업계획 변경 지연
2018	달마사 (동작구)	일주문 보수정비	80	40	50	- 보조금 교부신청 : 2018.5.21 - 보조금 교부(50%) : 2018.6.27 - 준공 및 잔여보조금 교부(50%) : 2018.10월 예정	- 정상추진 중
2018	봉국사 (성북구)	일주문 보수정비	100	-	-	- 실시설계용역 준비 중 - 2018.7. 실시설계 - 2018.8. 착공 - 2018.12. 공사완료	- 사찰 행사로 착수 지연 (하반기 조기 착수토록 독려)
2017	조계사 (종로구)	대웅전 지붕기와 보수	49.6	25	50	- 착공(5.1) 및 공사완료(6.25) - 정산 및 2차 보조금 지급예정 : 7월중	- 정상추진 중	명시이월
2017	승가사 (종로구)	요사채 해체 및 개축	100	55	55	- 착공(5.4.) - 준공 및 정산예정 : 9월중	- 하안거 기간(5.29~8.25) 공사중지	명시이월
2017	봉은사 (강남구)	봉은사 매화당 개축	200	160	80	- 준공 후 정산 및 결과보고 추진	- 문화재 현상변경 심의에 시일이 소요되었음 - 2018. 5월 조건부 가결됨에 따라 정상추진 중임	사고이월

전통사찰 방재시스템 구축 사업 집행 실적

(서울특별시)

2018. 6. 25 기준

(단위 : 백만원)

사업 연도	사찰명 (ㅇㅇ시)	사업 내용	국비 수령액	집행액	집행률 (%)	추진경과 및 향후일정	부진 사유 (집행부진 해소대책 포함)	비 고
2018	지장사 (동작구)	전기화재 예측시스템 및 지능형 통합관제시스템 구축	117	-	-	- 교부신청서 및 자부담 확보통장 제출요청 : 2018.5.9.	- 교부신청서 및 자부담 확보통장 미제출 ⇒ 재요구 예정(7월중)
2018	본원정사 (강북구)	전기화재 예측시스템 및 지능형 통합관제시스템 구축	105	-	-	- 2018.04.20. 전통사찰 방재시스템 보조금 교부 - 2018.04.26. 지원계획 수립 - 2018.04.27. CCTV 설치 행정예고	- 하반기 공사예정
2018	문수사 (종로구)	전기화재 예측시스템 및 지능형 통합관제시스템 구축	85	80	94	- 사업 완료(2018.6.5.)	- 정상추진 중
2018	용덕사 (강북구)	전기화재 예측시스템 및 지능형 통합관제시스템 구축	53	-	-	- 2018.04.20. 전통사찰 방재시스템 보조금 교부 - 2018.04.26. 지원계획 수립 - 2018.04.27. CCTV 설치 행정예고	- 하반기 공사예정
2018	약수사 (관악구)	전기화재 예측시스템 및 지능형 통합관제시스템 구축	68			- 설계도서 검토중 - 7월내 보조금 교부 예정	- 설계 지연으로 공사 지연 - 3분기내 착공 예정