노후 전동밸브 구동장치 교체

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			□ 연례반복, ☑ 2018. 1 ~ 2018. 9
사업위치			강서수도사업소 관내
총사업비			총 63,000천원
사업내용			내구연한 초과로 노후되어 잦은 고장 및 성능이 저하된 배수지 유출입 밸브 등 전동밸브 구동장치를 교체하여 긴급상황 발생시 신속한 개폐로 사고를 예방하고 적정 수위조절로 안정적인 급수운영에 기여
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			강서수도사업소
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의	정보화심사		공유재산
□	□				□		□	□		□	□		□
경상	투자
□	☑
□ 사업 담당자
실․국		부 서 명				과 장			기전팀장			주 무 관
강서수도사업소		시설관리과				고 신 석			문 용 욱			정 진 호
						(02-3146-3990)			(02-3146-4015)			(02-3146-4016)

2		예산(안)설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2016년 본예산	2017 본예산 (A)	2018예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	135,000	90,000	63,000	-27,000	-30.0%
기계장치	135,000	90,000	63,000	-27,000	-30.0%

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2017년 본예산	2018년 예산(안)	증․감사유
기계장치 (시설비)	○ 시설비 = 90,000천원 - 전동구동장치 제작구매 8,000천원×10대=80,000천원 - 전동구동장치 철거․설치 1,000천원×10대=10,000천원	○ 시설비 = 63,000천원 - 전동구동장치 제작구매 8,000천원×7대=56,000천원 - 전동구동장치 철거․설치 1,000천원×7대=7,000천원	내용연수 경과

3		사업설명

□  사업목적

○  노후 전동구동장치를 개량하여 배수지 수위 조절기능 향상

○  긴급 상황 발생시 신속한 밸브 개폐로 안전사고 예방

□  사업근거

○ 상수도사업본부장 방침 제81호(2009.02.09)

○ 가압장 운영개선 종합대책[본부 시설관리과-2210호(2013.05.02)]

□  사업내용

○  사업기간 : 2018. 1. 1 ~ 9.30

○  사업내용

- 전동밸브 구동장치 제작구매 7대

- 전동밸브 구동장치 철거 및 설치 1식

○‘18년도 소요예산(안) : 63백만원

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 기본계획 수립 ⇨ 설계 ⇨ 계약심사 ⇨ 발주 ⇨ 공사시행 ⇨ 준공

⃞  2018년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 내구연한이 초과된 노후 전동구동장치를 순차적으로 교체

- 항상 전동구동장치가 정상 작동할 수 있도록 유지관리

○  추진일정(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
기본계획 수립	’18. 1 ~ 2월
구매 발주	’18. 3 ~ 4월
납품 및 설치	’18. 5 ~ 6월	63,000	노후 전동구동장치 교체완료

4		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2014년도	‧ 해당없음
2015년도	‧ 해당없음
2016년도	‧ 15대 교체

□  향후 기대효과

○  노후 전동밸브 구동장치를 개량하여 배수지 수위 조절기능 향상

○  긴급상황 발생시 신속한 밸브 개폐로 사고예방

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-
2016	135	-	-	135	114	-	21

6		외부기관 주요 평가

□  해당없음

참 고 자 료

□  전동구동장치 교체대상 : 총 7대

배수지명	용도별	수량	구경	밸브종류	구동기 설치년도	비 고
우장산 배수지	소 계	5
	메인유입	1	1200	버터플라이	2005	3.7kW
	메인유출	1	1350	버터플라이	2005	3.7kW
	1지(유입)	1	800	버터플라이	2005	2.2kW
	2지(유입)	1	800	버터플라이	2005	2.2kW
	3지(유입)	1	800	버터플라이	2005	2.2kW
화 곡 가압장	소 계	2
	1지(유출)	1	150	게이트밸브	2002	1.5kW
	2지(유출)	1	150	게이트밸브	2002	1.5kW

노후 가압펌프 개량

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			□ 연례반복, ☑ 2018.1 ~ 2018. 9
사업위치			온수가압장(구로구 궁동 230-10) 외 1개소
총사업비			총 130,000천원
사업내용			내구연한 초과로 효율이 저하된 상수도 급수용 가압펌프를 고효율 펌프로 적기에 교체하여 에너지 사용량 절감으로 온실가스 감축
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			강서수도사업소
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의	정보화심사		공유재산
□	□				□		□	□		□	□		□
경상	투자
□	☑
□ 사업 담당자
실․국		부 서 명				과 장			기전팀장			주 무 관
강서수도사업소		시설관리과				고 신 석			문 용 욱			정 진 호
						(02-3146-3990)			(02-3146-4015)			(02-3146-4016)

2		예산(안)설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2016년 본예산	2017 본예산 (A)	2018예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	80,000	120,000	130,000	10,000	8.3%
기계장치	80,000	120,000	130,000	10,000	8.3%

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2017년 예산	2018년 예산(안)	증․감사유
기계장치 (시설비)	○ 시설비 = 120,000천원 - 가압펌프(15HP, 10HP) 20,000천원×2대=40,000천원 15,000천원×2대=30,000천원 - 배관 부대공사 25,000천원×2개소=50,000천원	○ 시설비 = 130,000천원 - 가압펌프(20HP, 10HP) 25,000천원×2대=50,000천원 15,000천원×2대=30,000천원 - 배관 부대공사 25,000천원×2개소=50,000천원	내구연한 초과

3		사업설명

□  사업목적

○  내구연한 초과로 효율이 저하된 상수도 급수용 가압펌프를 고효율 펌프로 적기에 교체하여 안정적인 급수체계 구축

□  사업근거

○ 가압장 시설 종합 정비계획 : 상수도사업본부장방침 시설관리과-325호(2012.1.20.)

○ 가압장 운영개선 종합대책[본부 시설관리과-2210호(2013.5.2.)]

□  사업내용

○  사업기간 : 2018. 1. 1 ~ 9.30

○  사업내용 : 온수가압장외 1개소 모터펌프 철거 및 제작설치 4대

○‘18년도 소요예산(안) : 130백만원

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 기본계획 수립 ⇨ 설계 ⇨ 계약심사 ⇨ 발주 ⇨ 공사시행 ⇨ 준공

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향 : 고효율 펌프로 교체하여 에너지 절감 및 온실가스 감축

○  추진일정(단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
기본계획 수립	’18. 1 ~ 2월
공사설계, 발주	’18. 3 ~ 4월
공사시행, 준공	’18. 5 ~ 9월	130,000	노후 가압펌프 개량완료

4		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2014년도	‧ 우장산가압장 펌프(250Hp×2대) 교체
2015년도	‧ 해당없음
2016년도	‧ 화곡가압장 펌프(20Hp×2대) 교체

□  향후 기대효과

- 고효율 펌프로 교체하여 에너지 절감 및 온실가스 감축

에너지 사용량 절감으로 온실가스 감축

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2014	-	-		-	-	-	-
2015	-	-		-	-	-	-
2016	80	-	-	-	23	-	57

6		외부기관 주요 평가

□  해당없음

참 고 자 료

□  노후 가압펌프 교체대상 : 4대

가압장명	모 타 펌 프					년식	유량 (㎥/분)	양정 (m)	비고
	호기	마력	KW	형식	수량
온수(가)	1	20	15	수륙양용	1	2007	1.2	32	온수배수지
	2	20	15	수륙양용	1	2007	1.2	32
해운(증)	1	10	7.5	인라인	1	2005	1.0	30	VVVF
	2	10	7.5	인라인	1	2005	1.0	30

온수가압장 원격감시제어반 제작구매설치

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			□ 연례반복
사업위치			강서수도사업소 관내
총사업비			총 70,000천원
사업내용			온수가압장 원격감시제어반이 내구연한이 지나 장기간 사용으로 노후되어 시스템 불안정으로 안정적인 운영이 어려워 새 제품으로 교체설치하여 안정적인 아리수 운영에 만전을 기하고자 함
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			강서수도사업소
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의	정보화심사		공유재산
☑	□				☑		□	□		□	□		□
경상	투자
□	☑
□ 사업 담당자
실․국		부서명				과 장			팀장			주무관
강서수도사업소		시설관리과				고신석			문용욱			이무규
						(02-3146-3990)			(02-3146-4015)			(02-3146-4017)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2016년 본예산	2017 본예산 (A)	2018예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계			70,000
시설비및부대비(시설비)			70,000

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2017년 예산(안)	증감사유
시설비및부대비(시설비)	￭ 원격감시제어반 설치 및 감시시스템 구축 70,000천원 - 감시 제어반 제작 50,000,000원*1식=50,000,000원 - plc 프로그램 20,000,000원*1식=20,000,000원

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계

3		사업설명

□  사업목적

○  온수가압장 원격감시제어반이 내구연한이 지나 장기간 사용으로 노후되어 시스템 불안정으로 안정적인 운영이 어려워 새 제품으로 교체설치하여 안정적인 아리수 운영에 만전을 기하고자 함.

□  사업근거

○  상수도 시설물 안전관리 대책 수립 보고(본부장 방침 제218호, 2008.04.11)

○ 가압장 시설 종합정비 계획(본부장 방침 제661호, 2008.12.11.)

□  사업내용

○  사업기간 : 2018. 2. 1. ~ 6.30.

○  사업내용 : 온수가압장 원원격제어감시반 제작 구매 설치

- 사업대상 : 온수가압장

- 설치년도 : 2005년

○  ’18년도 소요예산(안) : 70,000천원

□  2018년도 사업계획(투자사업의 경우)

○  위    치 : 구로구 부일로 901(궁동230-10)

○  사업규모 : 온수가압장 원격제어감시반 제작 구매 설치

○  사업내용 : 온수가압장 원격감시제어반이 내구연한이 지나 장기간 사용으로 노후되어 시스템 불안정으로 안정적인 운영이 어려워 새 제품으로 교체설치하여 안정적인 아리수 운영에 만전을 기하고자 함.

○  소요예산(안) : 70,000천원

□  추진경위

○  온수가압장 원격감시제어반이 내구연한이 지나 장기간 사용으로 노후되어 시스템 불안정으로 안정적인 운영이 어려워 새 제품으로 교체설치하여 안정적인 아리수 운영에 만전을 기하고자 함.

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 현장조사 및 방침서 수립 ⇨ 내역서 작성 및 발주 ⇨ 사업추진 ⇨ 준공

⃞  2018년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향 : 장기간 사용으로 노후화된 온수가압장 원격감시제어반을 교체설치하여 안정적인 아리수 운영 도모

○  추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
기본계획 수립	’18. 2 ~ 3월
사업 발주	’18. 3 ~ 4월
사업 시행	’18. 5 ~ 6월	70,000	제어반 교체, 시운전

4		사업효과

□  최근 3년 추진실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용

□   향후 기대효과

- 온수가압장 원격감시제어반을 새 제품으로 교체설치하여 안정적인 아리수 운영에 만전을 기하고자 함

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2014
2015
2016

6		외부기관 주요 평가

□  해당없음

노후 유량계 설비 교체

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			□ 연례반복, ☑ 2018. 1. ~ 2018. 6.
사업위치			강서수도사업소 관내
총사업비			총 57,000천원
사업내용			상수도의 생산 및 공급 유량을 측정하기 위해 유량계 신설 및 내구연한이 초과한 유량계 설비를 검토하여 적기에 교체하여 정확한 유량측정 관리로 유수율 향상에 기여
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			강서수도사업소
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의	정보화심사		공유재산
□	□				□		□	□		□	□		□
경상	투자
□	☑
□ 사업 담당자
실․국		부 서 명				과 장			기전팀장			주 무 관
강서수도사업소		시설관리과				고 신 석			문 용 욱			황 민 욱
						(02-3146-3990)			(02-3146-4015)			(02-3146-4023)

2		예산(안)설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2016년 본예산	2017년 본예산 (A)	2018년 예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	41,000	33,000	57,000	24,000	72.73%
기계장치	41,000	33,000	57,000	24,000	72.73%

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2017년 본예산	2018년 예산(안)	증․감사유
기계장치 (시설비)	○ 시설비 = 33,000천원 - 유량계 교체(습식) 18,000천원×1대=18,000천원 - 전송반 교체 1,000천원×1면=1,000천원 - 전송반 교체 14,000천원×1면=14,000천원	○ 시설비 = 57,000천원 - 유량계 교체(건식) 13,000천원×2대=26,000천원 11,000천원×1대=11,000천원 - 전송반 교체 10,000천원×2면=20,000천원	전년도 비교 장기 사용으로 인한 계측감도 저하인 유량계 및 전송반 교체대상 증가

3		사업설명

□  사업목적

○  상수도의 생산 및 공급 유량을 측정하기 위해 유량계 신설 및 내용년수가 초과한 유량계 설비를 검토하여 적기에 교체함으로써 정확한 유량측정 관리로 유수율 향상에 기여

□  사업근거

○ 지식경제부 고시 제2009-78, 환경부 유량계설치 및 유지관리에 관한 지침

○ 유량계 업무처리지침[누수방지과-5117호(2014.9.1.)]

□  사업내용

○  사업기간 : 2018. 1. 1 ~ 6.30

○  사업내용 : 노후 유량계 설비 교체 3개소

○  ‘18년도 소요예산(안) : 57백만원

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 기본계획 수립 ⇨ 설계 ⇨ 계약심사 ⇨ 발주 ⇨ 공사시행 ⇨ 준공

⃞  2018년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향 : 노후 유량계 교체로 정확한 공급유량 측정

○  추진일정                                                                         (단위:천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
기본계획 수립	’18. 1 ~ 2월
구매 발주	’18. 3 ~ 4월
납품 및 설치	’18. 5 ~ 6월	57,000	노후 유량계설비 교체완료

4		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2014년도	‧ KSM-12, KSM-13 초음파유량계 신설
2015년도	‧ KSM-9, KSM-11 초음파유량계 교체, KSM-9 전송반 교체
2016년도	‧ KS-9, KSM-7 초음파유량계 교체, KS-9, KSM-7 전송반 교체

□  향후 기대효과

- 노후 유량계 교체로 공급량 산정의 신뢰성을 확보하여 정확한 유수율 분석

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2014	140	-	-	140	121	-	19
2015	36	-	-	36	27	-	9
2016	41	-	-	41	34	-	7

6		외부기관 주요 평가

□  해당없음

참 고 자 료

□  유량계 설비 교체대상

유량계명	위 치	배관구경 (mm)	교체대상	설치연도
KSM-3	강서구 공항대로 516	700	유량계 1대, 전송반 1면	유량계 : 2005년 전송반 : 2005년
목동131(증)	양천구 용왕정길 10	50	유량계 1대	유량계 : 2004년
KSM-10	양천구 남부순환로 64길	1100	유량계 1대, 전송반 1면	유량계 : 2005년 전송반 : 2005년