시설계획부		업 무 담 당 책 임 자
		소 속	직위(직급)	성 명
		시설계획부	부장 (건축2급)	손오성
2018. 6.30 현재

세부업무명	사 업 개 요	2/4분기 추진계획		2/4분기 추진실적		평가
		진도율	내 용	진도율	내 용
개별보일러 교체	◦흑석청호 외 당해단지	5%	◦계약심사 및 입찰공고	5%	◦계약심사 및 입찰공고	정상
수전 교체	◦거여3 외 당해단지	15%	◦업체선정 및 공사착공	15%	◦업체선정 및 공사착공	정상
지역난방 전환	◦마포태영	15%	◦업체선정 및 공사착공 ◦배관 철거 공사	15%	◦업체선정 및 공사착공 ◦배관 철거 공사	정상
위생도기류 교체	◦대치1 외 당해단지	15%	◦업체선정 및 공사착공	15%	◦업체선정 및 공사착공	정상
계량기교체	◦수서6 외 당해단지	15%	◦업체선정 및 공사착공	15%	◦업체선정 및 공사착공	정상
조명기구 교체	◦수서6 등 당해단지	10%	◦단지별 확인 점검	10%	◦단지별 확인 점검	정상
주방가구 (씽크대)	◦이문쌍용 외 당해단지	15%	◦제작설치납품 시행	15%	◦제작설치납품 시행	정상
도배 및 장판 교체	◦수서1 외 당해단지	10%	◦공사시행	10%	◦공사시행	정상
LED 교체	◦냉천동부 외 당해단지	10%	◦자재승인서 검토	10%	◦자재승인서 검토	정상

시설지원부		업 무 담 당 책 임 자
		소 속	직위(직급)	성 명
		시설지원부	부장 (전기3급)	홍순호
2018. 6.30 현재

세부업무명	사 업 개 요	2/4분기 추진계획		2/4분기 추진실적		평가
		진도율	내 용	진도율	내 용
소규모주택 가스 타이머콕 설치	소규모 주택 주방 가스배관 가스 타미어콕 설치	70%	◦설치공사발주/계약 ◦설치공사 진행	70%	◦설치공사 발주/계약 ◦설치공사 진행	정상
소규모주택 간이소화기 설치	소규모주택 재해약자 세대에 간이소화기(스프레이식) 지급/설치	70%	◦간이소화기 구매 및 설치공사 계약 ◦설치공사 진행	70%	◦간이소화기 구매 및 설치공사 계약 ◦설치공사 진행	정상
소규모주택 방범설비 (CCTV) 설치	소규모주택 방범설비(CCTV) 설치	15%	◦대상주택 선정 및 발주준비	15%	◦대상주택 선정을 위한 입주민 동의 완료 및 발주서류 작성	정상
소규모주택 태양광 발전설비 설치	소규모 주택 거주 에너지 취약계층 미니 태양광 발전설비 설치	10%	◦설치 대상주택 현 황조사	10%	◦설치가능 주택 동의세대 신청 접수중	정상

시설활용부		업 무 담 당 책 임 자
		소 속	직위(직급)	성 명
		시설활용부	부장 (기계2급)	허 원
2018. 6.30 현재

세부업무명	사 업 개 요	2/4분기 추진계획		2/4분기 추진실적		평가
		진도율	내 용	진도율	내 용
경로당 물품지원 및 보수공사	◦임대주택 단지내 경로당 시설개선 (154개소)	95%	◦경로당 시설개선공사 시행	95%	◦경로당 시설개선공사 시행 - 계약: 2018. 6. 21.	정상
시설물 안전점검 계획	◦2018년 시설물 안전점검 계획 (450개 시설물)	50%	◦2018년 임대아파트 정밀점검용역 발주 ◦정기점검 시행	50%	◦2018년 임대아파트 정밀점검용역 시행 - 계약: 2018. 4. 30. ◦정기점검 시행	정상
재도장공사 (행복한 미소벽화)	◦임대아파트 외부 및 공용부 재도장 공사 (미소벽화 4개 단지 포함)	100%	◦준공 : 2018. 6. 6.	100%	◦준공 : 2018. 6. 6.	정상
승강기 교체공사	◦승강기교체 대수 : 38대 (길음동부 외 8개 단지)	5%	◦대상단지 현장조사◦발주내역 작성, 발 주 및 계약	5%	◦대상단지 현장조사 ◦발주내역 작성, 발주 및 계약	정상
급수방식 개선공사	◦시흥벽산외 6개단지	5%	◦대상단지 현장조사 ◦설계 완료 및 공사 발주	5%	◦대상단지 현장조사 ◦설계 완료 및 공사 발주	정상
CCTV 교체공사	◦중계4단지외 39개 단지	10%	◦발주 의뢰	10%	◦발주 의뢰	정상
옥상 비상문 자동개폐기 설치공사	◦월계청백1단지외 14개 단지	5%	◦대상단지 수요 조사 및 발주 도서 작성	5%	◦대상단지 수요 조사 및 발주 도서 작성	정상
조경수목 가지치기공사	◦북부권역 85개 단지	90%	◦85개 단지 가지치 기 공사 시행	90%	◦85개 단지 가지치기 공사 시행	정상