문서번호	교량안전과-15085
결재일자	2018.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
협조

2018. 9월

강구조시설물 안전점검 및 품질확보 계획

2018.  8

안전총괄본부

(교량안전과)

2018. 9월

강구조시설물 안전점검 및 품질확보 계획

우리시에서 관리하고 있는 강구조 도로시설물에 대한 안전점검과 공사 중인 강구조시설물의 품질점검을 실시하여 안전성을 확보하고 품질향상에 기여코자 함.

Ⅰ		점검 개요

□ 관련근거

○ 강구조시설물 안전점검 및 품질확보 계획 : 교량안전과-949(2018.1.18)

□ 점검대상

○ 강구조 시설물 안전점검 : 5개 교량

- 모래내고가, 관수교, 강남터미널고가, 미아구름다리, 행주IC교

○ 강구조 공사장 품질점검 : 9개소

- 월드컵대교건설공사, 광복교~안양교도로확장공사

- 북악스카이웨이1교개축공사, 성수대교보수공사

- 영동6교내진보강공사, 탄천1교내진보강공사

- 양화교내진보강공사, 보라매고가보수공사, 도림고가보수공사

※ 정밀안전진단진행중인 시설은 외관조사 시 합동점검 실시 예정

□ 점검내용 및 방법

○ 기존 강구조 시설물의 안전점검

○ 강구조 건설공사장 품질(용접, 도장 등)점검

○ 정밀안전진단 용역의 진단 부실여부 확인

○ 매월 1회 정기적 점검

□ 점검자 : 강구조교량팀장, 강구조 용접관리 전문관(이우근, 이제택)

Ⅱ		9월 점검 세부 추진계획

□ 강구조시설물 안전점검 분야

○ ‘18년 점검대상 45개 교량 중 5개 교량

NO.	시 설 물 명	관리 부서	교량형식	비 고
1	모래내고가	교량안전과	STB,RCB	4,5일
2	관 수 교	서부(시설보수과)	강상판판형교	7일
3	강남 터미널고가	남부(시설보수과)	STB,SPG,RCS	18,19일
4	미아리구름다리	북부(시설보수과)	STB	21일
5	행주IC교(상행선)	강서(시설보수과)	STB	27일
※ 시설물의 예상 점검일은 내부 일정에 따라 변경될 수 있음

○ 중점 점검 사항

점검사항	점 검 내 용
일반사항	- 강박스 내부로의 빗물유입 여부 확인 - 교량 받침 이동량 적정유무 확인 - 신축이음하부 누수 발생여부 - 교량상부 보도 및 차도측 물(눈) 고임 발생 여부
용접관련사항	- 부재의 좌굴(특히 복부판 및 가로보) 여부 점검 - 고장력 볼트 체결부(Splice부 등)의 볼트 파단 발생 여부 - 용접결함으로 인한 시설물의 손상 여부 점검 - 기타, 강구조물 부식발생 및 도장손상 확인 등

○ 점검방법

- 용접관리전문관 2명, 교량담당자 합동점검

□ 강구조 공사장 품질점검 분야

○ ‘18년 점검대상 17개 건설(보수)공사장 중 9개 현장

- 발주부서 : 도시기반시설본부 토목부, 교량안전과, 도로사업소

연번	공사명	공 사 내 용	비 고
1	월드컵대교건설공사	사장교, 폭:31.4m(6차로), 본선연장 :1,980m	도기본 강교제작장 영창중공업(전남신안)
2	광복교~안양교 도로 확장공사	아치교, STB, PF-BEAM 광복교 : 67m(STB 3열), 안양교 : 275m	도기본 신규건설공사장(동부E)
3	북악스카이웨이1교개축공사	폭 : 9.77m, 연장 : 60m	교량안전과 강교제작장(삼원중공업)
4	성수대교보수공사	강교도장 : 17,197㎡	교량안전과
5	영동6교 내진보강공사	교량받침교체 60개소	교량안전과
6	탄천1교 내진보강공사	교량받침교체 64개소, 전단키설치 2개소 등	교량안전과
7	양화교 내진보강공사	교량받침교체 145개소, 전단보강 8개소 등	교량안전과
8	보라매고가 보수공사	강교도장 : 4,813㎡	교량안전과
9	도림고가 보수공사	강교도장 : 17,197㎡	남부도로사업소 시설보수과
※ 강구조시설물 관련 공정 “완료” 또는 착수 전 공사장 제외

○ 점검 내용

점검사항	점 검 내 용
안전사항	- 점검자 및 보수작업자 이동 편의상태 확인 - 용접화재 등 안전관리 상태 점검
품질사항	- 적절한 자재사용 점검 - 강교제작 및 용접에 대한 품질관리 이행실태 점검 - 도장 품질관리 이행실태 점검 - 유자격 용접사의 현장작업 여부 등

○ 점검 방법

- 진행 중인 공사장을 대상으로 공정에 따른 순회점검

- 점검일정 등은 발주부서(담당자)와 별도 협의하여 추진

Ⅲ		조치 및 행정사항

□ 강구조 시설물 점검결과는 담당부서 통보하여 조치

○ 문제점 등은 “시설물 점검 관리대장”에 기록 후 지속 관리

□ 공사장 지적사항은 발주부서에  통보[시정요청서 발부]하여 조치

□ 점검현장(교량 또는 공사) 대부분이 대중교통 연계가 곤란한 실정임을 감안하여 점검차량 또는 업무택시 이용 점검실시

붙임   1. 공사장 시정요청서 양식 1부

2. 강구조 도로시설물 관리부서별 현황 1부

3. 2018년 강구조시설물 공사장 현황 1부. 끝.