화재안전특별조사 추진계획

Ⅰ		추진개요

□ 추진배경

○ (대통령 지시) 밀양 세종병원 화재를 계기로 근본적인 개선방안 마련 지시*

* 청와대에 관련 부처, 안전관련 공공기관․지자체․민간전문가 참여「화재안전대책특별TF」구성, 취약시설 전수조사 수준의 실태조사, 과거방식 지양, 실명제도입, 점검결과 공개(1.29. 수보회의, 1.30. 장차관 워크숍)

○ (안전환경 변화) 건축물이 초고층․심층화로 복잡화되고 새로운 유형의 시설이 생겨나는 것*은 물론, 기존 건축물의 노후화가 진행되면서 물리적 안전환경의 약화로 대형화재로 인한 다수 인명피해 위험 상존

*  연 7만개소 증가 : (’00년) 592만 → (’05년) 637만 → (’10년) 667만 → (’15년) 699만

○ (인프라 구축) 현재와 미래재난에 대비, 기존의 화재안전관리시스템을 근본적으로 개선시킬 수 있는 국가 차원의 대책 마련과 인프라 구축 필요

□ 추진목적

○ (화재참사 예방) 제천⋅밀양화재와 같은 대형참사 재발방지를 위한 다중이용시설 등 화재취약 건물에 대한 긴급점검 및 조치

○ (건물안전 실태조사) 건축․소방․전기․가스 등 별도관리 → 화재위험요인을 종합적으로 조사하여 위험요소를 발굴, 범정부적 통합관리 및 대책 추진

○ (위험성 평가 및 소방활동 D/B 구축) 화재안전 점검결과를 분석, 건물별 화재위험성을 평가, 화재안전정책 수립, 인명구조․화재진압 작전 등에 활용

○ (안전점검시스템 개선) 건축물 안전관리 사각지대 존재 → 건축설계부터 사후관리까지 全 단계에서 점검과 개선활동이 지속되도록 제도 개선

○ (대국민 정보공개) 건물주의 책임의식을 제고하여 건축물 안전 강화 및 국민의 안전선택권 확대

□ 화재특별조사 개요

○ (기간) 2018. 7 ~ 2019. 12    ※ ’18. 4 ~ 6월 : 조사설계 및 사전준비․홍보

○ (대상) 다중이용시설 등 55만 4천개동 (화재빈도와 인명피해 가능성 높은 취약시설)

* 1단계(‘18. 7 ~ 12월) : 17만 2천개동 / 2단계(’19년) : 38만 2천개동

※ 소방대응정보조사 : (기간) ‘20 ~ ’21년  /  (대상) 146만 5천여개동

↳ 인명구조 및 화재진압관련 현황조사

○ (방법) 소방․건축․전기 등 전문가로 조사반 편성(현장조사)

○ (조사단) 건물규모별 조사반(3개 유형) 운영, 조사인력은 청년 및 신중년 일자리와 연계 추진하고, 국민생활밀접시설 조사 시에는 시민 참여

○ (조사내용) 물적요인(건축․소방․전기․가스시설 등), 인적요인(이용자 특성, 안전관리이력 등), 환경적요인(소방관서와의 거리, 관할 소방서 역량 등) 종합조사

【 ’18년도 1단계 조사계획 】

- (대상) 17만2천여개동(다중이용업소 소재 복합건물, 의료시설, 노유자시설, 수련시설 등)

※ 불특정다수인 또는 재난약자 등이 주로 이용하는 시설로 화재취약요인이 많은 대상

- (인력) 총 2,755명(조사 및 상황관리 2,688명, 행정 67명)*

* 소방공무원, 건축직공무원, 공공기관 전문인력, 자격보유 보조인력 등

- (조사반) 총 798개반(조사대상 규모별 3개반으로 차등편성)

조 사 반	A반(5명) - 5천㎡ 이상	B반(4명) - 3천5백~5천㎡	C반(3명) - 3천5백㎡ 미만
조사대상수	1만2천여개 동	5천여개 동	15만5천여개 동
조사반수	59개	22개	717개

* 건물 연면적 : 제천 노블휘트니스앤스파 3,813㎡ / 밀양 세종병원 1,489㎡

** 조사반장은 공무원, 보조인력은 관련 자격소지자 등 청년인력 활용

※ 조사반은 각 조사대상물의 특성을 반영, 소방관서·지자체가 협업하여 탄력적으로 편성·운영

- (예산) 총 440억 예산 중 국비 159억(예비비), 지방비 281억(재난특교 등)

○ (추진 로드맵)

’18. 4～6월 (실시준비)		▸채용인력 합격자 발표, 조사장비 구매, DB구축안 설계 ▸조사반 직무교육, 전문가 그룹 인터뷰, 집중 홍보 ▸응급키트 구성품 설계 및 구매 완료 ▸전용 홈페이지(마이크로페이지) 개설 및 자료 제공(Q&A코너 운영)
’18. 7～12월 (1단계 점검)		▸1단계 특별조사(17만2천동), 상황관리반 운영 ▸중간점검 설문조사(점검완료 건물 관계자 대상) ▸건축물소방정보통합D/B 구축 및 자료입력 ▸국가안전정보통합플랫폼 구축 BPR/ISP 실시

’19. 1～6월 (상반기 점검)		▸상반기 점검(19만여동), 상황관리반 운영 ▸‘18년도 1단계 점검결과 D/B의 현장활용 본격화 ▸안전관리 우수건물 공개 및 홍보(전용 홈페이지)
’19. 6～12월 (하반기 점검)		▸하반기 점검(19만여동), 상황관리반 운영 ▸국가안전정보통합플랫폼 구축사업 시범 운영

□ 조사결과 조치 및 활용

○ (시설개선) 관계인에게 조사결과표를 현장에서 교부하여 신속한 개선 유도

- 공식 조사결과는 서면통보 및 홈페이지 이용 무료 컨설팅

○ (위법․불량사항 조치) 불량정도에 따라 시정조치, 개선권고, 의법조치로 구분하여 처분(시설 개선 및 안전도 강화 중점 지도)

- 중대사항은 즉시조치, 개선사항은 유예기간 부여 자발적 개선기회 부여

- 개선 또는 시정에 필요한 기술적인 사항은 전문가 무료컨설팅 실시

○ (소방현장활용 DB 구축) 건축물 동(棟)단위로 조사, 골든타임 내 신속한 인명구조와 화재확산 차단작전 전개를 위한 ‘건축물 화재안전정보DB’ 구축, ’20년 개설 예정인 (가칭)‘국가안전정보통합플랫폼’과 연계 활용

○ (비상키트 보급) 특별조사 홍보 및 정책수용성 제고를 위하여 긴급 안전조치에 필요한 물품(탈출로 안내표지, 비상탈출마스크 등)을 안전관리자에게 보급

○ (조사결과 대국민 공개) 자발적인 시정기회를 부여하고, 국민들에게 안전한 건물에 있는 시설을 선택할 수 있도록 필수 안전정보 공개

※ 공개방식, 공개범위 설정 및 법적근거 마련은 각계 의견수렴 등을 통해 추진

Ⅱ		세부추진계획

□ 신규인력 선발

○ 선발인원 : 1,061명(청년인력 959명, 신중년 경력직 102명)

선발분야	합 계	청년인력(959명)		신중년 경력직(102명)
		조사보조	행정보조	전 기	가스 및 소방
선발인원(명)	1,061	892	67	29	73

○ 선발방법 : 서류전형(중앙소방학교 위탁)

○ 선발기간 : ‘18. 4. 18(수) ~ 6. 5(화) / 약 7주

○ 추진일정

구 분	일 정	장 소
시험시행계획 공고	2018. 04. 18.(수)	∘ 중앙소방학교 및 시․도 소방본부(학교) 홈페이지, 나라일터, 대한민국 공무원 되기 사이트 등
응시원서 접수 및 서류제출	2018. 04. 24.(화) ~ 2018. 05. 08.(화)	∘ 중앙소방학교 원서접수(http://119gosi.kr)사이트 및 중앙소방학교 인재채용팀
서류전형	2018. 05. 14.(월) ~ 2018. 05. 16.(수)	∘ 중앙소방학교
신원조회	2018. 05. 18.(금) ~ 2018. 05. 28.(월)	∘ 경찰청, 주민자치센터, 행정정보공동이용망 등
최종합격자 발표	2018. 05. 30.(수)	∘ 중앙소방학교 및 시․도 소방본부(학교) 홈페이지, 나라일터, 대한민국 공무원 되기 사이트 등
합격자 등록	2018. 06. 01.(금) ~ 2018. 06. 05.(화)	∘ 합격한 응시지역의 소방본부 방문등록

○ 인력선발 홍보계획

- (온라인) 네이버 등 상용포털사이트 배너 광고, 관련대학․취업포털(잡코리아 등) 및 소방청‧지자체‧공공기관 등 홈페이지 게재

- (오프라인) 일간지 광고, 공공기관 현수막 설치 및 전국 소방관련대학 교수협의회 간담회 개최(4. 6.) 및 대학일자리센터 등과 연계 홍보 추진

□ 특별조사 및 운영인력 교육

○ 추진방향

- 청년인력(조사보조), 청년인력(행정보조), 신중년인력(전문경력), 재직자지원(공무원)으로 구분하고, 과정별 교육기간에 따라 커리큘럼 편성

- 소방 ‧ 건축 ‧ 전기 ‧ 가스 분야별 관련법령, 조사기준, 조사 시 착안사항, 부실점검 사례, 예상 문제점 대응방안, 장비 사용법 등 조사실무 교육

- 국가화재안전특별조사 추진배경 및 정책방향, 국민안전에 기여하는 정도, 중장기 비전교육 등 특별조사 수행 인력으로서의 긍지 및 사명감 부여

○ 교육인력 : 총 2,755명(청년인력 959명, 신중년 경력직 102명, 재직자 1,694명)

○ 교육개요

구 분	청년인력(959명)		신중년인력 (전문경력)	재직자 지원 (공무원 등)
	조사보조	행정보조
교 육 인 원	< 892명 >	< 67명 >	< 102명 > • 전기 29 • 소방,가스 73	< 1,694명 > • 소방공무원 817 • 건축공무원 817 • 전기안전공사 60
	11개반	1개반	2개반	11개반
기 간	4주(합숙) ※ 1주 현장실습	1주(합숙)	1주(합숙)	2일(비합숙)
	6. 11(월) ∼ 7. 6(금)	7. 2(월) ∼ 7. 6(금)	7. 2(월) ∼ 7. 6(금)	6월 말 ~ 7월 초
장 소	KT인재개발원 등 3개 연수원	상록리조트 (충남 천안)	상록리조트 (충남 천안)	중앙 및 지방소방학교 등
내 용	조사 보조인력으로서 갖춰야 할 기본 지식 및 소양 습득	조사일정 조정 및 데이터 관리 요령, 조사결과 정리방법 등 행정보조실무	소방‧전기‧가스 등 조사관련 법령․기준, 장비 사용법 등 실무점검 교육	팀리더 (조사 전문인력)로서의 기본소양․지식 및 중점추진방향 등

□ 조사장비 및 비상키트 등 구매 추진

□ 조사장비 구매

○ (품 목) 20종 약 16,000점 (조사규모에 따라 조사반별 장비 차등 편성)

○ (예 산) 약 53.6억원 (국비-예비비 활용)      * 소방청 일괄 구매 후 시․도 배부

○ (기 간) 2018. 4. 9.(월) ~ 7. 3 (화) / 약 3개월

규격서 작성	⇨	규격심의회	⇨	나라장터 견적요청	⇨	일상감사
‘18. 4. 9(월) ~ 4. 16(월)		4. 17(화)		4. 18(수) ~ 4.20(금)		4. 20(금) ~ 4.24(화)

⇨	조달청 검토(2주)	⇨	조달청 공고 및 계약체결(3주)	⇨	장비납품 및 검수(35일)
	4. 25(수) ~ 5. 8(화)		5. 9(수) ~ 5. 28(월)		5. 29(화) ~ 7. 3(화)

□ 비상키트 구매

○ (방 향) 건물의 위험특성에 따라 건물당 15,000원 정도의 예산에 맞춰 구매 물품을 2 ~ 3개 유형으로 조합하여 구매

○ (예 산) 약 26억원 (국비-예비비 활용)     * 소방청 일괄 구매 후 시․도 배부

	< 구성물품(안) >
① 비상구 관리표지 스티커, ② 긴급탈출창 표지, ③ 화재대피 유도 신호봉, ④ 소방안전점검 및 피난유도용 소형후래쉬, ⑤ 화재대피용 마스크, ⑥ 옥내소화전 사용요령 홍보용 스티커, ⑦ 소화기․소화전 위치 표지 홍보용 표지

○ (기 간) 2018. 4. 23.(월) ~ 7. 3(화) / 약 2.5개월

□ 조사차량 임차 추진

○ (방 법) 소방청에서 임차기준 마련 및 시․도별 차량 임차 후 소방서 배치

○ (예 산) 약 16억원 (지방비 - 재난특교 등 활용)

○ (수 량) 총 668대 임차 (승합차 81대 / A․B조, 승용차 587대 / C조)

* 총 798개 조사반 중 130개 반은 소방서 행정차량 이용

□ 마이크로 페이지(미니홈피) 구축 ․ 운영

○ (운영목적)

- 국가 화재안전특별조사 전용 마이크로페이지* 개설을 통해 화재안전특별조사 정책에 대한 올바른 정보제공으로 사회적 공감대 확산 도모

* 마이크로페이지 : 정보제공을 목적으로 4∼5개의 메뉴를 가진 미니 홈페이지

※ 산업통상자원부「에너지전환정보센터」 마이크로페이지 구축(’17년 9월, www.etrans.go.kr)

○ (추진방향)

- 국민들이 화재안전특별조사에 대해 쉽게 이해할 수 있도록 메뉴를 최소화하고, 시각적으로 직관성을 높인 마이크로페이지 형태로 구축

* 복잡한 자료 대신 카드뉴스 ‧ 웹툰 ‧ 인포그래픽 등 친근한 형태로 제작

- 국민들의 관심이 많은 분야를 중심으로 4~5개의 메뉴로 구성

	< 카테고리 구성(안) >
①「왜 화재안전특별조사인가 ?」화재안전특별조사의 의미‧방향‧목적 ②「이거 맞나요 ?」 FAQ로서 주요 핵심쟁점에 대한 Q&A 형식 구성 ③「그래도 궁금해요」핵심쟁점 外 온라인상 제기되는 질문에 대한 답변 ④「보도‧설명자료」 ⑤ 화재안전 상식 및 점검요령 등

○ (기    간) 2018. 4월 ~ 6월 / 3개월

제작업체 선정 페이지 구축 (정보통계담당관)	⇨	서비스 개시 사이트 홍보 (대변인실)	⇨	대국민 정보제공
’18년 4~5월		6월		7월

○ (소요예산) 1억원 (마이크로페이지 구축 및 유지보수 등)

□ 시민참관단 모집 ․ 운영

○ (운영방향)

-  특별조사 기간 중 조사대상 특성에 따라 어린이․여성․고령자․장애인 등 다양한 계층의 시민 참여 (점검대상 특성에 따라 참관단 운영)

-  특별조사에 대한 국민적 공감대를 형성하고 안전문화 분위기 조성

-  현장 참여를 통한 특별조사 운영에 대한 개선의견 수렴․반영

○ (시민참관단 모집)

- (모집기간) 2018. 5. 14 ~ 6. 13 / 1개월

* 시민참관단 모집기준 및 운영방안, 인센티브 등 세부운영지침 마련(‘18. 4. 23～ 5. 9)

- (모집인원) 약 607명 (소방서별 2 ~ 3명 / 인구밀집지역 3, 기타지역 2)

구 분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	경기 북부	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	창원
소방서	214	24	11	8	10	5	5	4	2	23	11	16	12	16	10	14	18	18	4	3
인 원	607	72	33	24	30	15	15	12	6	69	33	40	30	48	25	35	45	54	12	9

- (모집방법) 소방청 홈페이지  활용, 지역별 구분 공개 모집

․희망지역별 구분 모집하되, 희망자가 적은 지역은 시도별 추가 모집

․공개모집 대상자는 어린이, 여성, 고령자, 장애인 등을 구분하여 모집

* 조사대상물의 특성에 따라 조사단 운영 (요양시설의 경우 고령자 참관단 참여)

․다양한 참여유도를 위해 시민단체 등의 추천 없이 일반 국민 대상으로 공개 모집

- (모집홍보)  : 전국 지자체 및 소방본부, 유관기관 홈페이지 활용

* 특히 어린이, 고령자 등 안전약자가 적극 참여할 수 있도록 읍□면□동(3,502개소),

학교 및 경로당 등을 통하여 홍보

○ (주요활동)

- 화재안전특별조사 기간 6개월 단위로 참여 (‘18. 7  ~ 12월 / 6개월)

- 화재안전특별조사반에 합류하여 특별조사 참여(월  2회, 1단계 12회)

※ 체크리스트는 별도 마련 제공

- 시민의 눈높이에서 화재안전특별조사 참여 및 화재안전제도 개선의견 제안

- 가족‧이웃 및 지역 화재안전 홍보활동 및 마이크로페이지 점검후기 게재 등

□ 건물별 화재안전도 평가 및 대국민 공개

□ 화재안전도 평가계획

○ (목적) 국민이 안전한 시설을 선택할 수 있는 권리를 부여하고, 건물주의 책임의식과 자발적인 개선노력을 유도

○ (공개방안) 화재안전특별조사 결과를 전문가(대학교수, 소방기술사 등)가 포함된 진단팀*이 평가하고, 5개 등급화하여 그 결과를 온라인 등을 통해 대국민 공개

○ (평가방법) 전문평가반을 구성하여 조사결과 우수대상 선정 후 전문평가

- 화재안전도 전문평가팀 구성 : 1개반 3명(대학교수, 소방·방재관련 기술사 등)

※ 전문평가팀 : 20개팀 운영(1개팀당 1,750개동 평가/1회 70개동 건물/25회 운영)

- 평가대상 : 화재안전특별조사 결과 안전도가 우수한 건물(전체의 약 20%*)

* 20개팀 × 70개동 × 25회 = 3만 5천여개동

- 평가방법 : 전문평가표에 의한 객관적 평가 및 전문가 주관평가 합산

* 필요시 서류평가 후 안전도가 매우 우수한 모범적인 건물은 현장실사 확인

○ (시행일정) 평가매뉴얼 제작 및 공개방안 확정(6월 말) → 평가팀 위촉 및 전체 워크숍(7월 중) → 제1회 평가(8월 초) → 이후 총 25회 평가

□ 결과활용 계획

○ (법적근거) 현행 소방시설법 제5조(조치명령 미이행 시 공개 가능)의 관련조항을 개정하여 공개의 법적근거 마련(’18년 하반기 개정·공포)

○ (공개방법)

- (1차) 우수건물 20% 정도를 전문평가하여 화재안전 인증 후 대국민 공개

- (2차) 안전도 미흡 건물은 주요 사실(주요 안전시설 설치현황, 행정처분 이력, 화재이력 등)만 공개한 후 일정기간 유예 안전도가 개선되면 평가등급 공개

※ 단, 안전상 중대한 문제점이 있는 건물 또는 시정명령을 이행하지 않은 건물에 대해서는 전문가 자문 후 유예기간 없이 공개 추진

□ 전문가 컨설팅 자문단 구성․운영

○ (운영방향)

- 건물 관계인의 화재안전관리에 관한 전문적 지식이나 기술에 대한 문의사항에 대해 마이크로페이지 등을 통해 컨설팅

- 복잡다기한 현장상황으로 인해 조사반이 판단하기 어려운 상황에 대한 자문 수행

○ (인력풀 구성)

- 소방, 건축, 전기, 가스 등 분야별 10명 내외 인력풀* 구성

* 해당분야 기사 이상 자격 보유 또는 경력 7년 이상, 관련학과 교수 등

- 소방청에서 시도별로 분산배치 고려하여 인력풀 구성

○ (운영방법)

- (근무방법) 재택근무, 마이크로페이지(미니홈피)에서 컨설팅 진행

- (수당지급) 컨설팅 1건당 전문가 자문수당 지급

- (업무 프로세스)

점검단 현장점검		점검결과 통보		홈피 질의신청		홈피 질의답변
관계인에게 점검결과표 현장에서 교부		공식 점검결과는 관계인에게 서면통보		관계인이 질의내용 홈페이지에 입력		홈페이지에서 질의에 대한 컨설팅
점검당일 즉시		점검후 20일 내		점검 후		접수 5일 이내

□ 화재안전특별조사 예비조사 및 체크리스트 최종 확인

○ (기  간) 2018. 4. 4. ~ 5. 31.(2개월간)

○ (대  상) 근린생활시설, 복합건물 104개소(1차 조사대상과 55개소 중복)

※ 서울(19), 부산(11), 대구(3), 인천(1), 광주(3), 대전(2), 울산(3), 경기(19), 경기북부(7), 강원(5), 충북(2), 충남(4), 전북(2), 전남(1), 경북(6), 경남(4), 창원(5), 제주(7)

○ (조사반) 2개반 10명(총괄, 소방, 건축, 전기, 가스 등)

※ 중앙소방특별조사단 전문위원, 전기‧가스안전공사 등 전문가 활용

○ (방  법) 화재안전특별조사 체크리스트를 이용 정량적‧정성적 현장점검

※ 지적사항에 대한 해결방안 제시 등 전문가 화재안전컨설팅 병행

○ (결과활용) 체크리스트 최종 확인 및 특별조사 현장운영 개선 반영

□ 건물 소방안전정보 통합DB 구축사업 추진

○ (사업개요) 모바일 소방점검시스템 및 건축물 안전관리정보, 화재이력정보, 유관기관 데이터* 정보, 소방점검 정보 등 데이터 통합연계 및 표준관리체계를 위한 통합데이터웨어하우스(DW), 분석․활용지원시스템**(‘19년) 구축

** 기상·교통·도면·가스·전기·위험물·거주자·에너지·승강기·시설물 정보 등

** ‘18년도 건축물 소방안전정보 통합플랫폼 정보화전략계획 ISP 수립 후 추진

○ (추진기간) 2018. 4월 ～ 12월 / 사업기간 6개월

○ (총사업비) 39.8억원(국비-예비비 활용)

(단위 : 억원)

연 도	합 계	건축물 소방안전정보 통합플랫폼			119통합정보 시스템 구축 ISP 수립
		ISP	모바일 점검시스템	데이터 웨어하우스
‘18년	39.8	2.7	9.3	22.55	5.25

○ (계약방법) 조달청 제한경쟁계약(협상에 의한 계약)

사업계획서	⇨	일상감사 정보화사전협의	⇨	조달청 공고 및 계약	⇨	사업 수행 (보안성검토)	⇨	시스템 검수
‘18. 4. 17(화) ~ 4. 27(목)		‘18. 4. 30(월) ~ 5. 11(금)		‘18. 5. 14(월) ~ 6. 18(월)		‘18. 6. 19(화) ~ 12. 14(금)		‘18. 12. 14(금) ~ 12. 27(목)

Ⅲ		화재안전특별조사 추진단 구성․운영

□ 운영방향

○ 화재안전특별조사가 전 국민의 관심과 언론의 집중이 예상되므로 치밀하고 차질없이 준비․운영할 수 있는 인력 구성

○ 소방청 기존 인력만으로는 화재안전특별조사 준비 및 운영이 어려우므로 적정한 수준의 파견인력 활용

○ 조사장비 구매, 신규인력 선발 및 교육 등 화재안전특별조사 실시 이전 준비단계에서의 인력이 많이 소요되므로 추진단 구분 운영

□ (1차)  화재안전특별조사 추진단

○ 주요역할 : 인력선발, 교육, 장비구매 등 화재안전특별조사 사전준비

○ 운영기간 : 2018. 4. 17. ~ 7. 9. / 약 3개월

○ 인력구성 : 18명

* 단장 1, 총괄운영반 3명, 인력관리반 6명, 조사지원반 5명, 통합DB 구축반 3

단장 (1명)		▸화재예방과장
총괄운영반 (3명)		▸화재안전특별조사 운영전반 관리 및 컨설팅 인력풀 구성 ☞ 화재예방과 기존 인력활용(예방기획계 3명)
인력관리반 (6명)		▸인력선발관리, 교육수립 운영, 건물위험도 평가단 운영 등 ☞ 기 파견인력 2명, 화재예방과 2명, 추가 파견 2명
조사지원반 (5명)		▸조사대상물 관리, 장비 및 비상키트 구매, 시민참관단 운영 등 ☞ 기 파견인력 1명, 화재예방과 2명, 추가 파견 2명
통합DB구축반 (3명)		▸모바일 점검시스템 구축, 데이터웨어하우스 구축 등 ☞ 소방장비항공과 1명, 추가 파견 2명

※ 추가파견 6명 필요

□ (2차) 화재안전특별조사 추진단

○ 주요역할 : 특별조사 상황관리 및 운영총괄

○ 운영기간 : 2018. 7. 9. ~ 2019. 12. 31. / 약 1년 6개월

○ 인력구성 : 9명 (총괄운영반 3명, 상황관리반 3명, 조사지원반 3명)

단장 (1명)		▸화재예방과장
총괄운영반 (3명)		▸운영전반 관리, 마이크포페이지 및 컨설팅 운영 ☞ 화재예방과 기존 인력활용(예방기획계 3명)
상황관리반 (3명)		▸운영상황관리, 인력운영관리, 홍보 및 언론관리 등 ☞ 화재예방과 1명, 파견인력 2명
조사지원반 (3명)		▸조사대상물 관리, 장비 및 비상키트 관리, 시민참관단 운영 등 ☞ 화재예방과 1명, 파견인력 2명
통합DB구축반 (3명)		▸모바일 점검시스템 구축, 데이터웨어하우스 구축 등 ☞ 소방장비항공과 1명, 파견인력 2명

※ 기존 파견인력 9명 중 3명은 복귀(6명으로 운영)

□ 향후 추진일정

○ 채용선발 공고 ----------------------------------------------------------- ‘18. 4. 18(수)

○ 장비구매 일상감사 -------------------------------------- ‘18. 4. 20(금) ~ 4. 24(화)

○ 장비구매 조달공고 ------------------------------------------------------- ‘18. 5. 8(화)

○ 채용선발 합격자 발표 ------------------------------------------------- ‘18. 5. 30(수)

○ 청년 보조인력 직무교육 ------------------------------- ‘18. 6. 11(월) ~ 7. 6(금)

○ 신중년 및 행정전산인력 직무교육 ------------------- ‘18. 7. 2(월) ~ 7. 6(금)

○ 1단계 화재안전특별조사 실시 ---------------------- ‘18. 7. 9(월) ~ 12. 31(금)