서울시 소관사업 추진 현황 (광역도로)

구분	사업명	규모	사업기간	사업비 (백만원)	추진상황
광역도로 1	상도교-호장교간 도로개설	1.8km (4차로)	당초 : ’15.05.~’17.12.	당초 : 34,725 (서울시 17,362)	서울시구간 완료
광역도로 2	감일∼초이간 도로개설	6.6km (6차로)	당초 : ’04.04.~’15.12. 변경 : ’04.04.~’18.09.	당초 : 272,725 변경 : 271,063 (서울시 14,749)	서울시구간 완료
광역도로 3	동부간선도로	9.5km (7~8차로)	당초 : ’04.09.~’19.12. 변경 : ’04.09.~’20.12.	당초 : 385,038 변경 : 609,926	공사중 (공정율55%)
광역도로 4	태릉∼구리IC간 광역도로확장	4.7km (4⇒6차로)	당초 : ’14.12.~’20.12. 변경 : ’14.12.~’21.12.	당초 : 137,400 변경 : 117,184 (서울시 45,442)	설계중 (설계공정율 60%)
광역도로 5	벌말로 도로확장	5.9km(차로)	당초 : -	당초 : -	광역교통정책실무위원회 상정안건 ('17.12.15.) 자료에 따라 부천시 소관사업
광역도로 6	봉오대로-김포공항간 도로확장	2.1km(차로)	당초 : -	당초 : -

① 사업명 : 시행계획(추진계획) 상의 사업명 기재

② 규  모 : 사업내용에 적합한 규모 기재

③ 사업기간 : (당초) 계획상 기간, (변경) 실제 기간, 년·월로 기재

④ 사업비 : (당초) 계획상 금액, (변경) 실제 금액

⑤ 추진상황 : 현재 추진상황을 작성(공정율 표시)

광역도로-1		상도교∼호장교간 도로개설

(담당자 : 김선배, 서울시청 도로계획과, 02-2133-8082)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 도봉구 도봉동(상도교) ~ 의정부시 장암동(호장교)

- 규    모 : L=1.8Km, 4차로 신설

- 사업기간 : 2012년 ~ 2017년

- 총사업비 : 34,725백만원

․국  비 : 17,362백만원

․지방비 : 17,363백만원 (서울 : 5,953백만원, 경기 : 11,410백만원)

- 시행주체 : 서울특별시, 경기도(의정부시)

- 운영주체 : 서울특별시, 경기도(의정부시)

○ 연차별 투자실적(별첨) ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진(예정) 일정

- 1971. 4. 7 : 도시계획시설(도로)결정 및 지적승인

- 2011.12.30 : 광역도로 지정(도봉구 상도교~의정부시 호장교,L=1.8km)

- 2012.12 ~ 2014.12. : 실시계획용역 시행(의정부시)

- 2015. 5.14 : 도시계획시설(도로) 실시계획 인가

- 2016. 4. 29 : 공사 착공(도봉구)

- 2017.12.22 : 공사 준공(도봉구)

○ 추진현황

- 도로개설 완료(2017.12.22.)에 따른 사업 완료

○ 향후대책(부진의 경우) 및 계획(시기미도래도 포함)

- 사업완료(2017.12.22.)로 내용 없음

광역도로-2		감일~초이 광역도로개설

(담당자 : 장익겸, 서울특별시 도로계획과, 02-2133-8089)

○ 사업개요

- 위    치 : 강동구 상일동 ~ 하남시 초이동

- 규    모 : L=6.6km B=30m(6차로) [서울시L=1.51km/하남시L=5.1km]

- 사업기간 : 2004.04 ~ 2018.09 (2016.11 서울시 구간 사업완료)

- 총사업비 : 서울시 구간 14,749백만원 (국비 : 7,374.5백만원 지방비 : 7,374.5백만원)

※총사업비(전체구간) : 271,063백만원

○ 연차별 투자실적(별첨)

○ 추진 일정

- ‘04년’04월 : 제2차 수도권 광역교통5개년계획 반영

- ‘06년’09월 : 예비타당성 완료(B/C=1.48, AHP=0.666)

- ‘08년’12월 ∼  ‘11년’08월 : 기본 및 실시설계

- ‘12년’02월 ∼  ‘18년’09월 : 공사

○ 추진 현황(정상)

- 16.11 서울시 구간 공사 완료

※ 전체 공정율 : 84 % (18.09 까지 하남시 구간 준공예정)

○향후대책 및 계획

- 16.11 서울시 구간 공사 완료로 해당사항 없음

광역도로-3		동부간선도로

(담당자 : 김선배, 서울시청 도로계획과, 02-2133-8082)

○ 사업개요

- 위    치 : 서울특별시 도봉구 창4동 녹천지하차도 ~ 의정부시 국도3호선

- 규    모 : L=9.52km(서울특별시 5.45km, 의정부시 4.07km), 4~6 → 7~8차로 확장

- 사업기간 : 2004년 ~ 2020년

- 총사업비 : 609,926백만원

․국  비 : 1231575 만원

․지방비 : 485,951백만원 (서울 : 438,954백만원, 경기 : 47,357백만원)

- 시행주체 : 서울특별시, 경기도(의정부시)

- 운영주체 : 서울특별시, 경기도(의정부시)

○ 연차별 투자실적(별첨) ☞ 별첨 엑셀양식으로 작성

○ 추진(예정) 일정

- 1996.06.~1997.06.: 타당성조사 및 기본계획

- 1999.12.~2004.02.: 기본설계

- 2004.04.21.: 광역도로 지정 (녹천교~의정부시계)

- 2004.09.~'07.08.: 실시설계

- 2007.10.17.: 공사계약 (2공구-한라건설, 3공구-남진건설외1)

- 2008.07.28.: 하천점용허가 및 실공사 착수

- 2015.07.23.: 제2차 사업계획변경 조정위원회 심의

- 2016.12.: 도봉지하차도 보완 설계완료

- 2017.10.: 방음벽 형식변경 및 도봉지하차도 추가진입로 설치요구 민원 지속

○ 추진현황

- 2018.04: 도봉지하차도 및 장암지하차도, 방음벽 설치 공사 중

○ 향후대책(부진의 경우) 및 계획(시기미도래도 포함)

-  2018.01. ~ 2018.12. : 총사업비 조정 대응(사업계획 변경 타당성 검토 등)

-  2020.12. : 동부간선도로 확장공사 완료 및 개통

광역도로-4		태릉~구리IC간 광역도로확장

(담당자 : 김영백, 서울시청 도로계획과, 02-2133-8087)

○ 사업개요

- 사업 필요성 및 목적 :

․서울과 구리 및 남양주간의 주요 교통축인 북부간선도로의 만성적인 교통정체 및 주변 대규모 개발사업에 따른 교통정체 심화 해소

․북부간선도로를 확장하여 도로용량을 확보하여 교통소통 개선 도모

- 위    치 :  북부간선도로 묵동IC(서울 중랑구) ~ 구리IC(구리 인창동)

- 규    모 :  폭 4~6 → 6~8 차로, 연장 2.7km (서울 1.25km, 구리 1.45km, 민자 2.08km)

※ 총 연장 중 「구리~포천 민자고속도로」에서 중랑IC 2.08㎞구간 공사시행 완료

- 사업기간 : 2014년 ~ 2021년

- 총사업비 : 117,184백만원

․국  비 : 52,692백만원

․지방비 : 52,692백만원 (서울 45,442백만원, 경기 7,250백만원)

․기  타 : 11,800백만원

※ 구리~갈매지구 광역교통개선분담금(LH 분담금 118억원)

- 시행주체 : 서울특별시, 경기도(구리시)

- 운영주체 : 서울특별시, 경기도(구리시)

○ 연차별 투자계획 및 실적(따로붙임 참조)

○ 추진(예정) 일정 : 건설공사 시행과정별로 추진일정(예정)을 작성

- 14.12～15.11 : 타당성 및 기본계획 용역

- 16.05 : 중앙 투자심사

- 16.11 ~ '18.05 : 기본 및 실시설계

- 18. 하반기 ~ '19.12 : 공사 및 보상시행 예정

○ 추진현황(정상)

- 설계 : 진행상황(공정 60%)

- 공사 : 미착공(공정 0%)

- 보상 : 시기 미도래(공정 0%)

※ 전체 공정율 :  5%

○ 향후대책 및 계획

-  2018년 5월까지 기본 및 실시설계 완료후 하반기를 보상업무 착수예정