한강 관광자원화 사업 추진 실적

2018. 09

	한강사업본부 시 설 부

한강 협력사업 예산현황

(2018. 9. 30 현재)                                                           (단위 : 억원)

구 분		년도별 예산					배정액	지출액	비고
		계	‘16	‘17	‘18	장래
계		492	89	271	50	82	410	248
1. 나들목 신설 및 개선	소 계	200	37	123	-	40	160	90
	개 화	49	30	19	-	-	49	49	공사완료
	망 원	34	3	31	-		34	18
	석 촌	45	-	5	-	40	5	-	공사보류
	광진교	72	4	68	-		72	23
2. 차수벽 철거 및 육갑문 설치	소 계	100	4	48	48	-	100	60	-
	잠 실	25	1	12	12		25	15
	잠실나루	25	1	12	12		25	15
	풍납토성	25	1	12	12		25	15
	나루터길	25	1	12	12		25	15
3. 여의샛강 유지유량 확보		130	11	40	37	42	88	36
4. 준설공사		50	25	25	-	-	50	50	공사완료
5. 호안블럭 정비		12	12	-	-	-	12	12	공사완료

1. 한강공원 나들목 신설 및 개선

‣한강 접근시설 부족 및 불편 지역에 대하여 나들목 신설 및 개선

‣“한강협력계획”에 의거 한강 접근성 개선 위한 기존 시설 개선 및 신설

□ 사업개요

○ 한강 협력계획에 의한 나들목 신설 및 개선 : 4개소 (신설 1, 개선3)

나들목명	위 치	총사업비(억원)			규모(m)			공사기간	비고 (공정율)
		계	국비	시비	폭	높이	연장
	계	295	200	95
개 화 (개선)	방화대교 남단	73	49	24	6.0	4.5	48.5	‘15.10~’18.5	100%
망 원 (개선)	성산대교 북단	80	34	46	5.0	3.5	74.5	‘17.11~‘20.5	28 %
석 촌 (개선)	송파구 잠실동	66	45	21	5.0	3.5	58.8	공사보류	-
광진교 남단 (신설)	강동구 천호동	76	72	4	5.0	3.5	73.8	‘17.11~‘20.5	26 %

□ 사업별 추진현황

1) 개화 나들목

○ 추진사항

-  ‘16. 8.23     : 3차 공사계약 및 착공 (국비)

-  ‘16.9~‘17.9  : 강관추진 및 토압지지대 설치,

나들목 구조물 1차 설치

-  ‘17.10~12   : 나들목 구조물 등 주요시설 설치

-  ‘18. 2.28     : 육갑문 거치

-  ‘18. 5.29     : 개화 나들목 개통

-  ‘18. 5.31     : 공사완료

2) 망원, 광진교남단  나들목

○ 추진사항

- ‘17.11. 22     : 공사착수

- ‘17.12~‘18.1  : 관계기관 협의, 지장물이설 등

- ‘18. 2.~4.    : 추진·도달기지 가시설 설치 및 그라우팅 시공

- ‘18. 5.~      : 압입장치 설치 및 강관압입 추진

○ 향후계획

- ‘18.10.~‘19.10  : 강관압입 추진, 나들목 육갑문 및 구조물 설치

- ‘18.11.~‘20.5 : 육갑문 설치, 제내·외지 개선 등 공사완료

3) 석촌  나들목

○ 추진사항

- ‘17. 5.24 : 주민설명회 개최(잠실2동주민센터)

※ 주민설명회 중 나들목 설치에 따른 차량통행 증가로 보행안전, 환경 및 소음문제 등 불편으로 반대 민원 발생

- ‘17. 5.31 : 송파구청 교통과에서 주민의견 제출

- ‘17. 6.02 : 송파구 진두생 시의원(환경수자원위원회, 자유한국당) 면담

최명길 국회의원(국민의당) 자료요청

- ‘17. 6.05 : 증설사업 취소 청원(잠실2동 엘스 및 리센츠 아파트 주민)

- ‘17. 6.07 : 우창윤 시의원(도시계획관리위원회, 더불어민주당) 면담

- ‘17. 6.09 : 잠실 엘스, 리센츠 입주자 대표, 송파구청 교통과장 면담

- ‘17. 6.30 : 김성태 국회의원(자유한국당 : 비례대표) 면담

- ‘17. 7.05 : 우창윤 시의원(도시계획관리위원회, 더불어민주당) 2차면담

- ‘17. 7.14 : 석촌나들목 증설사업 취소촉구 건의문 (송파구의회)

- ‘17. 7.15 : 잠실, 송파, 서울시 아파트 연합회 반대의견 제출

- ‘17. 8.08 : 아파트 주민대표(엘스,리센츠,5단지,송파구), 우창윤 시의원 3차 면담

- ‘17.8~12 : 주민대표, 송파구청 등 의견 수렴

- ‘18. 1.    : 공사추진 보류

○ 향후계획

- 기배정된 국비(5억) 반납 협의(서울지방국토관리청)

2. 차수벽 철거 및 육갑문 설치

“협력계획”에 의거 한강에 위치한 제방 및 도시고속화 도로로 인한 한강의 접근성을 개선하기 위해 기존 시설을 개선하여 이용 편의성 제고 및 관광활성화에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2018년

○ 총사업비 : 100억원 (전액국비 - ‘16년 4억원, ‘17년 48억원, ‘18년 48억원)

○ 차수벽 철거 및 육갑문 설치

나들목명	위 치	규 모(m)			사 업 비 (억원)				비 고 (공정율)
		폭	높이	길이	계	’16년	’17년	‘18년
계					100	4	48	48
잠 실	잠실동 잠실주공5단지	8.0	3.5	90.5	25	1	12	12	65%
잠실나루	잠실 장미아파트 인근	8.0	3.5	97.9	25	1	12	12	65%
풍납토성	서울아산병원 인근	4.5	3.1	65.5	25	1	12	12	68%
나루터길	천호동 광나루수영장 옆	8.0	3.5	81	25	1	12	12	70%

□ 추진사항

○ ‘17.11.08 : 공사계약 및 착수

○ ‘17.12.23  : 공사설명회 개최

○ ‘18.1.~5.  : 제외지 날개벽 철거 및 육갑문 기초파일‧문틀 설치

○ ‘18.6.~7.  : 육갑문 수문 및 권양기 설치

○ ‘18.09.    : 제내지 차수벽 철거

□ 향후계획

○ ‘18.10. : 제내지 차수벽 철거 진행

○ ‘18.11. : 나들목 내부 마감보수 및 부대공사

3. 여의샛강 유지유량 확보

물흐름 정체, 오니퇴적 등으로 악화된 여의샛강의 수질 및 물환경을 개선하여, 지역주민들에게 쾌적한 생활환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 사업위치 : 여의샛강 758,000㎡ (연장 4.6㎞, 폭 130m)

○ 사 업 비 : 13,000백만원 (전액국비)

- 연도별 예산 : ‘16년 11억, ’17년 40억, ‘18년 37억, ’19년이후 42억

□ 사업내용

○ 샛강 하상정비 : 샛강 수심확보 및 악취발생 저감을 위한 하상퇴적토 제거

○ 유입펌프 증설 : 유지유량 펌프장 증설(펌프2대→3대, 14,000톤/일→30,000톤/일)

○ 수질 정화시설 : 물순환 및 산소공급 장치 설치(시범2개 설치후 16개 확대 추진)

□ 추진사항

○ ‘16.10.12    : 기본 및 실시설계 착수

○ ’16.12~‘17.8  : 전문가 및 한강시민위원회 자문, 소규모 환경영향평가

○ ’17. 9. 05      : 여의샛강 유지유량 확보 기본계획 확정 및 추진계획 수립

○ ’18.  4. 20     : 수질정화 장치(물순환 및 산소공급시설 2개소) 시범 설치

○ ‘18. 4. 26      : 여의샛강 하상정비공사 완료

○ ’18. 6. 11   : 여의샛강 유지유량 확보 기본계획 및 실시설계 용역 준공

○ ‘18.  9. 30      : 펌프장 구조물 및 펌프 설치

□ 추진계획

○‘18.10 : 전기 수전 및 펌프장 통수

○‘18.12  : 시범 설치한 수질정화장치 효과 분석 및 추가 여부 검토

4. 한강 준설공사

◦ 지천합류부 및 한강하류에 퇴적된 토사를 적기에 제거함으로써

수해예방 및 유수소통 개선

◦ 상수원 수질확보를 위해 잠실수중보 상류 취수장 주변 퇴적된 토사 준설

□ 사업개요

○ 위   치 : 강동구 하일동~강서구 개화동 시계

○ 규   모 : 잠실수중보 하류 준설 - 117,000㎥

잠실수중보 상류 준설 -   19,300㎥

준설토 운반          - 136,300㎥

○ 사 업 비 : 4,491백만원(시비 1,003, 국비 2,500, 기금 988)

- 저수로 준설   : 4,261백만원(시비 883, 국비 2,500, 기금 878)

- 수로조사 용역 : 230백만원(시비 120, 기금 110)

○ 사업기간 : 2017. 1 ~ 12.

□ 추진사항

○ ‘17. 2. 07 : 공사발주 방침 (국비 미배정으로 차수계약 시행)

- 1차계약 : 시비 및 기금, 2차 계약: 국비

○ ‘17. 2. 22 : 낙찰자 결정

○ ‘17. 3. 08  : 공사 계약

○ ‘17. 6. 29  : 2차공사(국비25억원) 계약 및 착공

○ ‘17. 3~10  : 준설공사 시행

○ ‘17.12.30 : 공사 준공