기본과 원칙준수의 사전준비는

우리 모두의 안전과 생명을 지킨다

- 서울교통공사 1~8호선 토목분야 -

2019년 유지관리 이행계획

2019. 02.

기술본부[토목처]

[서울교통공사 1~8호선 토목분야]

2019년 유지관리 이행계획

서울교통공사 1~8호선 토목분야 2019년 유지관리 이행계획을 수립․시행하여 시설물 안전과 열차안전운행에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ. 관련근거

□ 철도안전법 제7조(안전관리체계의 승인), 제8조(안전관리체계 유지 등)

□ 철도안전관리체계 기술기준(국토교통부 고시) 12.4 유지관리 이행계획

□ 안전관리체계관리규정 제149조(유지관리 이행계획의 수립)

Ⅱ. 유지관리 이행계획 목적

1~8호선 토목시설물에 대한 각종 안전점검과 유지보수공사 시행으로 토목시설물의 안전과 열차 안전운행을 확보하는 데 있음

Ⅲ. 유지관리 점검(보수·교체·개량) 대상     (단위:㎞)

호선	계	교량 및 터널
		1종 시설물				2종 시설물		기타
		소계	교량	고가교	터널 (BOX포함)	지하역고가역	옹벽,사면	U-TYPE 옹벽 지상
계	318.959	284.728	7.146	17.075	260.507	23.883	3.726	6.622
1	9.891	6.583	-	-	6.583	2.095	-	1.213
2	62.15	48.571	3.188	9.881	35.502	9.742	1.295	3.837
3	41.406	33.607	1.280	1.238	31.089	6.921	-	0.878
4	33.369	27.55	1.445	4.466	21.639	5.125	-	0.694
5	54.891	54.670	-	0.434	54.236	-	0.221	-
6	36.629	36.157	-	0.060	36.097	-	0.472	-
7	59.175	57.863	1.233	0.956	55.674	-	1.312	-
8	21.448	19.727	-	0.040	19.687	-	1.721	-

Ⅳ. 유지관리 점검(보수·교체·개량) 방법

□ 관련법(시설물의 안전관리에 관한 특별법1) 및 지방계약법)에 의한 점검 종류

구분		대상시설물	시행주기		시 행 근 거
안전 점검	정기점검	1,2종	반기 1회		시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조
	정밀점검	교량및터널 (1,2종)	A급	3년 1회
			B,C급	2년 1회
			D급	1년 1회
정밀안전진단		교량및터널 1종	A급	6년 1회	시설물의 안전관리에 관한 특별법 제9조
			B,C급	5년 1회
			D급	4년 1회
하자검사		건설공사 자체공사	연 2회		지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

※ 점검방법 : “안전점검 및 정밀안전진단 세부지침” 현장조사(균열, 누수 등)에 의거 점검시행 (정기점검 : 도보육안점검, 정밀점검 이상 : 도보+모터카탑승 육안점검)

□ 기타점검

구분	점검주기	실시대상	비고
중점관리(관찰)개소 점검	월 1회	1~4호선 지하구간
	반기 1회	1~8호선 전 구간
화재중점관리개소 점검	월 2회	고가 화재취약 개소
주요 지상 중점관리개소 점검	월 1회	지상 환기구 등
고가, 교량 특별점검	해빙기, 혹한, 혹서기	고가 및 교량구간
고가역사 3차원 변위측정	분기별 1회	신대방역, 구로디지털단지역, 대림역
계절별 안전점검	해빙기: 2회 여름철: 3회 겨울철: 3회	중점관리개소
철도보호지구 안전점검	A급: 주1회 B급: 월2회 C급: 월1회	연결통로 및 인접굴착공사장

※ 점검방법 : 육안점검(중점관리는 비파괴검사 병행 시행)

Ⅴ. 유지관리 점검(보수·교체·개량) 인력

□ 토목담당 부서 조직 및 인원 : 총 명

					본사			토목처(16명)
					1~8호선 토목시설물 유지관리 총괄
현업	토목1사업소 (75명)					현업	토목2사업소 (61명)				현업	16개기술센터(토목) (83명)
1~4호선 토목시설물 안전점검 및 정밀안전진단 관리감독 / 각종 보수공사 설계 · 감독 1~4호선 승강편의시설 설치공사 설계관리 및 감독						5~8호선 토목시설물 안전점검 및 정밀안전진단 관리감독 / 각종 보수공사 설계 · 감독 5~8호선 승강편의시설 설치공사 설계관리 및 감독					1~8호선 토목시설물 일상 각종 보수공사 및 용역 감독업무

Ⅵ. 유지관리 점검(보수·교체·개량) 일정

1. 유지관리 점검 일정

□ 직원 자체점검

구 분	점검기간	점검자	점검대상	비고
정기 점검	상반기 (1월~6월)	토목 1사업소	L=146.8km /120역 (1~4호선 전구간)
	하반기 (7월~12월)		L=146.8km /120역 (1~4호선 전구간)
정밀 점검	상반기 (1월~6월)		L=58.5㎞ /52역 (1~4호선 일부구간)	2019~2020 정밀안전점검
	하반기 (7월~12월)		L=58.5㎞ /52역 (1~4호선 일부구간)
하자 검사	연2회 이상		3호선 연장구간 및 자체공사, 연결통로 공사 (총 62 건)	보수보강: 2회 건설공사,연결통로: 4회
계절별 점검	해빙기	토목 1,2 사업소	계절별 중점관리개소 (U-Type, 차수판, 고가하부 등)
	여름철
	겨울철
정기 점검	상반기 (1월~6월)	토목 2사업소	L=172.143㎞ (5~8호선 전구간)	2종 건축물 제외
	하반기 (7월~12월)		L=128.268㎞ (5~8호선 일부구간)
정밀 점검	7월~11월		L=39.480㎞ (5,7,8호선 일부구간)
하자 검사	연2회		7호선 연장구간 건설공사 (6건) 및 발주공사 6건	정기점검과 병행시행

□ 정밀안전진단용역

용역대상	용역기간	사업비
○1,2호선 남영~서울역 등 13개구간 지하구조물 정밀안전진단 용역 (L= 12.5km)	‘18.09.~’19.09.	957 백만원
○2호선 시청~을지로입구역 등 11개구간 지하구조물 정밀안전진단용역 (L=11.9km)	’19.07.~’20.05	1,616 백만원
○3호선 동대입구~약수역 등 14개구간 지하구조물 정밀안전진단 용역 (L= 14.4km)	‘18.09.~’19.09.	1,384 백만원
○3,4호선 지축~구파발역 등 10개구간 고가구조물 정밀안전진단 용역 (L=6.5km)	‘18.09.~’19.07.	866 백만원
○4호선 수유~미아역 등 5개구간 지하구조물 정밀안전진단 용역 (L= 6.6km)	‘18.12.~’19.07.	700 백만원
○4호선 한성대입구~혜화역 등 4개구간 지하구조물 정밀안전진단용역 (L=4.4km)	’19.11.~’20.05.	653 백만원
○4호선 동작대교 외1개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역 (L=1.4km)	‘18.04.~’19.03.	241 백만원
○2호선 한양대~뚝섬 등 6개구간 교량구조물 정밀안전점검용역 (L=5.2km)	‘19.03.~’19.06.	174 백만원
○2호선 신림~신대방 등 7개구간 교량구조물 정밀안전점검용역 (L=5.0km)	‘19.09.~’19.12.	240 백만원
○ 7호선 건대입구~신대방삼거리역간 토목시설물 정밀안전진단용역 (건대입구~신대방삼거리역, L=16km)	‘19.04.~ ’20.06.30.까지	2,144 백만원
○ 7호선 신대방삼거리~온수종단부간 토목시설물 정밀안전진단용역 (신대방역~온수종단부, L=12.1km)	‘19.04.~ ’20.06.30.까지	1,557 백만원
○ 8호선 터널시점~몽촌토성역간 토목시설물 정밀안전진단용역 (암사터널시점~몽촌토성역, L=4.4km)	‘19.01.~ ’19.12.15.까지	705 백만원

□ 기타점검

가. 중점관리대상 점검

1) 기간 : 2019년 1월~12월

2) 대상 : 1~8호선 57개소

계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선	비 고
57(20)	-	5(-)	3(-)	2(-)	22(10)	4(2)	14(4)	7(4)	( ) 비파괴검사

3) 점검사항

○ 구조물 결함사항(균열, 누수, 공동 등) 및 하자보수, 보강상태 등

○ 유리막대, 균열자 등 계측기기 설치시기, 위치 및 변화여부 등

○ 구조물 점검 기록유지 및 사후관리 상태

○ 중점관리구간에 설치된 계측실시로 변화여부 확인

○ 구조물 이상변위 여부 확인

○ 비파괴검사 개소는 균열깊이 측정, 강도측정 등

나. 중점관찰개소 점검

1) 기간 : 2019년 1월~12월(반기 1회 시행)

2) 대상 : 5~8호선 구간 중 373개소

계	5호선	6호선	7호선	8호선	비 고
373	126	73	141	33

다. 화재중점 관리개소 점검(고가)

1) 기간: 2019년 1월~12월(월 2회 시행)

2) 대상: 1~4호선 취약개소(고가 12개 구간)

계	1호선	2호선	3호선	4호선	비 고
12	-	5	2	5

3) 점검사항

○ 고가하부 화재발생 우려 불법점용 시설물 등의 적치 발생 유무

라. 주요 지상중점 관리개소 점검

1) 기간: 2019년 1월 ~12월(월 1회 시행)

2) 대상: 1~4호선 환기구, U-Type 구간

3) 점검사항 :

○ 환기구 시설물 외관상태, 그레이팅 출입문 시건장치 설치유무, 색인표 상태, 오물 퇴적상태 등

○ U-Type 구간 울타리 이상 유무, 외부인 출입방지 유무 등

라. 계절별 점검(겨울철, 해빙기, 여름철)

1) 기간: 계절별 안전대책 기간 내

2) 대상: 1~8호선 토목구조물, 지하철 인접굴착공사 및 자체공사장 (편의, 내진), 고가 교량 시설물

3) 점검사항:

○ 겨울철: 토목구조물 순회점검(구조물 누수·결빙상태, 배수관 탈락여부 등), 강풍 대비 선로주변 수목, 광고판 점검, 지하철 인접굴착공사 점검, 교육실시(화재예방, 안전, 직무교육)

○ 해빙기: 토목구조물 순회점검(구조물 배수상태, 누수 및 박락여부, 구조물 계절별 변화상태 등), 지하철 인접굴착공사 점검, 교육실시(안전관리)

○ 여름철: 토목구조물 순회점검, 굴착공사장(인접, 편의) 점검, 수방대비 환기구, 차수문, 공동구 관리상태 점검, 수방자재 사전확보 및 관리, 교육실시(여름철 종합대책)

마. 철도보호지구 안전점검

1) 기간 : 2019년 1월~12월(분기 1회 시행)

2) 대상 : 1~8호선 철도보호지구 내 인접굴착공사장

3) 점검사항

○ 협의사항 이행여부(토류시설 및 가시설 설치상태 등)

○ 공사장 안전관리 실태 등

바. 고가역사 3차원 변위측정

1) 기간: 2019년 1월 ~12월 (분기별 1회)

2) 대상: 2호선 신대방, 구로디지털단지, 대림역

3) 점검사항

○ 고가 역사구조물 시공 Joint에 설치 된 계측기의 3축(수평, 침하, 전도) 방향별 변위 측정

사. 한강상 교량 전담주치의 점검

1) 기간: 2019년 1월 ~12월 (분기별 1회)

2) 대상: 1~4호선 6개 교량(당산, 대림, 장안, 잠실, 동호, 동작)

3) 점검사항

○ 교량시설물에 대해 전담주치의 합동점검

2. 유지관리 보수·교체·개량 일정

사업명	추진기간	공사개요	사업비
서울교통공사 1~4호선 지하구조물 보수 및 유지보수공사	‘19.05. ~ ‘20.04.	- 1~4호선 지하구조물 보수 (균열보수 1식, 누수보수 1식 등)	1,356백만원 (시행예정)
서울교통공사 1~4호선 환기구 정비공사	‘19.05. ~ ‘20.04.	-1~4호선 환기구 보수 (판석정비 1식, 그레이팅 정비 및 보강 1식)	380백만원 (시행예정)
2호선 대림, 구로디지털단지역 정화조 증설 토목공사	‘18.03. ~ ‘19.05.	- 정화조 증설에 따른 토목구조물(PIT+정화조) 설치 (대림역 : 800인조 이상, 구로디지털단지역 : 1000인조 이상)	651백만원 (시행중)
2~4호선 고가 및 철교 구조물 보수공사	‘18.07. ~ ‘20.01	- 고가 및 철교보수 (균열 550m, 면보수 1692㎡ 등)	1,130백만원 (시행중)
지하철 4호선 고가 및 역사구조물 내진보강공사(6공구)	‘16.01.14 ~ ‘19.02.28	- 교량받침교체 1,314개 - 섬유판보강 720m - 섬유시트보강 951㎡	3,452백만원 (시행중)
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(9공구)	‘18.01.09 ~ ‘21.01.07	- 기둥연성보강 568㎡ - 전단보강(벽체) 4,279m - 전단보강(슬라브) 722개소 - 벽체보강 1,062㎡	4,349백만원 (시행중)
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(10공구)	‘18.01.12 ~ ‘21.01.10	- 기둥연성보강 2,171㎡ - 전단보강(벽체) 611m - 전단보강(슬라브) 942개소	4,212백만원 (시행중)
지하철 1~2호선 지하구조물 내진보강공사(11공구)	‘18.01.12 ~ ‘21.01.10	- 아라미드 섬유시트 (SKA)보강 711m - 불연아라미드(NFA)보강 1,034㎡ - 하이브리드 섬유보강 789㎡ - 포대내진(SRF)보강 551㎡	3,910백만원 (시행중)
지하철 3~4호선 지하구조물 내진보강공사(12공구)	‘18.01.10 ~ ‘21.01.08	- 복합섬유판보강 1,425㎡ - 아라미드섬유시트보강 711㎡ - 하이브리드섬유보강 423㎡ - 불연아라미드보강 313㎡	3,328백만원 (시행중)
지하철 4호선 창동~쌍문 방음벽교체 및 성능개선공사	‘18.01.12 ~ ‘20.07.12	- 방음벽교체 808m - 중성화방지 5,558㎡ - 슬래브보강 321㎡	2,577백만원 (시행중)
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(13공구)	‘18.08.06 ~ ‘20.08.04	- 기둥연성보강 6,424㎡ - 전단보강(일면) 2,175공	6,952백만원 (시행중)
지하철 2,4호선 지하구조물 내진보강공사(14공구)	‘18.07.18 ~ ‘20.07.16	- 전단보강(SOS) 2,380개소	5,797백만원 (시행중)
지하철 1호선 지하구조물 내진보강공사(15공구)	‘19.01.14 ~ ‘20.01.13	- 기둥연성보강 4,348㎡	6,132백만원 (시행중)
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(16공구)	‘19.01.14 ~ ‘20.01.13	- 기둥연성보강 3,177㎡	2,440백만원 (시행중)
지하철 3호선 지하구조물 내진보강공사(19공구)	‘19.01.14 ~ ‘20.01.13	- 기둥연성보강 3,875㎡	4,738백만원 (시행중)
지하철 4호선 지하구조물 내진보강공사(20공구)	‘19.01.14 ~ ‘20.01.13	- 기둥연성보강 6,451㎡	6,672백만원 (시행중)
지하철 4호선 지하구조물 내진보강공사(21공구)	‘19.01.14 ~ ‘20.01.13	- 기둥연성보강 2,942㎡	2,335백만원 (시행중)
지하철 1,3호선 지하구조물 내진보강공사(22공구)	‘19.01.14 ~ ‘20.01.13	- 기둥연성보강 2,212㎡	3,656백만원 (시행중)
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(23공구)	‘19.01.14 ~ ‘20.01.13	- 기둥연성보강 3,668㎡	5,512백만원 (시행중)
지하철 4호선 지하구조물 내진보강공사(24공구)	‘19.01.14 ~ ‘20.01.13	- 기둥연성보강 2,146㎡	3,748백만원 (시행중)
지하철 4호선 상계~노원 방음벽교체공사	‘19.02.12 ~ ‘22.02.10	- 방음벽교체 1,157m	3,062백만원 (시행중)
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(17-1공구)	10개월	- 기둥연성보강 2,847㎡	2,668백만원 (시행예정)
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(17-2공구)	10개월	- 기둥연성보강 3,003㎡	5,272백만원 (시행예정)
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(17-3공구)	10개월	- 기둥연성보강 2,860㎡	4,456백만원 (시행예정)
2019년 5~8호선 토목시설물 개량공사	‘19.1월~ ‘19.12월	안전점검 및 정밀안전진단 결과 발견된 결함사항 보수	530백만원 (예산금액)

Ⅶ. 전년도 유지관리 이행실적 분석

□ 직원 자체점검 실적

구분	점검기간	점검대상	점검결과
정기점검	‘18.01.01.~06.30.	1~4호선 L=146.8km	균열 1건 / 누수 19건
	‘18.07.01.~12.31.	1~4호선 L=146.8km	균열 2건 / 누수 43건
	‘18.01.15.~06.30.	5~8호선 L=142.219㎞	균열 13건 / 누수 44건
	‘18.07.16.~12.31.	5,7,8호선 L=68.343㎞	균열 20건 / 누수 5건 / 기타 3건
정밀점검	‘18.01.01.~ ‘18.12.31.	1~2호선 L=62.03km	균열 8건 / 누수 6건
		3~4호선 L=43.95km
	‘18.01.15.~02.27.	7호선 L=12.634㎞	균열 15건 / 누수 25건 / 기타 25건
	‘18.01.15.~06.30.	5,7호선 L=17.288㎞	균열 14건 / 누수 6건
	‘18.07.16.~11.25.	6,8호선 L=41.226㎞	균열 32건 / 누수 9건
하자검사	‘18.01.01~06.30	3호선 연장구간 301, 302공구 및 자체공사, 연결통로 공사	백태 38건 / 누수 8건
	‘18.07.01~12.31		백태 25건 / 누수 7건
하자검사	‘17.01.05~06.25	7호선 연장구간 건설공사 6개공구 및 3호선 연장선 301공구 건설공사 2개공구	균열 97건 / 누수 125건
	‘17.07.01~12.31		균열 226건 / 누수 142건

‣ 시특법에 의한 안전점검(정기, 정밀)과 지방계약법에 의한 하자검사를 적기에 시행하였으며, 점검결과 시설물에 특별한 문제가 없는 상태로 경미한 균열, 누수 등이 발생하였음

‣ 정기점검의 경우 계획물량에 따라 차질 없이 안전점검을 시행하였으며, 정밀점검 대상구간(2017~2018)의 경우 2017년 실시 잔여구간에 대해 100% 완료함.

‣ 2018년 정기점검 및 정밀점검 지적사항은 자체 발주공사로 2019년 이후 유지보수공사에 포함하여 순차적으로 시행예정이며 하자검사는 해당 시공사에 하자보수 요청하여 하자보수 중에 있음

□ 정밀안전진단용역 추진실적

연번	용역구간	진단기간	진단기관(준공액)
1	4호선 이촌~동작 등 5개구간 지하구조물 L=5.66km	2017.04.24.~2018.02.01. [안전등급 B(4개구간), C(1개구간)]	㈜삼림엔지니어링 외 3개사 (550백만원)
2	2호선 을지로3가~ 을지로4가역 등 13개구간 지하구조물 L=12.60km	2017.04.24.~2018.03.16. [안전등급 B]	한국시설안전연구원 외 3개사 (1,099백만원)
3	2호선 신림~신대방역 등 7개구간 구가구조물 L=1.202km	2017.04.24.~2018.03.16. [안전등급 B]	한국시설안전연구원 외 3개사 (679백만원)
4	1호선 종각~종로3가역 등 4개구간 지하구조물 L=3.04km	2017.10.11.~2018.06.07. [안전등급 B(1개구간), C(3개구간)]	㈜동우기술단 외 2개사 (362백만원)
5	3호선 동호철교 L=1.21km	2017.07.07.~2018.07.31. [안전등급 C]	한국시설안전공단 (347백만원)
6	3호선 지축~구파발역 등 9개구간 지하구조물 L=10.45km	2017.10.11.~2018.08.06. [안전등급 B]	㈜한국구조물안전연구원 외 2개사 (927백만원)
7	4호선 숙대입구~삼각지역 등 3개구간 지하구조물 L=3.10km	2017.12.12.∼2018.08.08. [안전등급 B(2개구간), C(1개구간)]	한국시설안전공단 (404백만원)
8	5호선 목동~마포역간 L=9.298㎞	2018.05.16.~2018.11.28. [안전등급 B, C]	한국시설안전공단 (930백만원)
9	5호선 영등포 및 도심구간(목동~마포제외) L=12.5㎞	2017.12.06.~2018.11.28. [안전등급 B]	에스큐엔지니어링(주) 외 2개사 (1,321백만원)
10	5호선 거여구간 L=8.5㎞	2018.01.15.~2018.12.14. [안전등급 B]	㈜삼림엔지니어링 외 1개사 (882백만원)
11	7호선 강북구간 L=21.9㎞	2018.03.12.~2018.11.26. [안전등급 B]	㈜한국시설안전연구원 외 2개사 (1,747백만원)
12	8호선 성남구간 L=17.1㎞	2017.12.06.~2018.11.26. [안전등급 B, C]	㈜삼림엔지니어링 외 2개사 (1,453백만원)

‣ 1종 시설물에 정밀안전진단용역 결과, 2017년 발주분의 사업이 모두 준공완료 되었으며,

‣ 전체 시설물의 종합평가(안전등급)는 “B”또는 “C”등급으로 구조물에 특별한 문제점은 없으며, 발견된 경미한 결함사항(균열, 누수 등)은 예산확보하여 유지보수공사 추진예정임

‣ 5호선 목동~마포역간 외 4건의 정밀안전진단용역 결과, 전체 시설물의 종합평가(안전등급) “B,C”등급으로 구조물에 특별한 문제점은 없으며, 발견된 경미한 결함사항(균열, 누수 등)은 2020년 예산확보하여 유지보수공사 추진예정임

□ 기타 구조물 점검실적

구 분	점검기간	진단기간	점검결과
중점관리	‘18.01.01.~06.30.	1~4호선 10개구간	구조물에 특별한 문제점 없음
	‘18.07.01.~12.31.
	‘18.01.23.~06.12.	5~8호선 47개소 (비파괴검사 20개소)	구조물에 특별한 문제점 없음
	‘18.08.05.~12.21.
중점 관찰	‘17.01.15.~06.30.	5~8호선 373개소	구조물에 특별한 문제점 없음
	‘17.07.01.~12.31.
취약개소	‘18.01.01.~06.30.	취약개소: 6개구간 화재중점관리개소: 12개구간	구조물에 특별한 문제점 없음
	‘18.07.01.~12.31.
계절별 안전점검	‘18.01.01~12.31.	계절별 중점관리개소, 자체공사장, 인접굴착공사장	구조물에 특별한 문제점 없음
혹서기	‘18.01.28~ 02.09.	교량 및 고가 L=2.668㎞ [신축이음부 41개소/ 교좌장치 378개소]	온도변화에 따라 가동범위내에서 정상 가동되며 특이사항 없음
혹한기	‘18.07.22~ 08.08.
철도 보호 지구	‘18.01.01~12.31.	철도보호지구 내 인접굴착공사장(1~8호선)	굴착공사로 구조물에 특별한 영향 없음
고가역사 3차원 변위측정	‘18.01.01~12.31.	2호선 신대방, 구로디지털단지, 대림역	구조물에 특별한 문제점 없음

‣ 1~8호선 중점관리(관찰)개소와 교량 및 고가부에 대한 주기적인 육안점검결과 이상없음

‣ 철도보호지구(철도경계선으로부터 30m 이내의 지역) 내 인접굴착공사장 안전점검의 경우 관리등급에 따른 점검 및 분기별 특별점검을 통해 관리중임.

‣ 계절별(여름철, 겨울철, 해빙기) 안전대책을 수립하고 중점관리 시설물 사전점검 시행으로 안전위해요소를 선조치하여 재해예방 및 안전관리에 만전을 기하였음.

□ 2018년 보수공사 추진실적

사업명	추진기간	공사개요	준공금액
2017년도 서울교통공사 1,2호선 지하구조물 보수공사	‘18.01.26.~ ‘19.02.20.	- 1~4호선 지하구조물 보수 (균열 6377m, 단면보수 862m2 등)	1,237백만원
2017년도 서울교통공사 1~4호선 환기구 정비공사	‘17.12.11.~ ‘19.01.07.	- 1~4호선 환기구 정비 및 보강 (입식환기구 개선 4개소, 그레이팅 정비 4m2 등)	334백만원
2호선 대림철교 P6외 1개소 보강공사	‘18.10.24.~ ‘19.01.29.	강재보강 및 단면확대 2개소 아스콘포장, 보도블럭 포장 등	162백만원
지하철 2,4호선 고가 및 교량구조물 내진보강공사(1공구)	‘15.12.03.~ ‘18.06.25.	- 교량받침교체 174개 - 댐퍼설치 21개 - 섬유판부착 10,284m	7,390백만원
지하철 1~2호선 고가 및 교량구조물 내진보강공사(3공구)	‘16.01.14.~ ‘18.03.21.	- 교량받침교체 414개 - 교각확대 228m	2,265백만원
지하철 2호선 지하구간 내진보강공사(4공구)	‘16.01.25.~ ‘18.08.01.	전단보강 13,232m 기둥연성보강 9,271㎡	5,125백만원
지하철 2~3호선 지하구간 내진보강공사(5공구)	‘16.02.29.~ ‘18.08.31.	전단보강(SOS) 668개소 벽체보강 821㎡ 기둥연성보강 6,635㎡	5,048백만원
지하철 2호선 지하구간 내진보강공사(8공구)	‘16.01.14.~ ‘18.03.22.	전단보강 6,219m 기둥연성보강 5,330㎡	3,600백만원
지하철 3호선 금호~옥수역간 고가구조물 내진보강공사(2차)	‘17.12.19.~ ‘18.12.31.	교량받침 8개소	317백만원
5,6호선 토목시설물 유지보수공사	‘18.03.30.~ ‘18.12.24.	- 6호선 전 구간 (균열 2,850.50m, 누수 100.8m 등)	321백만원
7,8호선 토목시설물 유지보수공사	‘18.03.30.~ ‘18.12.26.	- 7호선 건대입구~장승배기 - 8호선 암사시점~잠실 (균열 2,021.1m, 누수 244.4m 등)	257백만원

‣ 구조물 결함사항 적정 보수를 통해 구조물 내구성 향상에 철저를 기하고 있으며, 적정 시행결과 전체 시설물에 대한 안전등급을 “C등급(보통)” 이상 유지하고 있음

Ⅷ. 중장기 유지관리 계획과의 연계

□ 토목시설물 유지보수공사

전략목표

안전운행을 최우선으로

수행목적

시특법에 의거 시행한 안전점검 및 정밀안전진단용역 결과

지적사항에 대한 보수공사 추진

추진계획

구분	계	2019	2020	2021
물량(건)	28	5	6	6
사업비(억원)	137.1	12.3	27	27

□ 토목시설물 정밀안전진단 용역

전략목표

안전운행을 최우선으로

수행목적

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조(정밀안전진단의 실시)

에 의거 정밀안전진단 용역 시행

추진계획

구분	계	2019	2020	2021	2022
물량(km)	183.8	44.9	43.2	48.3	47.4
사업비(억원)	292.4	66.7	76.7	94.5	54.5

□ 토목시설물 내진성능 개선공사

전략목표

내진성능 확보를 최우선으로

수행목적

지진재해대책법 제26조에 의거 내진보강 의무화로, 도시철도 내진설계 기준 미반영 시설물에 대한 내진성능 개선공사 시행

추진계획

구분	계	기투자	2018	2019	2020 이후
사업비(억원)	3,221	1,266	592	551	812

Ⅸ. 결론 및 건의

위와 같이 2019년 토목분야 1~8호선 유지관리 이행계획을 수립·시행하여 구조물의 안전확보와 열차 안전운행에 철저를 기하고자 합니다.  끝.