		마포구
수신	서울특별시장(조경과장)
(경유)
제목	2019년 가로변 녹지량 확충사업 변경 승인 요청

우리 구에서 추진하는 2019년 가로변 녹지량 확충사업과 관련하여, 현장여건 등에 따른 사업규모 조정으로 아래와 같이 사업계획을 변경 추진하고자 승인 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

▢ 변경내역

○ 변경사유: 현장여건 및 설계심의 내용 반영에 따른 사업규모 조정

구분	당초	변경	비고
대 상 지	- 월드컵북로, 가양대로, 성산로	- 월드컵북로, 가양대로, 성산로 - 합정역 교통섬 등 4개소(추가)
규 모	- 1,880㎡	- 2,900㎡
사 업 비	- 600백만원	- 600백만원
사업내용	- 중앙분리대 및 가로변 녹지 조성 - 기 조성 녹지 정비	- 중앙분리대 및 가로변 녹지 조성 - 기 조성 녹지 정비 - 교통섬 녹지 정비

붙임  1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 2019년 가로변 녹지량 확충사업 변경 추진계획 1부.  끝.

							마포구청장
★주무관										조경팀장										공원녹지과장
협조자
시행			공원녹지과-15536									(	2019.08.28.					)		접수			조경과-12546								(	2019.8.28.					)
우	03937					서울특별시 마포구 월드컵로 212 (성산동)															/			http://www.mapo.go.kr
전화		02-3153-9563						/전송			02-3153-9599					/	yjm29@mapo.go.kr												/	비공개(5)