문서번호

공원녹지과-15409

★주무관

조경팀장

공원녹지과장

도시환경국장

문서공개

비공개(5)

보존기간

5년

결재일자

2019.08.27.

협조

2019년 가로변 녹지량 확충사업 변경 추진계획

2019. 08.

도시환경국

(공원녹지과)

2019년 가로변 녹지량 확충사업 변경 추진계획

2019년 가로변 녹지량 확충사업과 관련하여 사업규모 조정에 따라 대상지를 추가로 발굴하여 사업을 추진하고자 함.

Ⅰ		2019년 사업개요

사업기간: 2019. 2. ~ 11.

대 상 지: 월드컵북로, 가양대로, 성산로 등(규모: 1,880㎡)

사업내용: 중앙분리대 및 가로변 녹지 조성, 기 조성 녹지 정비

사 업 비: 600,000천원(市費)

대상지	예산액(천원)	재배정액(천원)	잔액(천원)	비고
계	600,000	377,879	222,121
월드컵북로, 가양대로	300,000	166,826	133,174
성산로	300,000	211,053	88,947

추진현황

- 2019. 08. 22.: 가로변 녹지량 확충공사(성산로) 공사비 재배정 요청

- 2019. 08. 23.: 가로변 녹지량 확충공사(월드컵북로, 가양대로) 발주

Ⅱ		사업계획(변경)

변경사유: 현장여건 및 설계 심의내용 반영에 따른 사업규모 조정

변경내용: 사업 대상지(합정역 교통섬 등) 추가

구분	당초			변경			비고
	대상지	규모(㎡)	사업비(천원)	대상지	규모(㎡)	사업비(천원)
계		1,880	600,000		2,900	600,000
기존 대상지	월드컵북로, 가양대로	1,000	300,000	월드컵북로, 가양대로	410	166,826
	성산로	880	300,000	성산로	990	211,053
추가 대상지				합정역 등 4개소	1,500	222,121

Ⅲ		세부 추진계획

추진기간: 2019. 8. ~ 11.

대 상 지: 합정역 교통섬 등 4개소

규    모: 1,500㎡

- 합정역(300㎡), 신촌역(700㎡), 공덕오거리(300㎡), 동교동삼거리(100㎡)

사업내용: 교통섬 녹지 조성 및 정비

소요예산: 222,121천원

추진방법

구분	추진기간	계약방법	소요예산(천원)	비고
계			222,121
실시설계용역	2019. 9. ~ 10.	수의계약	11,723
공사	2019. 10. ~ 11.	제한경쟁계약	210,398

Ⅳ		향 후 일 정

2019. 08. 27.: 사업계획 변경 승인 요청(공원녹지과 → 市 조경과)

2019. 09. 06.: 가로변 녹지량 확충공사(합정역 등 4개소) 설계용역 발주

붙임  1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 2019년 가로변 녹지량 확충 추진계획 1부.  끝.