2019년 빗물관리시설 확충사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 자치구 및 시 산하기관의 사업대상지

○ 사업기간 : 2019.01. ~ 2019.12.

○ 사 업 비 : 3,050백만원(시설비 1,950, 자치단체 보조 1,100)

- 시설비 : 사업비의 100% 지원(서울시 산하기관 및 자치구)

- 자치단체자본보조비 : 사업비의 50% 지원(자치구 50% 확보)

○ 사업내용 : 빗물관리시설 설치(투수블록, 침투트렌치 띠녹지, 빗물정원 등)

당초	변경	당초	변경

□ 추진방향

○ 도시의 건강한 물환경 보전(물순환 회복)을 위한 사업 추진

- 빗물이 토양에 침투·저류되는 빗물시설(저영향개발기법 적용) 설치

- 노후된 보도구간 정비(교체)시 빗물이 침투되는 투수블록 설치

- 가로변 띠녹지 등 조경 공간을 활용한 다양한 식생형 LID시설 설치

□ 세부추진계획

○ 신청 대상지 심사 및 사업지 선정

- 사업신정 및 선정 심사 : 2019. 1~3월

- 위원구성 : 물순환시민위원회 위원 등 외부 전문가 2~3인

- 심사내용 : 신청지에 대한 적정성 심사 및 사업대상지 확정

○ 설계 및 전문가 자문(검토)

- 설계기간 : 2019. 4월 ~ 7월

▷ 저영향개발 전문가 및 디자인 전문가 참여(협업)

- 설계자문 : 2019. 5월 ~ 6월

- 자문위원 구성 : 물순환시민위원 등 LID 외부 전문가 2~3인

▷ 빗물관리시설 설계 내용 검토 및 보완사항 검토

○ 공사 시행 및 준공 (결산)

-  공사기간 : 2019.  7월 ~ 12월

-  준공시기 : 2019. 11월 ~ 12월

▷ 시설물 준공 시기에 맞춰 시․구 합동 현장점검 시행

-  결산시기 : 2019. 12월

▷ 빗물관리량 산정 및 통계자료 작성 등 시설 준공 및 결산(실적) 작성

□ 사업추진 절차 흐름도

신청지 현장조사		선정심사 (2~3월)		설계시행 (4~7월)		설계자문 (5~6월)		공사시행 (7~11월)		현장점검 (12월)		공사완료 및 결산
(자치구 등)		(서울시)		(자치구 등)		(서울시)		(자치구 등)		(시·구 합동점검)		(자치구 등)