2019 사고이월 사업 관리카드

서울특별시 상수도사업본부

2019년 사고이월 사업 현황

연번	시행부서	공사명	공사개요		소요예산 (백만원)	비고
			구경 (mm)	연장 (m)
	합계	5건	700~ 900	4,800	13,100
1	서부 (급수)	마포구 월드컵로 노후 송배수관 정비공사	400	400	600	송배수관
2	남부 (시설)	양평동4가 323~당산동5가 32-1번지간 외 3개소 송배수관 정비공사	900	1,000	4000	송배수관
3	강남 (급수)	한남IC~압구정역간외 3개소 송배수관 정비공사	700	1,100	2,150	송배수관
4	강남 (급수)	경기고사거리~봉은사역사거리간외 1개소 송배수관 정비공사	1350	800	4,250	송배수관
5	강서 (급수)	오류동 118-39외 1개소 송배수관 정비공사	500	1,500	2,100	무단수

□ 사업개요(서부수도- 급운) - 1

○ 공 사 명 : 마포구 월드컵로 노후 송배수관 정비공사

○ 위    치 : 월드컵북로 227~월드컵북로 189

○ 개    요 : D=400㎜, L=400m(기존관 ‘80CIP400)

○ 공사기간 : ‘19.9.23~’20.5.31

○ 공 정 율 : 9%

○ 소요예산 : 600백만원

□ 사고이월 사유

○ 문래동 수질사고 발생 이후 추경사업으로 하반기 발주 공사건으로 교통소통대책 수립지연 등으로 연내 공사완료가 불가하여 이월

□ 위 치 도

완료구간 :
잔여구간 :

□ 사업개요(남부수도- 시설) - 2

○ 공 사 명 : 양평동4가 323~당산동5가 32-1번지간 외 3개소 송배수관 정비공사

○ 위    치 : 양평동4가 323~당산동5가 32-1번지간 외 3개소

○ 개    요 : D=900㎜, L=1000m(기존관 ‘71 SP 900)

○ 공사기간 : ‘19.5.20~’20.5.30

○ 공 정 율 : 73%

○ 소요예산 : 4,000백만원

□ 사고이월 사유

○ 수도자재관리센터에서 입찰공고 한 강직관이 1회 유찰되어 납품 지연에 따른 공사기간 부족으로 이월

□ 위 치 도

□ 사업개요(강남수도- 급수) - 3

○ 공 사 명 : 한남IC~압구정역간외 3개소 송배수관 정비공사

○ 위    치 : 한남IC입구~압구정역간

○ 개    요 : D=700㎜, L=1100m(기존관 ‘80 SP 700)

○ 공사기간 : ‘19.4.11~’20.4.27

○ 공 정 율 : 96%

○ 소요예산 : 2,150백만원

□ 사고이월 사유

○ 교통소통수립대책 지연 및 소음으로 인한 공사중지 민원으로

절대공기가 부족한 상황에서 동절기 굴착통제 시행으로 이월

□ 위 치 도

완료구간 :

잔여구간 :

□ 사업개요(강남수도- 급수) - 4

○ 공 사 명 : 경기고사거리~봉은사역사거리간외 1개소 송배수관 정비공사

○ 위    치 : 경기소사거리~봉은사역사거리간

○ 개    요 : D=1350㎜, L=800m(기존관 ‘79 SP 1500)

○ 공사기간 : ‘19.5.9~’20.4.30

○ 공 정 율 : 92%

○ 소요예산 : 4,250백만원

□ 사고이월 사유

○ 경기고사거리 연결공사 위치에 다수의 장애물이 산재되어, 연락공사가 변경됨에 따라 공사구간 증가로 절대공기가 부족한 상황에서 도로굴착 통제시행으로 이월

□ 위 치 도

완료구간 :

잔여구간 :

□ 사업개요(강서수도- 급수) - 5

○ 공 사 명 : 오류동 118-39외 1개소 송배수관 정비공사

○ 위    치 : 오류동 89-5~108번지외 1개소(경인로, 연동로)

○ 개    요 : D=500㎜, L=1500m(신설관 부설)

○ 공사기간 : ‘19.9.16~’20.6.30

○ 공 정 율 : 52%

○ 소요예산 : 2,100백만원

□ 사고이월 사유

○ 문래동 수질사고 발생 이후 하반기 발주 공사건으로 교통소통대책 수립지연 및 동절기 굴착통제 조기시행 등으로 연내 공사완료가 불가하여 이월

□ 위 치 도

공사완료

잔여구간